공사시행 단계별 업무안내

단 계	업무종류	세부사항	업무담당
			발주자	지원업무 담당자	감리원	공사업자
공사 착공	․인터페이스 관리	․인터페이스 관리 계획	승인		작성, 검토, 확인, 보고	합동회의
		․기존 운영노선과 신설 노선 시스템 분석 (관제, 기계실 등)	승인		작성, 검토, 확인, 보고	합동회의
		․운영사 요구사항 정리	승인		작성, 검토, 확인, 보고	합동회의
		․열차운전계획과 관련 운영사와 협의	주관		작성, 검토, 확인, 보고	합동회의
		․최소 운전시격 관련 시스템 설계 검토	승인		작성, 검토, 확인, 보고	합동회의
		․신호~차량~PSD 인터페이스 정리	승인		작성, 검토, 확인, 보고	합동회의
		․신호·통신·전력 관제실 간 인터페이스 정리	승인		작성, 검토, 확인, 보고	합동회의
		․시스템별 네트워크 구성 정리	승인		작성, 검토, 확인, 보고	합동회의
		․타 분야(토목, 궤도, 차량 등)와 인터페이스 정리 ※ 차량한계, 건축한계	승인		작성, 검토, 확인, 보고	합동회의
공사 시행	․시스템 성능검증	․시스템 검증계획 작성	승인		작성, 검토, 확인, 보고	합동회의
		․인터페이스 관리항목을 차량시운전 시험항목에 반영	승인		작성, 검토, 확인, 보고	합동회의
		․기존 구간과 신설 구간 간 시스템 연동시험	승인		작성, 검토, 확인, 보고	합동회의
		․시스템 성능검증 결과	승인		작성, 검토, 확인, 보고	합동회의
	․공정관리	통합공정현황보고 (시스템통합관리)			작성, 검토, 확인, 보고

단 계	업무종류	세부사항	업무담당
			발주자	지원업무 담당자	감리원	공사업자
공사 시행	․차량 시운전 관리 (시스템 성능검증)	․시운전 관리계획서	승인		검토, 확인, 보고	합동회의, 작성
		․시운전 조직편성 및 임무			검토	작성
		건축한계 측정시험 및 조치계획 작성 (토목시공부서에서 주관)			지시, 작성, 확인, 보고
		․열차투입 관련 운영사와 협의			주관, 검토, 확인	작성
		․시운전 지도 관리			검토, 확인, 지시	작성
		․부진 시운전 만회대책			지시, 검토, 확인, 보고	작성
		․시운전 현황보고			검토, 확인, 보고	보고
		․시운전 결과보고			검토, 확인, 보고	작성
	․철도종합시험운행 사전 준비 (시스템 성능검증)	․종합시험운행 T/F 조직편성 및 임무	주관		승인, 검토, 작성
		․교통안전공단 및 운영사와 사전협의	주관		검토, 확인, 보고
		․연간계획 작성	승인		검토, 확인, 보고	합동회의, 작성
		․종합시험운행 시행 계획서	승인		검토, 확인, 보고	합동회의, 작성
		․사전점검 관리			검토, 확인, 지시	작성
		․사전점검 결과			검토, 확인, 지시	작성
		․철도시설의 기술기준 점검 관리			검토, 확인, 지시	작성
		․철도시설의 기술기준 점검 결과			검토, 확인, 지시	작성

단 계	업무종류	세부사항	업무담당
			발주자	지원업무 담당자	감리원	공사업자
공사 시행	․철도종합시험운행 시설물검증시험 관리 (시스템 성능검증)	․시설물검증시험 관리계획서	승인		검토, 확인, 보고	합동회의, 작성
		․시설물검증시험 조직편성 및 임무			검토	작성
		․열차투입 관련 운영사와 협의			주관, 검토, 확인	작성
		․시설물검증시험 현황 관리	주관		검토, 확인, 보고	작성
		․시설물검증시험 결과	승인		검토, 확인, 보고	작성
	․철도종합시험운행 영업시운전 관리 (시스템 성능검증)	․영업시운전 관리 계획서	승인		검토, 확인, 보고	합동회의, 작성
		․영업시운전 조직편성 및 임무			검토	작성
		․열차투입 관련 운영사와 협의			주관, 검토, 확인	작성
		․영업시운전 현황 관리	주관		검토, 확인, 보고	작성
		․영업시운전 결과	승인		검토, 확인, 보고	작성