김기대의원(도시안전건설위원회, 더불어민주당)

□ 요구번호 : 862

□ 요구내용

◌ 서울시 노후하수관로 현황

1. 노후관로 현황(30년 이상/ 20년 이상)

2. 최근 노후 하수관로 정비 실적 및 예산(km/30년 이상/20년 이상 구분)

3. 노후 하수관로 정비 계획안 내용 일체

4. 지반침하 발생건수 현황

1. 노후관로 현황

(단위 : km, 2016. 12월 기준)

총 연장	10년 미만	10년 이상 ~ 20년 미만	20년 이상 ~ 30년 미만	30년 이상
10,682	1,809 (16.9%)	1,333 (12.5%)	2,158 (20.2%)	5,382 (50.4%)

2. 최근 노후 하수관로 정비 실적 및 예산

- 도로함몰 예방 노후하수관로 정비사업(‘17~’20년)

구 분	합계	’17년	’18년	비고
정비실적	104km	85km	19km	30년 이상
사업비	2,102억원	839억원	1,263억원	‘18년 국비 391억원 미배정

※ ‘18년 정비계획 84km중 19km 정비완료(9월말 기준)

3. 노후 하수관로 정비 계획

- 기  간 : ’17. 1. ~ ’20. 12.

- 내  용 : 노후 하수관로 2,720㎞ 실태조사 결과 308㎞ 긴급 정비

- 사업비 : 4,596억원(국비 1,431, 시비 3,165)

- 연차별 정비계획

구 분			계	’17년	’18년	’19년	’20년
정비대상(㎞)			308	85	84	81	58
사업비 (억원)	합 계		4,596	839	1,263	1,334	1,160
		시 비	3,165	529	872	934	830
		국 비	1,431	310	391	400	330

4. 지반침하 발생건수 현황

구 분		최근5년 (’13~’17)	’13년	’14년	’15년	’16년	’17년
합 계		3,581	850	779	734	597	621
	1. 하수도(74%)	2,656	753	525	504	423	451
	2. 상수도( 2%)	77	8	21	16	25	7
	3. 기 타(24%)	848	89	233	214	149	163

작성자	기 관 명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (물재생계획과)	담당사무관	심형보 이두환
	☎ 2133-3795	주 무 관	이승주 김민석
	작 성 일 : 2018. 10. 26.