이성배 의원(주택공간위원회, 국민의힘)

요구번호 : 58 [잠실대교 남단 주변 연결체계 개선사업]

사업개요

추진경위

현황

향후계획

□ 의원님께서 요구하신 ‘잠실대교 남단IC 연결체계 개선공사’ 관련 자료를 다음과 같이 제출합니다.

1. 사업개요

○ 위    치 : 잠실대교 남단 IC 일원

○ 규    모 : 연결로 3.33㎞(신설 3개소 2.11㎞, 개량 4개소 1.22㎞)

- 지하차도 1개소(300m), 교량 1개소(33m)

○ 사업기간 : 2020.12 ~ 2025.11.

○ 총사업비 : 44,643백만원

2. 추진경위

○ ’20.11. : 공사 계약 체결 및 착공

○ ’21.07. : 하천점용허가(서울지방국토관리청) 승인

○ ’22.12. : 중앙부 도달기지 흙막이가시설 1단계 설치

○ ’23.01. : 종점부 추진기지 비개착 구간 강관추진 시공 중

3. 현 황

ㅇ 공정률 : 15.6%

ㅇ 추진공정

- 종점 추진기지 비개착 구간 강관추진 및 중앙 도달기지 흙막이가시설 시공 중

- Ramp-C : 흙막이가시설 공사(어스앵커 인장) 및 옹벽기초 토공사 중

- Ramp-D : 흙막이가시설 공사(띠장설치 및 어스앵커 인장) 시공 중

ㅇ 위치도

4. 향후계획

ㅇ ’23.12. : Ramp-A, C 옹벽 및 포장공사 완료

ㅇ ’23.06. : Ramp-D 교량공사 및 옹벽, 포장공사 완료

ㅇ ’25.03. : Ramp-B 지하차도 개착구조물공사 완료

ㅇ ’25.05. : Ramp-E, F, G 배수공 및 포장공사 완료

ㅇ ’25.11. : 부대공사 및 준공

작성자	기 관 명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	도시기반시설본부 (토목부)	담당사무관	김 동 현
	☎6438-2122	주 무 관	정 성 오
	작 성 일 : 2023. 1.16.