□ 추진경위

○ '01. 7 : 용산 제1종 지구단위계획 결정

○ '06. 1 : 철도부채(약 4.5조원) 해결위해 정부차원의 지원 필요성 제기

(대통령 연두기자 회견)

○ '06. 8 : 용산역세권 개발 포함, 철도경영개선 종합대책수립(국토부)

○ '07. 8 : 서울시 - 철도공사간 공동 합의문(통합개발) 발표

○ '10. 4 : 광역교통개선대책 수립(국토해양부 승인)

○ '10. 4 : 도시개발구역지정 및 개발계획수립 고시

○ '11. 7 : 사업정상화 방안 발표(코레일, 드림허브)

○ '11.10 : 사업시행자 지정 및 사업인정고시(10.27 토지세부목록 고시)

○ '12. 8 : 보상계획 발표 및 이주대책 안내(드림허브)

○ '13. 3 : 시행자 디폴트(채무불이행) 발생

○ '13. 3 : 코레일, 사업정상화 방안 발표

○ '13. 3 : 서울시, 코레일 사업정상화 방안 적극 협조 기자설명회

○ '13. 4 : 코레일, 용산사업 토지매매 및 사업협약 해제 결정

○ '13. 4 : 코레일, 토지대금 1차분(5,470억원) 반환

○ '13. 4 : 코레일, 사업협약 해제 통지

○ '13. 6 : 코레일, 토지대금 2차분(8,500억원) 반환

○ '13. 7 : 코레일, 협약이행보증금(2,400억원) 수령(서울보증보험)

○ '13. 9 : 코레일, 토지대금 최종 3차분(1조 197억원) 반환

○ '13.10 : 코레일, 소유권이전 등기 신청(10.4일 이전등기 완료)

○ '13.10  : 사업시행자 지정취소 및 도시개발구역 지정 해제

□ 향후계획

○ 철도정비창 부지가 코레일과 민간사업자간에 토지소유권 반환 관련 소송 진행중으로 소송 등 현안사항 마무리 되어 재추진 여건이 조성되면 향후 추진과정에서 적극 협조