한강공원 조명등 에너지절약 운영 시범사업

<기전설비1과>

한강공원내 조명시설에 디밍제어시스템(조명 밝기 자동조절)을 적용하여 에너지 및 예산 절감효과 기대

작 성 자	시설부장 :차광재 ☎3780-0830 기전설비1과장 : 김남수 ☎0669 담당 : 강희진 ☎0659

1		조명신설구간 분전반디밍제어시스템 시범운영

□ 사업목적(필요성)

○ 조명시설 신설구간 LED에 적합한 분전반디밍제어시템으로 개선하여 전력소비 최소화를 위한 시범적용

□ 사업개요

○ 위    치 : 행주대교 ~ 경인아라뱃길

○ 규    모 : 분전반디밍제어시스템(자전거도로등 70등, 분전반 2면)

○ 추진근거 : 서울시 LED조명 설치 및 에너지절감 계획

○ 사업기간 : ‘16. 2 ~ 6월

○ 소요예산 : 2,600천원(램프모뎀, 분전반프로그램)

□ 사업내용

○ 행주대교 ~ 경인아라뱃길 신설구간 자전거도로등 70등 분전반디밍제어시스템 적용

※ 한강공원내 전체 자전거도로등(1,280등) 반영 소요금액 : 584,000천원

(등주 및 등기구 포함)

□ 추진계획

○ ‘16. 2 ~ 3월 : 설계 및 발주,  ○‘16. 4 ~ 6월 : 공사 시행

○ ‘16. 7 ~ 12월 : 에너지 절감 운영시스템  모니터링

□  기대효과

○ 전력사용량(개량전) : 70등 × 150W × 12h × 365일 = 45,990kW

○ 전력사용량(개량후) : 70등 ×  50W × 12h × 365일 × 0.5(절감량)=7,665kWh

※ 자전거도로 전체 설치시 절감액 : 1,280등×550kWh(년)×94원/kWh=66,170천원

<붙임>

조명신설구간 디밍제어시스템 시범운영

* 2016년 예산요구서와 동일한 수준으로 자세히 작성

□  예산(안) 총괄

(단위 : 백만원)

총 예 산	2016예산(안)	2017예산(안)	비고
610	26	584	‘16신설, ’17기존

□ 예산과목별 예산(안)

구 분			2016예산(안)	비고
계
	(예산과목)
		한강공원조명등에너지절약운영시범사업
		조명신설구간 디밍제어시스템 시범운영	26,000,000	행주대교 남단~경인아라뱃길
	(예산과목)
		(세부사업명)
		(세부사업명)

※ 예산과목별 구분 작성

□  2016년도 예산(안) 산출 근거 (※ 세부사업이 있는 경우, 사업별 구분작성)

<분전반디밍제어시스템 시범운영>

￭ 설치비(371,428원/등) × 설치등수(70등) = 약26백만원

‧ 모뎀(PLC통신, 등기구 내장) 300,000원 × 70등 = 21백만원

‧ 게이트웨이(프로그램제어기, 분전반 내 설치) × 2대 = 약 5백만원