신기술(비굴착 관 갱생) 시험시공 시행지침(개정안)

2015. 9.

	서 울 특 별 시 (상수도사업본부)

목        차

제Ⅰ장. 적용기준	1

제2장 사전 준비

1. 시험시공 신청 및 접수	5

2. 대상 선정 및 준비	5

제3장 시험시공

1. 시험시공 주관부서	6

2. 시 공	6

제4장 시험시공 평가위원회 구성 및 운영

1. 위원회 구성 및 기능	7

2. 운영	7

3. 평가기준	8

제5장 제출서류 등 기타

1. 제출서류	8

2. 제출부수	9

3. 작성시 유의사항	9

첨부 : 각종 제출 서식 및 양식

제1장 적용기준

제1조(목적) 이 지침은 서울특별시 상수도사업본부 및 수도사업소에서 시행하는 상수도관 비굴착 갱생(신기술) 공법 사전 성능검증 및 현장적용을 위한 시험시공 방법 및 기준을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(시험시공 대상) 시험시공 대상은 건설기술진흥법 제14조 및 환경기술 및 환경산업 지원법 제7조의 규정에 의하여 검증 또는 인증된 신기술로 한다.

제3조(시험시공요청 및 승인)

① 건설기술진흥법 제14조 및 환경기술 및 환경산업 지원법 제7조의 규정에 의하여 신기술(비굴착갱생) 검증 및 인증을 받아 시험시공을 하고자 하는 자는 상수도사업본부의 승인을 받아야 한다.

② 상수도사업본부는 시험시공 요청이 있는 경우 시험시공이 이루어질 수 있도록 적극 협조 한다.

③ 시험시공을 하고자 하는 자는 자재 및 장비, 인력 등을 확보하고 별첨〔양식 1〕에 의하여 신청한다.

④ 시험시공 대상(관종, 구경)은 신기술인증서에 정한 범위 내에서 선정 시공한다.

⑤ 이 기준에서 정하지 아니한 사항 또는 해당 사업의 특성상 이 기준을 적용하기 곤란하다고 인정되는 경우에는 그 기준을 별도로 정하여 적용할 수 있으며, 이 경우 조정내용 및 사유를 명확히 하여야 한다.

제4조(적용범위) 본 기준은 상수도관 비굴착갱생(신기술) 공법으로 시험 시공하는 공사에 적용한다.

제5조(시험시공 주관부서)

① 시험시공의 신청 및 대상선정은 상수도사업본부(급수부)에서 주관하여 관할 수도사업소(급수운영과, 시설관리과)와 협의하여 시행한다.

② 시험시공 신청을 받은 상수도사업본부(급수부)에서는 신청서류의 적정성 여부를 검토하여 접수 한다.

③ 시험시공 대상 현장을 관할하는 수도사업소(급수운영과, 시설관리과)에서 계획수립, 위치선정(본부협의)에 대한 행정업무를 시행하고, 신청인으로부터 시공에 필요한 도로굴착 승인 및 교통처리계획 협의자료 등을 제출받아 원활한 시험시공이 될 수 있도록 행정업무를 적극 시행하여야 한다.

④ 상수도사업본부(급수부)에서는 시험시공의 객관적인 검증을 위하여 해당 수도사업소와 협의하여 내▪외부 전문가로 신기술 평가단을 구성 평가하고 평가결과 이상이 없을 경우 현장에 적용한다.

제6조(신기술 평가단 구성)

① 신기술 평가단 구성 및 운영은 상수도사업본부에서 해당 수도사업소와  협의하여 시행한다.

② 평가단 구성은 5명으로 구성한다.

- 내부(2명) : 연구원1명, 해당 수도사업소과장 1명

- 외부(3명) : 상하수도기술사, 신기술 심의위원 등

- 간     사 : 배수과 담당주무관

제7조(신기술 평가단 운영)

① 신청인 신기술 개발자는 공법 설명 자료를 작성하여 평가단에 제출하고 설명 및 질의  응답에 참여할 수 있다.

- 공법설명자료 사전제출 : 10부

② 평가단원은 별첨 평가표에 의하여 평가하고, 평가단장은 평가단원의 평가결과를 종합하여 현장 적용여부를 결의한다.

③ 간사는 평가단을 운영하고, 회의록 작성 및 주요 진행과정을 촬영하여 향후  평가 대상 업체에서 이의 신청시 증거자료로 활용할 수 있도록 한다.

제8조(시험시공 대가지급 및 원상복구)

① 노후관 정비대상 관로에 대한 시험시공 비용은 신청인(신기술 개발자)이 부담 한다.

② 시험시공 구간에 품질에 이상이 있거나, 시설물의 손괴가 발생할 경우  신청인 부담으로 원상복구 하도록 계약서(합의서)에 명시 한다.

제9조(평가결과 통지) 평가완료 후 평가결과를 시험시공 신청인에게 통보한다.

제10조(경과규정) 이 지침은 서울특별시상수도사업본부 방침으로 결정하며, 이지침 시행 후 동 방침 및 상위 규정이 변경된 경우에는 변경된 방침 또는 규정에 따라야 한다.

시험시공 업무 절차도

업무절차		주 요 내 용	기간
시험시공 신청 접수 (신기술 개발자)		인증, 검증을 받은 신기술(비굴착 갱생) 개발자가 상수도사업본부(급수부)에 신청 (신청서 검토 후 접수여부 결정)	5일
□
시험시공 대상 선정 (본부, 수도사업소)		본부와 수도사업소 협의, 시험시공 위치 선정 시행중인 송배수관 정비사업 구간 우선 선정 (상수도사업본부 및 수도사업소)	15일
□
시험시공 준비 (수도사업소, 개발자)		시험시공 계획수립 ∙자재, 인력, 장비도입 등 계획서 작성제출 도로굴착 승인, 교통협의 등 행정조치(개발자) 신기술 활용심의(수도사업소)	7~30일
□
공사계획 및 설계 (수도사업소, 개발자)		공사계획 및 공사설계도서 작성	10일
□
시험시공 계약 등 행정조치 (수도사업소, 개발자)		설계도서 등 시공계획 검토(수도사업소) 시험시공에 대한 이행 합의서 징구(수도사업소) 시험시공계획 본부 보고	7~30일
□
신기술 평가단 구성 (본부, 수도사업소)		평가단 구성 및 평가자료 준비	5일
□
시험시공 및 평가 (본부, 수도사업소, 개발자)		시험시공 신기술 평가 현장적용여부 결정	15일
□
시험시공 결과보고 및 통보(본부)		시험시공 결과보고(본부) 현장 적용여부 통보(본부→개발자)	3일

※ 기간은 개략적 소요일수로 사정에 따라 변동 가능

제2장 사전 준비

1. 시험시공 신청 및 접수

가. 시험시공 신청을 받은 상수도사업본부(급수부)에서는 신기술의 적정여부 및 현장적용 가능여부를 판단하여 시험시공을 진행한다.

① 상수도사업본부에서는 시험시공 가능여부 판단을 위하여 신기술 공사와 관련된 지침서(시방서), 유지관리지침서, 원가계산서, 자재 및 장비, 기술인력 확보 여부 등을 확인 한다.

나. 시험시공에 소요되는 공사비 및 부대 비용은 신기술 개발자가 부담하는 것으로 사전에 신기술 개발자에게 안내하여 이행하도록 한다.

다. 상수도사업본부(급수부)에서는 시험시공 요청이 있는 경우 원활한 시험시공이 이루어질 수 있도록 적극 협조 한다.

라. 신기술 개발자가 제출하는 자료는 반환하지 않으며, 자료 작성 및 제출에 소요되는 비용은 개발자의 부담으로 한다.

2. 대상선정 및 준비

가. 시험시공 대상 선정은 상수도사업본부(급수부)에서 정비가 필요한 관로를 대상으로 관할 수도사업소와 협의하여 선정한다.

나. 대상은 신기술인증 범위(관종, 구경)내 시설물로 하며, 비굴착 갱생공법의 취약부분인 곡관부, 분기부 등을 포함하여 시공 될 수 있도록 선정한다.

다. 신기술 개발자는 시험시공과 관련 도로굴착 승인, 교통처리계획, 공사 설계서 등을 주관하여 시행하고 위 사항에 대해서 수도사업소는 적극적으로 협조 한다.

라. 신기술 개발자는 시험시공계획서 및 설계도서를 작성하여 수도사업소의 검토 승인을 받아야 하며, 수도사업소에서는 건설신기술활용심의를 거쳐 시행하여야 한다.

마. 시험시공 주관부서에서는 자재의 수질 안전성, 사용 장비의 적정성, 기술인력 확보 등 시험시공에 따른 전반적인 준비상태를 현장 확인한다.

제3장 시험시공

1. 시험시공 주관부서

가. 시험시공은 상수도사업본부 급수부에서 주관하고 현장 관련 업무는 관할 수도사업소(급수운영과, 시설관리과)에서 주관한다.

나. 관할 수도사업소에서는 신기술 평가가 원활하게 이루어지도록 신기술 개발자 및 현장과 보고체계를 유지하고 상수도사업본부에 보고한다.

2. 시험시공 계약방법

가. 시험시공에 대해서는 공사도급표준계약서에 준하여 관할 수도사업소에서는 신기술개발자와 시험시공 이행 합의서(양식 2), 안전관리 서약서(양식 3), 청렴 서약서(양식 4)를 작성 후 시험시공을 실시한다.

나. 시험시공 이행 합의서에는 상하수도설비공사업면허 소지자 2인의 연대보증이 포함되어야 한다.

3. 공사계획 및 시공

가. 관할 수도사업소 발주부서에서는 신기술 개발자로 부터 급수계획, 교통처리계획, 자재 및 장비 인력수급 등을 포함하는 시험시공 계획서를 제출받아 검토하여 시행한다.

나. 시공방법은 신기술로 승인된 방법(시방서, 세부지침서)에 따라 시공하도록 한다.

다. 신청인이 상하수도설비공사업 면허가 없는 경우 상하수도설비공사업 면허 소지자로 하여금 시공토록 하여야 한다.

라. 신기술 공종을 제외한 공종에 대해서는 일반시방서. 상수도공사 표준시방서 등에 따라 시공하도록 하여야 한다.

마. 시험시공 주요장면은 동영상 및 사진으로 촬영하여 향후 평가에 활용토록 한다.(동영상의 화질은 100만화소 이상으로 한다)

바. 발주부서에서는 사전에 구성된 평가위원의 현장평가가 원활하게 이루어 질수 있도록 지원한다.

사. 신기술 개발자는 현장 안전관리를 철저하게 하여 사고발생을 예방 하도록 한다.

제4장 시험시공 평가단 구성 및 운영

1. 평가단 구성 및 기능

가. 상수도관의 비굴착 갱생공법에 따른 신기술의 현장적용을 위한 사전 성능검증을 위한 신기술의 시험시공 평가단을 구성한다.

나. 시험시공 평가단을 구성하여 항목별로 종합평가와 시공평가로 구분하여 평가한다.(양식 7, 8, 9)

다. 평가단 구성 : 위원 5명(내부 2명, 외부 3명)

라. 단장은 단원 중 호선으로 선정하며 평가에도 참여한다.

마. 신기술 관련 평가자료는 3일전까지 배포하여 충분한 검토가 이루어지도록 조치한다.

바. 평가단에서 수행하는 기능은 다음과 같다.

(1) 신기술 평가 의결

(2) 평가단 운영에 관한 사항 자문, 의결

(3) 신기술평가 기준, 적용 및 조정 등에 대한 사항 자문, 의결

(4) 신기술(비굴착갱생)의 현장적용 방안 자문의결

(5) 기타 주관부서의 장이 필요하다고 판단하는 사항

2. 평가단 운영

가. 평가주관부서는 평가가 충실하게 이루어질 수 있도록 충분한 시간과 자료를 제공하여야 한다.

(1) 시험시공이 단시간에 끝나는 공사가 아니므로 상수도관내부 갱생작업이 이루어지는 시간에 맞추어 상수도관 내부의 세정상태, 작업구 구축상태 등을 사전에 평가하고, 갱생작업 시공상태를 평가할 수 있도록 시간 배정

(2) 신기술 내용을 포함하는 기본 자료는 3일전 배포

나. 평가단원은 공정한 평가와 비밀유지 등을 확약하는 청렴서약서를 제출하여야 한다.

다. 평가주관부서는 공정한 평가를 위하여 일정시간을 정해 신기술 개발자가 평가대상 공법에 대해 설명할 수 있다.

(1) 공법설명은 참고자료를 제공하고 시공 현장이나 별도의 공간에서 시행할 수 있다.

라. 간사 및 업무담당자는 평가단의 원활한 운영을 위하여 필요한 사항을 지원한다.

(1) 기존 신기술이 있으면 기존신기술에 대한 자료를 제공할 수 있다.

바. 평가과정의 모든 절차는 사진촬영 등을 실시하여 보관하고, 평가 대상 업체에서 이의 신청시 증거자료로 활용할 수 있다.

3. 평가기준

가. 위생기준 평가는 수도법 시행규칙 제10조(위생안전기준) 및 서울시 수돗물(정수)수질검사 항목을 기준으로 하며, 시공성, 안전성, 경제성 등은 별도의 기준이 없는 한 KS 기준으로 한다.

나. 평가는 별첨 종합 평가표(양식 7)에 의하여 총점 90점 이상이며, 시공성 평가(양식 8, 9) 결과 감점의 합이 10점 미만인 경우 현장 적용에 적합한 것으로 판정한다.

총점은 위원별 평가점수를 합산하여 위원수로 나눈 평균값임

감점의 합은 위원별 평가점수를 합산하여 위원수로 나눈 평균값임

4. 항목별 평가기준 (평가표) : “참조” (양식 7), (양식 8), (양식 9)

제5장 제출서류 등 기타

1. 제출서류

가. 시험시공 신청서(양식 1)

나. 사업자 등록증

다. 신기술인증서 사본(시험시공 대상)

라. 기타 신기술 및 특허 보유현황(신기술 및 특허증서 사본)

마. 원가계산서

바. 평가에 필요한 공인기관 시험성적서(위생안전기준 및 구조적 적합여부 등)

사. 이행 합의서(양식 2) - 신청이후 상호 합의에 따라 합의서 작성시 완성됨

아. 공법 설명 자료

(1) 상수도관 복원성능 관련 설명자료

(2) 품질관리에 대한 설명자료

(3) 시공성을 설명할 수 있는 자료

(4) 경제성을 설명할 수 있는 자료

(5) 유지관리 및 기타 설명자료

(6) 공법 특이사항 및 장점 설명자료

2. 제출 부수

(1) 공법 설명서 : 10부 (평가단원 배포자료)

3. 작성시 유의사항 등

(1) 등록증 및 기타 제출서류 중 사본은 하단여백에 업체대표자 원본대조필을 날인하여야 한다.

(2) 평가에 필요한 서류를 위조, 변조, 허위등 부정한 방법으로 작성하여 제출한 경우에는 시험시공을 무효로 하고 향후 현장적용을 배제한다.

(3) 제출된 공법설명서의 내용은 신청서 접수 기관과의 합의 없이 변경할 수 없으며, 향후 현장 적용시 참고자료로 활용한다.

(4) 시험시공 주관기관은 필요시 업체에 추가 제안이나 자료를 요청할 수 있으며, 요청에 의해 제출된 자료는 평가 자료와 동일한 효력을 가진다.

(5) 제출된 서류는 반환하지 않으며, 서류 작성에 소요된 비용은 지급하지 않는다.

[양식 1]

비굴착 관 갱생(신기술)시험시공 신청서

※ 접수번호 :
신기술	명 칭
	인증번호
	유효기간
신청자 (개발자)	업 체 명	대표자		주민등록번호(법인등록번호)
주 소
전화번호	Tel)				E-mail
	H.P)
상기 신기술(비굴착 관 갱생)공법에 대하여 시험시공을 신청합니다. 2015 . . . 신 청 인 : (인) 붙임 : 1. 신기술 인증서 사본 1부. 2. 공법설명서 1부 3. 시험성적서(재료, 음용수수질) 각 1부 4. 지침서, 세부지침서 1부 5. 장비 및 인력 보유현황 1부. 서울특별시 상수도사업본부장 귀하

[양식 2]

시험시공 이행 합의서

○ 신기술명 :

○ 시험시공 신청인 : 주소                         성명

○ 시험시공 개요

- 공 사 명 :

- 위    치 :

- 규    모 : 관경 000㎜, 연장 000m

- 공사기간 :

- 하자담보책임기간 : 준공일로부터 “건설산업기본법시행령 제30조 별표4”에서 정하는 기간

신청인은 상기 신기술(비굴착 관 갱생) 시험시공과 관련하여 제출하는 공법설명서 및 평가 자료는 신의와 성실의 원칙에 따라 사실에 근거하여 작성된 사항으로 현장 적용시 신청인이 제시한 내용과 같이 이행할 것과,    공사 이행에 있어 공사에 소요되는 모든 비용을 부담할 것이며, 공사 시행 중에 발생할 인적․물적 피해에 대한 보상과 민․형사상 책임, 하자보수 보증 등 의무에 대하여 아래 보증인과 연대하여 책임을 진다.

○○수도사업소장은 신청인의 시험시공과 그 평가가 원활하고 공정하게 이루어질 수 있도록 행정절차 이행 등 지원에 적극 협조한다.

위 합의 서약을 함에 있어 신청인과 연대보증인은 각각 다음의 사항에 대하여도 확약하며 합의의 증거로 이 합의서를 작성한다.

1. 신청인은 본 합의 당시의 설계서와 공사계약일반조건, 공사계약특수조건, 청렴계약특수조건 등이 본 합의 서약의 일부분임을 확인하며 신의에 따라 성실하게 서약 내용의 의무를 이행한다.

2. 시험시공 구간에 품질에 이상이 있거나, 시설물의 손괴가 발생할 경우 신청인 부담으로 원상복구 한다.

2015.   .   .

신  청  인 : 주소, 상호                      성명 (인)

연대보증인 : 주소, 상호,                     성명 (인)

사업자등록번호, 건설업종, 전화번호

연대보증인 : 주소, 상호,                     성명 (인)

사업자등록번호, 건설업종, 전화번호

서울특별시 ○○수도사업소장                       (인)

첨부 : 안전관리서약서 1부.

[양식 3]

안 전 관 리  서 약 서

ㅇ 공 사 명 :

당사는 위 시험시공 공사를 시행함에 있어, 시공현장에 관계법령에 의한 소정의 자격을 소지한 안전관리 관계자(현장대리인 등)를 배치하여 공사현장에서 발생할 우려가 있는 각종 사고 예방조치에 최선을 다할 것이며, 만일 안전관리 관계자(현장대리인 등) 배치의무 불이행, 기타 사고 예방조치를 소홀히 하거나 “공사장 안전관리수칙”을 위배하여 사고가 발생하는 경우 관계법규에 의한 처벌은 물론 귀사업소의 어떠한 조치도 이의 없이 감수할 것을 서약합니다.

2015 .    .    .

서약자 : (회사명)

대표이사                  (서명)

○  ○  수도사업소장  귀 하

[양식 4]

청 렴 서 약 서

ㅇ 공사명 :

본인은 위 공사의 시험시공 평가를 위한 신기술 시험시공 평가위원으로 평가를 수행함에 있어 아래사항을 준수하고 관계 절차에 따라 공정하고 투명하게 수행할 것을 서약합니다.

1. 본인은 신기술 시험시공 평가위원회에서 취득한 평가기준, 평가내용 및 평가결과 등 제반사항에 대해 보안을 준수하겠습니다.

2. 본인은 위 공사와 평가 신기술 등에 직∙간접적으로 관련된 사실이 없음을 확인합니다.

3. 본인은 평가과장에서 이유 여하를 막론하고 금품 및 향응과 부당한 이익 제공을 요구하지도 않고 받지도 않겠습니다.

4. 평가위원으로 공정하고 객관적인 평가가 되도록 노력하겠으며, 위 내용을 위반할 시에는 귀 기관의 어떠한 조치도 감수하겠음을 서약합니다.

2015.  .  .

평가위원  성명              (서명)

[양식 5]

평가단 사전 의결사항

ㅇ 신기술명 :

서울특별시 00수도사업소에서 시행하는 현장적용을 위한 상기 신기술(비굴착갱생) 시험시공 평가를 함에 있어 평가기준 및 평가방법 등에 대하여 다음과 같이 의결함

○ 의결사항

20   년    월  일

평가단장                     서명

단  원                    서명

단  원                    서명

단  원                    서명

단  원                    서명

[양식 6]

평가단 개최결과 의결사항

ㅇ 신기술명 :

서울특별시 00수도사업소에서 시행하는 현장적용을 위한 상기 신기술(비굴착갱생) 시험시공 평가단 평가결과 다음과 같이 결정함.

○ 현장적용 여부 : 적용가능, 적용불가

20   년   월  일

평가단장                         서명

단  원                         서명

단  원                         서명

단  원                         서명

단  원                         서명

[양식 7]

신기술 시험시공 평가표

(종합평가)

□ 공법명(신기술보유자) :

□ 공사위치 :

□ 공사기간 :

□ 시 공 사 :

평가항목		평가내용	평가결과	비 고
요구 품질	재료의 안전성	위생안전기준(수도용자재 및 제품위생안전 공정시험방법 적용)	적정 / 부적정	KC 인증 등
	구조적 안전성	신기술 지정당시 세부지침서 항목의화학적, 물리적 안전에 대한 시험성적서	적정 / 부적정	KS규정 등
	장비 및 인력보유상태	장비:1조 이상, 인력:10명 이상 (최소 1개조 운용 장비 및 인력)	적정 / 부적정	증빙자료

평가항목	평가내용	배점	평가점수	비 고
품질관리	세정. 세척의 적정성	25점
	세정 후 취약부 보수 보강상태
	사용자재의 품질관리 적정여부
시 공 성	시공용이성 및 공정단순화(기계화시공)	25점
	신기술 시방서 준수
	인력 및 장비 적시 투입
경 제 성	시공비 절감	25점
	시공중 관리비 절감
	타공종의 공사비 절감에 기여
안 전 성	작업자 및 현장 안전관리 계획수림	15점
	안전사고 저감효과
유지관리 및 기타	유지관리 편의성	10점
	발생 폐기물처리 및 환경관리 상태
합 계		100점

2015년    월    일

평가단원 :                 (서명)

[양식 8]

신기술 시험시공 평가표(예시)

[시공성 평가(PE 라이닝)]

□ 공법명(신기술보유자) :

□ 공사위치 :

□ 공사기간 :

□ 시 공 사 :

평 가 항 목		육안 CCTV	적합	부적합	부적합 세부지적내용 (평가전 하자보수사항 포함)	감점
상수도관 내부 (직관부)	들뜸상태	CCTV	○
	처짐발생 여부	〃	○
	탈락, 균열여부*	〃		○	#1 → #2, 50m지점 탈락 1개소 #2 → #3, 25m지점 균열 1개소	4
	자재의 변형여부*	〃	○
곡관부	주름상태	〃		○	#1 → #2, 70m지점 주름 허용치 초과	1
	갱생상태	〃	○
분기부	분기점 접착상태	〃	○
	분기부분 파손여부*	〃		○	#1 → #2, 30m지점 파손	2
	들뜸여부	〃	○
단부처리 부분	단부링(접합부) 변형 여부	육안	○
	파손, 균열 여부*	〃	○
	접합부 부착상태	〃	○
라이닝 두께	적정여부(mm)*	〃	○
합 계						7

○ 감점기준 : 중대한 하자(파란색* 평가항목) ⇒ 지적 개소별  2점

일반적 하자 ⇒ 지적 개소별 1점

하자 치유가 불가한 경우 ⇒ 지적 개소별 10점

※ 1) 적합/부적합 판단 : 시방서 등 기준

2) 하자 치유가 불가한 경우 : 부적합 자재사용 및 시공불량으로 전구간의 30%이상 구간을 전면 재시공이 필요한 경우

2015년    월    일

평가단원 :                 (서명)

[양식 9]

신기술 시험시공 평가표

[시공성 평가(도장)]

□ 공법명(신기술보유자) :

□ 공사위치 :

□ 공사기간 :

□ 시 공 사 :

평 가 항 목		육안 CCTV	적합	부적합	부적합 세부지적내용 (평가전 하자보수사항 포함)	감점
상수도관 내부 (직관부)	부착 강도*
	탈락, 균열여부*
	도장 두께 적정여부*(mm)
곡관부	부착 강도*
	탈락, 균열여부*
	도장 두께 적정여부*(mm)
분기부	부착 강도*
	탈락, 균열여부*
	도장 두께 적정여부*(mm)
도막 핀홀 발생
도료 흘러 내림
합 계

○ 감점기준 : 중대한 하자(파란색* 평가항목) ⇒ 지적 개소별  2점

일반적 하자 ⇒ 지적 개소별 1점

하자 치유가 불가한 경우 ⇒ 지적 개소별 10점

※ 1) 적합/부적합 판단 : 시방서 등 기준

2) 하자 치유가 불가한 경우 : 부적합 자재사용 및 시공불량으로 전구간의 30%이상 구간을 전면 재시공이 필요한 경우

2015년    월    일

평가단원 :                 (서명)