신대방2동 마을활력소 조성 예산 추가요청 보고

신축 마을활력소의 장애물 없는 생활환경(BF) 인증을 위한 사업비를 추가 신청하여 주민 커뮤니티 공간 조성을 원활히 추진하고자 함.

Ⅰ		사업개요

사업기간 : 2017. 2 ~ 2018. 7월

사업규모 : 부지 141㎡(신대방동 385-17), 연면적 201㎡(3층)

사업내용 : 유휴부지에 마을공동체가 활동할 수 있는 마을활력소 조성

예 산 액 : 618백만원(시비 573, 구비 45)

집 행 액

(단위:천원)

구 분		예산액	이월액	집행액	집행예정	집행내역
합 계		617,683	577,967	117,123	500,560	-
자산취득비(시비)		33,000	33,000	-	33,000	-
시설비	시비	540,000	500,284	117,123	467,560	□설계용역 32,500천원 □BF 예비인증용역 7,216천원 □공사 선금 77,407천원
	구비	44,683	44,683

※ 현재 잔액인 500,560천원은 공사비 및 관급자재비, 물품구입비로 집행예정

Ⅱ		추진경과

2017. 2. 20. : 주민 커뮤니티 공간조성 시비보조금 교부

2017. 3~5월 : 신축을 위한 부지 용도변경(도로→대지)

2017. 6월 : 활력소 공간구성을 위한 민관협력단 구성(16명)

- 공간구성을 위한 워크숍, 벤치마킹 및 간담회 개최(6.14/6.21/6.28)

2017. 7. 24. : 마을활력소 신축 공유재산심의회

2017. 8.  1. : 마을활력소 설계 용역(2017.8.1.~12.18.)

- 설계관련 의견수렴 주민간담회(8.30) 및 설명회(10.11) 개최

2017. 8.  1. : 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증(2017.8.1.~12.18.)

2017. 10. 11. : 마을활력소 주민설명회 개최

2017. 10. 18. : 신대방2동 마을활력소 경관심의 승인

2017. 12. 26. : 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 후 공사 계약 체결

- 동절기로 인한 공사 착공 : 2018. 2. 21.

- 마을활력소 신축 공사 중 : 7월 준공 예정

Ⅲ		추가예산 세부내용

추가예산 내역 : 총 30,000천원(시설비)

BF 본인증 비용 11,000천원(수수료 4,000천원/ 컨설팅 용역 7,000천원)

BF 적용을 위한 추가 공사비 19,000천원(자동문 설치 등)

필요 사유

장애물 없는 생활환경(BF) 인증

-「장애인․노인․임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」제10조의2에 따라 지방자치단체가 신축하는 공공건물의 경우 의무 인증대상임

- 2017년 공사 발주 시 예산부족으로 12월 구비 45백만원 추가 투입

‣ 현재 신축 공사 중이며 예비인증 완료, 공사 후 본인증 필요

※ BF 인증절차

< 예비인증 >			< 본인증 >
신청 전 사전검토 (도면 협의 및 현장방문)			신청 전 사전검토 (도면 협의 및 현장방문)
▼			▼
수수료 & 컨설팅 용역비 필요			수수료 & 컨설팅 용역비 필요

Ⅳ		행정사항

BF 본인증 취득과 적용을 위한 추가 예산교부 요청 : 서울시

- 2018. 7월 초 준공 예정으로 조속한 보조금 교부 필요