신림선(1공구) 공  사  추  진  현  황

(개나리 아파트 하부통과)

2017. 03

도시기반시설본부

신림선(1공구) 공  사  추  진  현  황 (개나리 아파트 하부통과)

개나리아파트 입주자대표의 민원제기에 따른 신림선 공사추진 현황 및 개나리 아파트 하부통과 공사안전 추진계획 보고사항임

□ 공사개요

공 사 명

신림선 도시철도 민간투자사업 (1공구)

공사구간

여의도 샛강역(9호선) ~ 대방역(국철) ~ 보라매역(7호선)

공사기간

2017. 2. 3. ~ 2022. 2. 2.

계약금액

1,339억원 (2007.7. 불변가 기준)

공동도급사

두산건설(주)(56.67), ㈜삼호(13.33),동양종합건설(주)(10),

동원건설산업(주)(10), ㈜오렌지이앤씨(10)

감 리 사

동부엔지니어링(주)외 2개사

시설규모

총연장	:	2.287km
정 거 장	:	4개소(환승정거장 3개소, 일반정거장 1개소)
본선환기구	:	1개소
터널	:	2.041km

□ 공사추진 경위

2015.08.12		실시협약 체결
2016.09.01		실시계획승인(용지보상 및 토공/가시설 분야)
2017.01.20		실시계획 변경승인(1차) (전체)
2017.02.03		공사착수

□ 공사추진 계획

□ 공사추진현황(2017.3.13.현재)

101 정거장 〈자매근린공원 앞〉	102E 환기구 〈보라매아파트 앞〉	103 정거장 〈영등포시설관리공단 앞>
가설휀스 설치 자매근린공원 수목 및 시설물 이설 공사 완료 (교목 46주, 시설물18EA)	- 지상지장물 이설(가로수 등) 보도축소 후 도로점용(2단계) (동작구L=142m, 영등포 L=116m) 줄파기 및 지장물 확인 ( 35m / 244m ) H-PILE 천공 및 항타 ( 9본 / 87본 )	- 지상지장물 이설(가로수 등) 보도축소 완료(1단계) (동작구L=108M, 영등포 L=37M)
[자매근린공원 조경수 및 시설물 이설]	[H-PILE 항타]	[보도축소(SET BACK)]

□ 개나리아파트 하부통과 구간 공사계획(101 샛강역~102 대방역)

구분	‘17년						‘18년				‘19년								‘20년			‘21년						‘22년			비고
	1Q	2Q			3Q	4Q
101정거장
	근접공사
					토공, 가시설(3층)														구조물, E&M
102정거장
	근접공사
					토공, 가시설(3층)															구조물, E&M
본선터널								‘18.5.			‘19.5~8
							굴착, 라이닝				(아파트통과)
시운전
																								종합시운전

- 101, 102정거장 토공 및 가시설 작업 후 터널공사 착수(‘18.5월 예상)

- 개나리아파트 터널 통과 계획 : ‘19.5월 ~ 19.8월(4개월 소요)

○ 지하 보상 현황

구분	지번	공부 면적 (㎡)	편입 면적 (㎡)	소유자
1	동작구 대방동504(대)	2,524	234.2	개나리아파트 (90세대)
2	동작구 대방동510(대)	892.3	6.5	신일해피트리 102동(24세대)
3	동작구 대방동511(대)	2,695.8	7.9	신일해피트리 101동(106세대)

- 보상추진상황 협의 : 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률에 의거 보상계획공고(‘16.10.28) 및 보상협의회 (‘16.11.30) 개최 등 보상 협의 추진 중

- 보상추진상황(공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률)

⦁ ‘16.10.28 : 보상계획 공고(동작구청)

⦁ ‘16.11.30 : 보상협의회 개최

⦁ ‘16.12월~현재  : 감정평가 및 협의보상 시행 중

○ 공사 중 소음/진동영향 검토 결과

(실시계획승인-환경평가 협의 한국종합기술 개나리아파트 하부통과 실시보고서)

평면도	진동영향검토 결과

- 해당구간은 본선터널 구간으로 공사중 소음은 지하터널내 공사로 영향이 없을 것으로 판단됨.

- 한국개나리아파트 및 신일해피트리아파트 통과구간은 일반주거시설로 허용진동기준은 0.3㎝/sec 임

․ 발파진동 허용기준(건교부-암발파설계 및 시험발파지침)

구분	유적,문화재	주택,아파트	상가	철근콘크리트건물 및 공장
허용진동치(cm/sec)	0.2	0.3~0.5	1.0	1.0~5.0

- 본 구간 시공시 소음/진동영향 최소화를 위해 터널 상반은 발파를 배제한 기계굴착으로 시행 예정

- 아파트에 발생하는 진동치는 검토결과 0.092㎝/sec로 허용진동기준을 크게 하회하는 것으로 검토됨

○ 인접건물 및 터널 안전 관리계획

(실시계획승인-환경평가 협의 한국종합기술 개나리아파트 하부통과 실시보고서)

평면도	터널굴착 패턴	계측계획
	-대구경 강관보강 그라우팅 (150˚) Φ114.3, L=12.0m, CTC(종) 5.6m -분할굴착 (①→②→③)

[터널공사 중 안정성 확보]

- 터널 상부 대구경 강관보강 그라우팅 및 차수공법 적용으로 건물 및 지반 안정성 확보

- 굴착 시 기계굴착(분할)을 시행하여 소음/진동 피해 발생치 않도록 조치 예정

- 아파트 구조물 공사중 계측 실시(1회/일~1회/주) (구조물경사계, 균열측정계, 진동소음측정)

- 노선주변 연도변 건물 사전조사 시행 예정 (터널공사 착수전_’18.5월)

- 인접건물 및 터널 안정성 확보를 위한 제3의 전문기관(토목학회) 검증용역 시행 예정(‘17.4~6월)

○ 운영 중 소음/진동영향 검토 결과

(실시계획승인-환경평가 협의 한국종합기술 개나리아파트 하부통과 실시보고서)

열차 소음에 의한 영향

예상층수 (층)	예측소음도 (db(A))	소음기준 (db(A))	결 과
1	44.7	60	만 족
5	47.3	60	만 족
10	46.7	60	만 족
15	45.2	60	만 족

- 운영중 열차 소음에 의한 영향을 검토한 결과 기준이내로 발생하는 것으로 검토됨

열차 진동에 의한 영향

- 이론식(서울지하철(중량전철) 추정식)을 이용한 진동영향 예측

- 유사사례(부산 도시철도 4호선 고무차륜 경전철) 진동측정분석 및 진동예측

검토 건물	이격거리	예측진동도(dB(V))	진동기준(dB(V))	결 과
개나리아파트 101동	26.37m	51.4	60	만 족

- 운영중 열차 진동에 의한 영향을 검토한 결과 기준이내로 발생하는 것으로 검토됨

□ 지하철공사 건물 하부통과 사례(참고자료)

○ 대표사례(예시)

지하철 9호선 906공구
		- 건 물 명 : 대동아파트 - 이격거리 : 5.23m - 보강공법 : 4중첩 직천공대구경강관 - 굴착공법 : 링컷 기계굴착

지하철 9호선 912공구
		- 건 물 명 : 반포주공아파트 - 이격거리 : 2.74m - 보강공법 : 3중첩 대구경강관다단 (수평제트그라우팅) - 굴착공법 : 링컷 분할 기계굴착

○ 통과사례(1~5호선:42건, 6~9호선:26건, 분당선:19건)

구 분	통과구간		저 촉 건 물
2호선	방배~서초		일반상가, 일반주택, 상지리츠빌아파트
	충정로~아편		일반상가, 일반주택
3호선	을지로3가~충무로		일반상가
	충무로~동대입구		일반상가
	고속터미널~교대		반포미도아파트, 대림빌라
	남부터미널~양재		일반성가
	학여율~대청		개포LG자이아파트
4호선	인덕원~평촌		일반상가
	신용산~이촌		일반상가
	혜화~동대문		일반상가
	성신여대~길음		길음금호어울림센터힐아파트
5호선	길동~강동		일반상가
	거여~마천		일반상가, 일반주택
	답십리~마장		일반상가
	마장~왕십리		일반상가, 일반주택
	왕십리~행당		일반상가, 일반주택
	행당~신금호		금호아파트
	신금호~청구		신금호파크자이아파트, 일반상가, 일반주택
	청구~동대문역사문화공원		일반상가, 일반주택
	동대문역사문화공원 ~을지로4가	일반상가
	종로3가~광화문	일반상가
	광화문~서대문	일반상가
	신길~영등포시장	일반상가
	신정~까치산	영림아파트, 일반상가
	송정~김포공항	강서센트레빌아파트, 일반상가
	김포공항~개화산	영림아파트, 일반상가
	송정~김포공항	강서센트레빌아파트, 일반상가
	김포공항~개화산	일반상가

구 분	통과구간	저촉 건물
6호선	대흥~광흥창	세양청마루아파트, 일반상가, 일반주택
7호선	도봉~수락산	도봉파크빌아파트
	중화~상봉	일반상가
	사가정~용마산	일반상가
	반포~고속터미널	고속터미널주차장
	고속터미널~내방	일반상가
	남성~숭실대입구	현대아파트. 신남성아파트, 일반상가
	남구로~가산디지털단지	일반상가, 일반주택
	천왕~온수	일반상가, 일반주택
	온수~까치울	일반상가, 일반주택
8호선	산성~남한산성	일반상가, 일반주택
9호선	사평~고속터미널	반포자이아파트, 고속터미널주차장
	노량진~샛강	일반상가, 일반주택
	등촌~중미	대동황토방아파트, 주유소
	신방화~공항시작	일반상가
분당선	청명~상갈	일반상가, 일반주택
	상갈~기흥	일반상가, 일반주택
	신갈~구성	일반상가, 일반주택, 관공서
	죽전~오리	일반상가, 일반주택
	정자~수내	파크뷰아파트, 일반상가
	개포동~구룡	개포상지리츠빌아파트
신분당선	광교~광교중앙	광교푸르지오아파트
	광교중앙~상현	광교센트럴푸르지오시티오피스텔
	상현~성복	일반상가
	수지구청~동천	일반상가
	판교~청계산입구	코오롱린든그로브아파트, 일반상가
	청계산입구~양재시민의숲	양재꽃시장, AT센터