- 신림선 도시철도 민간투자사업 -

‘안전개통’을 위한 시민 현장 모니터링단 운영 개요

신림선 개통시 예상되는 시민 불편사항에 대한 사전점검 및 적기개선을 위해 분야별 전문가와 일반시민이 참여하는 시민 현장 모니터링단 운영 실시

□ 추진배경

○ 개통 이후 이용 불편사항 사전파악 및 적기조치를 위한 선제적 점검 필요

○ 분야별 전문가 및 다양한 시민의 참여를 통한 다각적 검토의견 기대

□ 개    요

○ 추진기간 : '21. 11. 20. ~ '22. 03. 31.

□ 참여대상 모집	□ 모니터링단 운영	□ 점검결과 반영조치
'21.11.20. ~ 12.31.	'22.01.26.~ 02.23. -영업시운전 기간 중 1개월-	'22.03.01. ~ 03.31.

○ 참여대상 : 전문가 및 일반 시민 누구나

- 참여인원 : 총 4차 120명 참여 (1차당 30명 제한 … 코로나 확산 방지, 안전사고 예방)

- 모집방법 : 서울시 건설알림이 활용, 선착순 공개모집

□ 세부 추진계획

□	참여대상 모집		□전문가 단체 사전 협의 : 철도기술연구원, 지체장애인협회 등 □일반시민 선착순 모집 : 지역 주민, 대학생, 어르신 등 관심시민
□	모니터링단 운영		□정거장 등 각종 시설물 확인 및 열차탑승 → 시민 불편사항 확인 ※ 안전사고 예방을 위한 참여자 사전 안전교육 및 진행요원 배치
□	점검결과 반영조치		□전문가 및 시민 의견수렴 및 만족도 평가 (차수별 실시) □점검결과 개선사항 반영 : '22.3.31.

※ 현장 모니터링 점검동선

종합관제동	⇨	열차탑승 (보라매병원역 → 관악산역 → 샛강역)	⇨	점검 종료

사업추진 현황

○ 기    간 : '17.2. ~ '22.5.

○ 규    모 : 연장 7.8㎞, 정거장 11개소, 차량기지 1개소 (여의도 샛강역 ~ 관악산역)

○ 공 정 률 : 93.8% (´21.11. 기준)

분 야	실 적 (공정률, %)	진행 사항	잔여 공종
토 목	96.3	□정거장 출입구, 환승통로 공사 중	□지상부 복구(´22.3.)
건 축	86.8	□정거장 내부 마감 공사 중	□정거장 내부 마감(´22.1.)
설 비	89.8	□E/V, E/S 반입 및 설치 □배선 및 조명기구 설치	□시설물검증시험(´22.1.) □영업시운전(´22.4.)