신림선 전기분야 총사업비 변경 세부내역

(단위 : 천원)

구 분		변 경 내 용		변 경 전	변 경 후	증・감
총사업비 증・감		합 계		8,100,257	7,368,391	- 731,866
인・허가기관 요 구		계		4,120,137	3,636,008	- 484,129
	도시공원위원회 심의	보라매공원 개착 최소화에 따른 전차선 자재 및 배관, 배선 증가		0	200,267	200,267
	건설기술심의	104 변전소 삭제	소 계	3,933,369	3,258,681	- 674,688
			104 변전소 공사비	2,179,367	0	- 2,179,367
			차량기지 변전소 공사비	1,422,827	2,363,469	940,642
			차량기지 전차선 급전케이블 공사비	0	305,312	305,312
			104 전기실 공사비	331,175	589,900	258,725
	실시설계 VE	소 계		186,768	177,060	- 9,708
		정거장 콘센트 변경(일반 콘센트 ⇒ 대기전력 차단 콘센트)		5,188	20,824	15,636
		정거장 광고판과 행사안내표지판 조명제어 변경(수동 ⇒ 자동)		0	12,655	12,655
		정거장 전기실 상시부하 차단기 변경(ATS ⇒ ATCB)		181,580	143,581	- 37,999
주무관청 요 구	도시철도설비부	계		3,980,120	3,732,383	- 247,737
		변전소 에너지저장장치 수량 감소(4대 ⇒ 2대)		1,712,537	1,150,491	- 562,046
		송변전용 특고압 케이블 변경(일반 ⇒ 컬러)		2,053,966	2,230,972	177,006
		변전소(4개소) 냉방설비 추가		0	45,549	45,549
		종합관제동 전기실 발전기 삭제		52,118	0	- 52,118
		전기실(4개소) 변전소용 정류기반 이중화 구성		161,499	305,371	143,872