신속통합 1차공모 선정구역(21개소)

<2023.4.31.기준>

① 정비계획 용역발주	▶	② 개략계획(안) 마련 a. 착수회의 b. 시구합동회의 c. 주민간담회 d. 개략계획(안) 마련 및 신통기획(안) 수립 요청	▶	③ 신속통합기획(안) 수립 a. 착수회의 b. 원팀회의 c. MP 및 자문회의 d. 주민간담회 및 주민설명회 e. 신속통합기획(안) 마련 및 해당 자치구 시달	▶	④ 정비계획(안) 수립 및 정비구역 지정 및 계획 결정 a. 신통 반영 정비계획(안) 수립 b. 관계부서 협의 c.. 공람공고 및 구의회의견청취 등 d. 구역지정 입안 및 결정 (도시계획위원회 심의)
(區)		(區)		(市·區)		(區 입안 / 市 결정)
‘22. 1.~ 5.		‘22. 6.~ 9.		‘22. 9.~ ’23. 6.		‘23. 4 ~

연번	자치구	구역명(가칭)	면적㎡	단계	서울시 담당	자치구 담당부서
1	종로구	창신동23/숭인동56일대	84,354	③-c ~6월	김택환 2133-7208	종로구 도시개발과 2148-2683
2	용산구	청파2구역	83,788	③-c ~6월	김정인 2133-7187	용산구 재정비사업과 2199-7465
3	성동구	마장동 382일대	18,749	③-c ~6월	김정인 2133-7187	성동구 주거정비과 2286-6571
4	동대문구	청량리 19일대	27,981	④-a 4월~	변기환 2133-7189	동대문구 주거정비과 2127-4671
5	중랑구	면목동 69-14일대	58,540	④-a 4월~	박주형 2133-7234	중랑구 주택개발추진단 2094-6893
6	성북구	하월곡동 70-1일대	79,756	④-a 4월~	변재원 2133-7232	성북구 도시정비신속추진단 2241-2782
7	강북구	수유동 170일대	12,124	④-a 4월~	송영일 2133-7203	강북구 주거정비과 901-2553
8	도봉구	쌍문동 724일대	10,619	④-a 4월~	서상현 2133-7238	도봉구 재건축재개발과 2091-3414
9	노원구	상계5동 일대	192,670	③-c ~6월	최인호 2133-7237	노원구 재건축사업과 2116-3918
10	은평구	불광동 600일대	13,004	③-d ~6월	변기환 2133-7189	은평구 정비사업신속추진단 351-7473
11	서대문구	홍은동 8-400일대	71,860	③-c ~6월	김은선 2133-7233	서대문구 신통개발과 3140-8061
12	마포구	공덕동 A	82,320	③-c ~6월	김택환 2133-7208	마포구 주택상생과 3153-9315
13	양천구	신월7동 1구역	115,699	③-d ~6월	김정인 2133-7187	양천구 도시계획과 2620-3514
14	강서구	방화2구역(재촉)	34,906	④-a 4월~	이현수 2133-7222	강서구 도시재생과 2600-6747
15	구로구	가리봉동 87일대	37,672	③-d ~6월	서상현 2133-7238	구로구 도시개발과 860-2962
16	금천구	시흥동 810일대	38,859	④-a 4월~	강신욱 2133-7239	금천구 주거정비과 2627-1808
17	영등포구	당산동6가 104일대	31,299	③-e ~6월	강신욱 2133-7239	영등포구 주거사업과 2670-3531
18	동작구	상도14구역	50,142	③-c ~6월	박주형 2133-7234	동작구 도시정비1과 820-1386
19	관악구	신림7구역	75,600	③-c ~6월	최인호 2133-7237	관악구 주택과 879-6303
20	송파구	마천5구역(재촉)	106,101	④-a 4월~	김민경 2133-7218	송파구 주택사업과 2147-2897
21	강동구	천호A1-2구역	30,154	④-a 4월~	김택환 2133-7208	강동구 주택재건축과 3425-5993
합 계			1,256,197

신속통합 2차공모 선정구역(25개소)

(2023.4.31.기준>

① 정비계획 용역발주 a. 방침 b. 용역비 교부 c. 입찰 공고 d. 계약 및 착수	▶	② 개략계획(안) 마련 a. 착수회의 b. 시구합동회의 c. 주민간담회 d. 개략계획(안) 마련 및 신통기획(안) 수립 요청 (자문대상의 경우 자문 요청)	▶	③ 신속통합기획(안) 수립 a. 착수회의 b. 원팀회의 c.. MP 및 자문회의 d. 주민간담회 및 주민설명회 e. 신속통합기획(안) 마련 및 해당 자치구 시달	▶	④ 정비계획(안) 수립 및 정비구역 지정 등 a. 신통 반영 정비계획(안) 수립 b. 관계부서 협의 c.. 공람공고 및 구의회의견청취 등 d. 구역지정 입안 및 결정 (도시계획위원회 심의)
(區)		(區)		(市·區)		(區 입안 / 市 결정)
‘23. 1.~ 4.		‘23. 5.~ 10.		‘23. 7.~ ’23. 12.		‘24. 1 ~

연번	자치구	구역명(가칭)	면적(㎡)	진행단계	담당자	자치구 담당부서
1	종로구	창신동 23-606일대	133,845	① - c 용역발주	김택환 2133-7208	종로구 도시개발과 2148-2682
2	종로구	창신동 629일대	81,370	① - c 용역발주	김택환 2133-7208	종로구 도시개발과 2148-2682
3	용산구	서계동 33일대	112,599	① - d 용역발주	김정인 2133-7187	용산구 재정비사업과 2199-7462
4	성동구	사근동 293일대	28,465	① - d 용역발주	김정인 2133-7187	성동구 주거정비과 2286-6564
5	광진구	자양4동 57-90일대	139,130	① - d 용역발주	변기환 2133-7189	광진구 주거사업과 450-9703
6	동대문구	용두동 39-361일대	24,957	① - d 용역발주	변기환 2133-7189	동대문구 주거정비과 2127-4666
7	동대문구	답십리동 471일대(재촉)	102,735	① - d 용역발주	권예원 2133-7227	동대문구 주거정비과 2127-4579
8	중랑구	망우동 461일대	45,598	① - d 용역발주	박주형 2133-7234	중랑구 주택개발추진단 2094-6893
9	성북구	종암동 3-10일대	25,351	① - d 용역발주	변재원 2133-7232	성북구 도시정비신속추진단 2241-2842
10	성북구	석관동 62-1일대	62,086	① - d 용역발주	변재원 2133-7232	성북구 도시정비신속추진단 2241-2843
11	강북구	번동 441-3일대	32,877	① - d 용역발주	송영일 2133-7203	강북구 주거정비과 901-2556
12	강북구	미아동 791-2882일대	140,696	① - d 용역발주	송영일 2133-7203	강북구 주거정비과 901-2555
13	도봉구	방학1동 685일대	72,533	① - d 용역발주	서상현 2133-7238	도봉구 재건축재개발과 2091-3413
14	은평구	신사동 237일대	49,822	① - d 용역발주	변기환 2133-7189	은평구 정비사업신속추진단 351-7472
15	은평구	신사동 200일대	67,946	① - d 용역발주	변기환 2133-7189	은평구 정비사업신속추진단 351-7472
16	서대문구	남가좌2동 337-8일대	76,569	① - d 용역발주	김은선 2133-7233	서대문구 신통개발과 3140-8098
17	양천구	목2동 232일대	21,161	① - d 용역발주	김정인 2133-7187	양천구 도시계획과 2620-3511
18	구로구	고척동 253일대	62,239	① - d 용역발주	서상현 2133-7238	구로구 도시개발과 860-2567
19	구로구	가리봉동 115일대	90,875	① - d 용역발주	서상현 2133-7238	구로구 도시개발과 860-2534
20	금천구	시흥동 871일대	79,341	① - d 용역발주	강신욱 2133-7239	금천구 주거정비과 2627-1807
21	영등포구	대림동 855-1일대	42,505	① - d 용역발주	강신욱 2133-7239	영등포구 주거사업과 2670-3531
22	동작구	사당동 288일대	26,177	① - d 용역발주	박주형 2133-7234	동작구 도시정비1과 820-9265
23	동작구	상도동 279일대	126,218	① - d 용역발주	박주형 2133-7234	동작구 도시정비1과 820-9265
24	관악구	신림동 412일대	160,392	① - d 용역발주	김택환 2133-7208	관악구 주택과 879-6304
25	송파구	마천동 183일대(재촉)	79,069	① - d 용역발주	김민경 2133-7218	송파구 주택사업과 2147-2897
합계			1,884,556

※ 자문 대상 사업(4개소) : 개략계획(안) 수립 완료 후 주거정비과로 자문 요청(신속통합기획안 수립 제외 대상)