실무회의 결과보고

(경춘선 신내역 6호선 환승시설 사업)

1		실시개요

❍ 사 업 명 : 경춘선 신내역 6호선 환승시설 사업

❍ 회의안건

1) 분야별 사업추진 현황 및 계획

2) 현안문제 및 처리계획

❍ 일    시 : 2019. 01. 03(목) 15:00

❍ 장    소 : 기술본부회의실

❍ 참 석 자 : 토목 외 11개 분야(각 처 및 해당사업소) 담당자

2		회의결과

1. 분야별 사업추진 현황

분야	추진현황(`18. 12월)	추진계획(`19. 01월)
신호분야	∙ 신호시스템 제작(공정율 : 22%)	∙ 신호시스템 제작(`19. 3.까지 예정)
토목분야	∙ 수목이식(공정율 : 7%)	∙ 폐목처리
전기분야	∙ 전차선 공사 : 개찰 ∙ 역사, 송배전 공사 : 계약의뢰	∙ 전차선 공사 : 1월 착공예정 ∙ 역사, 송배전 공사 : 계약예정 (2월 중 착공)
궤도분야	∙ 계약의뢰	∙ 계약예정(1월 중 착공)
건축분야	∙ 계약의뢰	∙ 계약예정(2월 중 착공)
영업분야	∙ 차량기지 관리동 내 역무시설 공간 확보	∙ 신내기지 차량사업소 협의 중
차량분야	∙ 설계서 작성 및 철도시설관리공단 협의	∙ 서울시 계약심사의뢰 ∙ 계약의뢰 예정(2월 중 착공)
승강설비	∙ 발주 설계서 작성	∙ 계약의뢰 예정(2월 중 착공)
통신분야	∙ 발주 설계서 작성	∙ 계약의뢰 예정(2월 중 착공)
그 외 분야	∙ 사업추진 일정에 따라 정상 발주 추진 예정 - PSD 분야 : `19. 2. 발주예정(`19. 3. 계약) - 기계/소방 분야 : `19. 5. 발주예정

2. 현안사항 및 조치계획

현안사항	조치계획
∎차량세척기 배수시설공사 관련분야 이관요청<차량정비처> ① 세척고와 세척기를 연결하는 기초 ② 세척기에서 세척고(침전수)까지의 배수 배관 ③ 세척고에서 맨홀까지의 폐수배관 ∎노반공사(승강장 및 선로)를 위한 지장물 이설 시행요청<토목2사업소> - 승강장 설치공사(토목)의 `19. 5월 완공을 위해서는 `19. 2월말까지 노반공사가 완료 되어야 하므로, - `19. 2월초까지 지장물(통신, 신호, 전기) 이설 완료되어야 함.	∎관련분야 반영검토 요청 예정 - 세척기 기초와 세척고가 건축공사분에 해당하므로 세척기와 세척고를 연결하는 ①과 ②의 경우 건축공사에 반영하는 것이 적정한 것으로 사료되며, - ③의 경우 토목공사에 반영하는 것이 타당한 것으로 판단됨. ∎지장물 해당분야 착공 즉시 이설 필요 - `19.12월 개통을 위해서는 반드시 `19. 5월 토목공사가 완공되어야 하므로 적기 에 지장물이 반드시 이설될 수 있도록 협조 요망.

3		결론 및 계획

❍ 계약추진 현황

신호	토목	전기 (전차선)	궤도	건축	전기 (역사,송배전)	통신	승강기	차량	PSD	기계
기 시행중		`19.1월 착공예정		`19.2월 중 착공예정					`19.2월 발주	`19.5월 발주

❍ 상기 현안사항에 대하여 관련부서와 협의하여 공사가 원활히 추진될 수 있도록 협조 요청코자 함.  끝.