실무회의 결과보고

(경춘선 신내역 6호선 환승시설 사업)

1		실시개요

❍ 사 업 명 : 경춘선 신내역 6호선 환승시설 사업

❍ 회의안건

1) 분야별 사업추진 현황 및 계획

2) 현안문제 및 처리계획

❍ 일    시 : 2019. 01. 31(목) 15:00

❍ 장    소 : 기술본부회의실

❍ 참 석 자 : 토목 외 11개 분야(각 처 및 해당사업소) 담당자

2		회의결과

1. 분야별 사업추진 현황

분야	추진현황(`19. 01월)	추진계획(`19. 02월)
신호분야	∙ 신호시스템 제작(공정율 : 28%)	∙ 신호시스템 제작(`19. 3.까지 예정)
토목분야	∙ 폐목처리(공정율 : 13%)	∙ 진입로, 야적장 시공
전기분야	∙ 전차선 공사 : 계약체결 ∙ 역사 전기공사 : 계약체결 ∙ 송배전 공사 : 계약체결	∙ 전차선 공사 : 착공 ∙ 역사 전기공사 : 착공 ∙ 송배전 공사 : 착공
궤도분야	∙ 계약체결	∙ 착공 : 현장개설 및 조사
건축분야	∙ 계약체결	∙ 착공 : 현장개설 및 조사
차량분야	∙ 설계서 작성 및 철도시설관리공단 협의시행	∙ 계약의뢰 예정(3월 중 착공)
승강설비	∙ 계약의뢰	∙ 계약체결 예정(2월 중 착공)
통신분야	∙ 계약의뢰	∙ 계약체결 예정(2월 중 착공)
그 외 분야	∙ 사업추진 일정에 따라 정상 발주 추진 예정 - PSD 분야 : `19. 2. 발주예정(`19. 3. 계약) - 기계/소방 분야 : `19. 5. 발주예정

2. 현안사항 및 조치계획

현안사항	조치계획(의견)
∎열차운행계획수립 관련<승무계획처> - 적정 승무인력 확보필요	- 본 사업에 따른 인력확보(역무,승무)에 대해서는 기획처에서 직무분석(4월 예정) 결과 반영 예정으로 해당부서에서 기획처와 협의 요함
∎역무공간 조성관련<건축2사업소> - 신내차량사업소에서 위치변경 요청 (관리동 1층 로비 → 기술사업소 비축 자재창고) - 역무공간 내 시스템실 규격 결정 필요 - PSD, 전기, 통신 케이블 포설경로 결정 필요	- 신내차량사업소에서 역무공간 변경위치에 대하여 관련부서와 협의 후 건축2사업소로 통보(협의결과 설계 반영) - 각 분야의 시스템 규격을 취합 후 설계 - 각종 케이블 포설은 전기공사 설계에 기 반영된 위치에 포설 검토
∎기지내 시설보완 필요<신내차량사업소> - 퇴행선 설치 - 현 주차공간 수량 유지 - 도로폭 축소로 차량의 교행이 불가함에 따라 기지 출입문 추가 설치 건의 - 기지시설 변경에 따른 안내도 변경설치 - 승강장 벽면 창문 미설치 요망 - 승강장 외부 CCTV 설치 필요	- 퇴행선 설치는 궤도, 신호 등 기본계획 변경사항으로 실시계획 변경 인가(국토 교통부)를 요하는 사항으로 현 시점에서 반영 곤란 - 추가 설치가능 주차공간 확인 후 통보 요망(단, 녹지공간 활용불가) - 출입문 추가 설치(진입도로 개설에 따른 녹지면적 변경 등)는 실시계획 변경 인가 및 도로시설 변경 승인(서울경찰청)을 요하는 사항으로 현 시점에서 반영 곤란 - 승강장 외부 CCTV 설치는 승강장 벽면 창문 설치여부에 대한 관련법 검토 후 결정
∎승강장 벽면 마감재 변경<토목2사업소> - 미관을 고려 당초 E.G.I휀스에서 알루 미늄 쉬트로 변경 필요	- 미관을 고려 승강장 벽면 마감재를 변경 하여 설계에 반영하고 설계변경 전 변경 내역 토목처 통보(공단협의 필요)
∎세척기 이설작업을 위한 임시 건넘선 설치불가<궤도 2사업소> - 별도 보고예정	- 임시 건넘선 설치불가에 따른 세척기 이설방안에 대하여 관련부서 협의·검토 요함(토목2사업소)

3		결론 및 계획

❍ 계약추진 현황

신호	토목	전기	궤도	건축	전기	통신	승강기	차량	PSD	기계
기 시행중		`19.1월 착공		`19. 2월 착공				`19.2월 발주		`19.5월 발주

❍ 상기 현안사항에 대하여 관련부서와 협의하여 공사가 원활히 추진될 수 있도록 협조 요청코자 함.  끝.