실무회의 결과보고

(경춘선 신내역 6호선 환승시설 사업)

1		실시개요

❍ 사 업 명 : 경춘선 신내역 6호선 환승시설 사업

❍ 회의안건

1) 분야별 사업추진 현황 및 계획

2) 현안문제 및 처리계획

❍ 일    시 : 2019. 03. 05(화) 15:00

❍ 장    소 : 기술본부회의실

❍ 참 석 자 : 토목 외 9개 분야(각 처 및 해당사업소) 담당자

2		회의결과

1. 분야별 사업추진 현황

분야	추진현황(`19. 02월)	추진계획(`19. 03월)
신호분야 (공정율 : 35%)	∙ 신호시스템 제작	∙ 신호시스템 제작 (`19. 4.초 제작시스템 공장검수)
토목분야 (공정율 : 18%)	∙ 도로포장 깨기 ∙ 세척기 및 세척고 철거	∙ 야적장(진입로 포함) 시공 ∙ 승강장 종점부 구조물 시공
전기분야 (공정율 : 4%)	∙ 전차선 공사 : 현장조사 ∙ 역사 전기공사 : 선로배관 매설 ∙ 송배전 공사 : 선로배관 매설	∙ 전차선 공사 : 급전케이블 이설 ∙ 역사 전기공사 : 지중선로 신설 ∙ 송배전 공사 : 전력케이블 신설
궤도분야	∙ 현장조사 및 확인측량 ∙ 용접시편 제작	∙ 기존 세척기 기초con`c 철거 및 자갈포설
건축분야	∙ 현장조사	∙ 세척고 신설 ∙ 환승구조물 터파기
차량분야	∙ 세척기 설계서 서울시 계약심사 ∙ 차량개조 비용산출	∙ 세척기 계약의뢰 예정 ∙ 차량개조 서울시 계약심사
승강설비	∙ E/S 및 E/L 계약체결	∙ E/S 및 E/L 제작
통신분야	∙ 관로 포설 및 CCTV 2대 이설	∙ 신규 케이블 포설 ∙ 기존 케이블 이설
그 외 분야	∙ 사업추진 일정에 따라 정상 발주 추진 예정 - PSD 분야 : `19. 3. 발주예정(`19. 4. 계약) - 기계/소방 분야 : `19. 5. 발주예정

2. 현안사항 및 조치계획

현안사항	조치계획(의견)
∎열차운행계획수립 관련<승무계획처> - 적정 승무인력 확보 - 침실(3인) 조성 필요	- 박홍근 국회의원 간담회(`19.3.7 예정) 시 추가 승무인력 산정근거를 제시하여 서울시의 이해와 설득 필요 - 신내기지 관리동 내 공간을 확보하여 통보 요망
∎역무공간 조성관련<건축2사업소, 신내 차량사업소> - 역무공간 위치변경 여부 ※ ENG노동조합회의실로 변경요청(협의완료) (신내차량사업소-1026호,`19.3.7)	- 건축2사업소에서는 ENG노동조합으로부터 협의사항을 확인하고, 해당분야에서는 역무공간 조성비용 산출 및 설계변경 요망
∎기지내 시설보완 필요<차량계획처, 신내 차량사업소> - 퇴행선 설치 또는 분기기 추가 설치 등 재검토 - 도로폭 축소로 차량의 교행이 불가함에 따라 기지 출입문 추가 설치 또는 이설 필요 - 승강장 공사 중 도로 폭 축소에 따라 차량 통과 시 보행직원 안전대책 필요 - 승강장 외부 CCTV 설치	- 퇴행선 설치 또는 분기기 추가설치 시 차량기지 내 도로가 잠식되어 도로기능 상실 불가피 - 출입문 추가 설치(진입도로 개설에 따른 녹지면적 변경 등)에 따른 실시계획 변경 인가에 대하여 행정절차 상 현 시점에서 추진가능 여부 검토예정 - 교통정리원 상시 배치 예정 ※ 토목공사 내역에 반영(설계변경) 조치 - 승강장 벽면 창문이 미설치됨에 따라 CCTV설치 불필요
∎세척기 이설작업을 위한 임시 건넘선 추가설치<궤도 2사업소> - 신호시스템 제작완료(`19.6.15) 후 임시 건넘선 설치를 위한 선로전환기, 분기기, 전차선 설치공사가 당초 6단계(개소) → 7단계(개소)로 사업비 증가(약 10억원 추정) 및 공사기간 증가(약 2개월) 예상 - 다만, 운행중인 입고선(1), 입고선(2) 중 세척기 이설기간 동안 입고선(1)의 선로차단이 가능할 경우 건넘선 추가 설치 불필요	- 금년 12월 개통과 사업비 절감을 위하여 입고선(1)을 임시 운행중단하고, 입고선(2)를 활용하여 열차 입환 가능여부를 관련부서(승무, 차량)와 검토·협의 추진

3		결론 및 계획

❍ 계약추진 현황

신호	토목	전기	궤도	건축	전기	통신	승강기	차량	PSD	기계
기 시행중		`19.1월 착공		`19. 2월 착공				`19.3월 발주		`19.5월 발주

❍ 상기 현안사항에 대하여 관련부서와 협의하여 공사가 원활히 추진될 수 있도록 협조 요청코자 함.  끝.