서울특별시 공고 제2017-95호

우이~신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업

실시계획변경(14차) 승인을 위한 열람공고

우이~신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업과 관련하여 공사기간 연장 등에 대하여 사회기반시설에 대한 민간투자법 제15조, 같은법 시행령 제16조 및 같은법 제17조에 의거 민간사업자로부터 실시계획변경(14차) 승인 신청서가 제출되어, 같은법 제17조 제2항, 제3항에 따라 관계행정기관 및 관련부서 협의를 마치고 아래와 같이 열람공고합니다.

2017년 1월   일

서 울 특 별 시 장

1. 사업계획 개요

가. 도시철도용지의 위치 및 주요 경과지(변경없음)

시설명	기․종 점	철도용지의 위치 및 주요경과지
철 도	강북구 우이동 325번지 일대~동대문구 신설동32-41번지 일대	강북구 우이동~정릉~성신여대입구역(4호선)~보문역(6호선)~동대문구 신설동역(1호선)

나. 사업의 종류 및 명칭(변경없음)

(1) 종 류 : 도시철도건설사업

(2) 명 칭 : 우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업

다. 사업시행자

(1) 명칭 : 우이신설경전철주식회사(변경없음)

(2) 주소 : 서울특별시 동대문구 신설동 101-2 경영빌딩 5층(변경없음)

(3) 대표자변경

- 당초 : 민우영

- 변경 : 서상일

라. 사업기간

(1) 공사기간 변경 : 착공일로부터 86.5개월 → 94.5개월(8개월 연장)

- 당초 : 2009.9.15. ~ 2016.11.30.

- 변경 : 2009.9.15. ~ 2017.7.29.

※ 수정 공정표에 따라 연장된 공사기간을 반영함(추가 비용 사업시행자 부담)

(2) 운영기간 : 운영 개시일로부터 30년간(변경없음)

2. 열람기간 : 공고 다음날로부터 10일간

3. 실시계획 변경내용 : 공사기간 변경 8개월 연장, 공사기간 연장에 따른 공정표 및 총사업비 조달계획 변경, 일시사용토지 기간 변경

4. 열람장소 : 도시기반시설본부 도시철도사업부(☎02-772-7161)

우이신설경전철주식회사(☎02-3499-5521)

5. 의견제출 : 실시계획변경에 대해 의견이 있으신 분은 열람기간 내에 의견을 서면으로

제출하여 주시기 바랍니다.