-신림선 경전철 민간투자사업-

실시계획[변경]승인신청(3차)요약서

2018. 09

	남서울경전철 주식회사

실시계획[변경] 승인신청(3차) 요약서

○ 사업의 개요

사 업 명	∙ 신림선 경전철 민간투자사업
사업위치	∙ 영등포구 여의도 ~ 관악구 신림동 일대
사업 목적	∙ 기존 지하철 및 철도의 미 수혜 지역인 서울 서남부 지역에 대해 신교통 서비스를 제공 ∙ 증가되는 교통수요에 대응하는 대중교통 인프라 구축 ∙ 교통수단 분담율 제고를 통한 도로교통 혼잡완화 및 친환경적 시스템 도입으로 도시환경 개선 ∙ 기존 도시철도와의 네트워크 구축으로 친환경 대중 교통체계 수립
사업시행자	∙ 남서울경전철 주식회사
총사업비	∙ 당초 : 5,606억원 (2007. 07 불변가) → 변경 : 5,763억원 (증 157억원)
사업규모 및 방식	∙ 구 간 : 샛강(9호선) ~ 대방(국철) ~ 보라매(7호선) ~ 신림(2호선) ~ 서울대학교 앞 ∙ 연 장 : 7.76km(정거장 11개소, 차량기지 1개소, 종합관제동 1개소) ∙ 공사기간 : 착수일로부터 5년(시운전기간 포함) ∙ 사업방식 : BTO방식(Build-Transfer-Operate) ∙ 운영기간 : 운영개시일로부터 30년
사업면적 [변경]		구분	편입면적(㎡)
			합 계	영등포구	동작구	관악구
		수 용	4,349.8	614.6	1,590.9	2,144.3
		지하사용	112,145.1	26,945.7	35,002.1	50,197.3
		일시사용	17,587.2	1,595.7	11,644.9	4,346.6
		합 계	134,082.1	29,156	48,237.9	56,688.2

○ 사업구간 변경 현황

구분	변경사항	변 경 내 용
1	STA. 0km204.500 ~ 1km122.119 파정(-37.881)	∙ 한국개나리아파트, 신일해피트리아파트 구조물의 하부통과 구간에 대한 입주민의 민원으로 사유지 하부통과를 배제하여 선형계획 변경
2	102정거장	∙ 샛강통과구간의 선형변경으로 당초 정거장위치에서 대방역사거리 (영등포방면)로 위치 변경
3	105정거장	∙ 장래 난곡선 시공시 공원 내 개착불가(접속부, 교차부) 조건 반영 ∙ 관계기관 협의의견을 반영한 출입구, 환기덕트 위치 변경
4	106정거장	∙ 정거장 위치이동 및 부대시설(출입구, 환기덕트) 변경
5	107정거장	∙ 정거장 위치이동 및 부대시설(출입구, 환기덕트) 변경
6	109정거장	∙ 출입구 1개소 추가 및 환기덕트 변경 설치
7	110정거장	∙ 출입구 1개소 추가 및 환기덕트 변경 설치
8	111정거장	∙ 장래 타노선 연결을 위한 종단선형 조정에 따른 구조물 변경
9	수직구	∙ #1 (STA.0km495~0km505)	∙ #2 (STA.1km972.5~1km987.5)
		∙ #3 (STA.4km405.0~4km425.0)	∙ #4 (STA.6km251.0~6km259.0)
10	설 비	∙ 열차무선통신방식 변경 ∙ 소방시설 내진설계 적용 ∙ 터널 비상방송 반영 ∙ 전기 분야 변전소 삭제 및 기타변경

○ 사업구간 주요시설물

■ 시설물 현황

- 정 거 장

구 분	내 용
	위 치	형 식	비 고
101 정거장	영등포구 여의도동 56번지 자매근린공원	상대식, 지하 4층	9호선 샛강 환승
102 정거장	동작구 대방동 117-7번지 노량진로	상대식, 지하 3층	국철 대방 환승
103 정거장	동작구 대방동 466-41번지	상대식, 지하 2층
104 정거장	동작구 대방동 466-49번지	상대식, 지하 3층	7호선 보라매 환승
105 정거장	동작구 신대방동 395 일대 여의대방로 20길	상대식, 지하 2층	난곡선 직결역
106 정거장	동작구 신대방동 395-61번지 인근 보라매로	상대식, 지하 2층
107 정거장	관악구 봉천동 985번지 인근 보라매로	상대식, 지하 2층
108 정거장	관악구 신림동 1467-10번지	섬식, 지하 3층	2호선 신림 환승
109 정거장	관악구 신림동 92-32번지 인근 신림로	상대식, 지하 2층
110 정거장	관악구 신림동 110-10번지 인근 신림로	상대식, 지하 2층
111 정거장	관악구 대학동 210번지 관악산 휴게소	상대식, 지하 2층

- 차량기지

구 분	내 용
위 치	서울특별시 동작구 신대방동 보라매공원 일원 지하
부지면적	12,273.8㎡(지하차량기지)
유치규모	13편성(39량, 3량 1편성 기준)
층수	지하1층 (차량기지)
궤도규모	유치선, 임시/정비선, 월상검사선, 일상검사선, 청소 및 세척선, 모타카선 등

○ 사업추진경위

○	2006.03.10	민간투자 제안서 제출
○	2012.03.20	주간사 변경(고려개발 → 대림산업)
○	2015.06.30	서울시 10개년 도시철도망구축계획(국토부고시 제2015-423호)
○	2015.08.12	실시협약(서울시-남서울경전철(주))
○	2016.04.07	도시계획시설(철도)결정 및 지형도면 고시(서울특별시고시 제2016-98호)
○	2016.09.08	신림선 경전철 민간투자사업 실시계획 승인 고시(서울특별시고시 제2016-273호)
○	2017.01.26	신림선 경전철 민간투자사업 실시계획 변경(1차) 승인 고시(서울특별시고시 제2017-25호)
○	2017.11.22	신림선 경전철 민간투자사업 경미한 실시계획 변경(2차) 승인 고시(서울특별시고시 제2017-423호)
○	2018.04.26	도시계획시설(철도)결정 및 지형도면 고시(서울특별시고시 제2018-129호)
○	2018.09.	신림선 경전철 민간투자사업 실시계획 변경(3차)신청

○ 연도별 투자계획

(단위:억원)

구분		합계	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
조사비		21	21	-	-	-	-	-	-
설계비		127	89	38	-	-	-	-	-
공사비		4,464	-	228	537	1,055	1,789	852	3
부대비		385	47	36	65	67	97	70	5
운영설비비		446	-	45	45	22	89	156	89
제세공과금		89	13	11	6	8	24	27	-
영업준비금		75	8	11	10	10	10	23	3
총사업비	합계	5,606	177	369	661	1,162	2,010	1,128	99
	주무관청	2,803	-	154	336	660	1,119	533	2
	민간재원	2,803	177	215	326	502	891	595	98
물가변동비		1,838	41	92	180	359	697	428	41
건설이자		341	-	-	6	46	98	173	18
총투자비		7,785	218	461	848	1,567	2,805	1,728	158

주) 1. 물가변동비는 2007년 7월 1일 불변가격 기준에 2017년 4분기까지는 실적 물가상승률, 이후에는 연평균 물가상승률 3.0% 가정되었을 경우의 가격임

2. 2015년 8월 12일 체결된 실시협약 재무모델 기준으로 이후 실시계획 승인과정에서 변경된 공사비, 부대비 등 계획공정률 조정을 반영

○ 자금조달계획

(단위:억원)

구 분	계	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 민간투자비	4,058	218	268	420	704	1,298	993	156
주무관청지원금	3,727	-	193	427	863	1,507	735	3
합 계	7,785	218	461	848	1,567	2,805	1,728	158

○ 관련기관 협의사항

구 분	협의기관	의 제 협 의 내 용	비 고
도시관리계획 (변경)	서울특별시 시설계획과 서울특별시 도시계획과 영등포구 도시계획과 동작구 도시계획과 관악구 도시계획과	· 협의근거 『국토의계획및이용에관한법률』제30조 규정에 의한 도시관리계획의 결정
보상협의	영등포구 가로경관과 동작구 건설관리과 관악구 건설관리과 국방부(공군항공안전단)	· 협의근거 『공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률』