◉서울특별시고시 제2014-   호

우이-신설 경전철 민간투자사업 실시계획변경(11차) 승인

우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업과 관련하여 사회기반시설에 대한 민간투자법 제15조 및 제17조, 같은법 시행령 제16조에 의거 실시계획 변경(11차)을 승인하고 다음과 같이 고시합니다.

2014년 10월    일

서울특별시장

1. 사업의 명칭 : 서울특별시 우이~신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업

2. 사업시행자  : 우이신설경전철주식회사(대표 : 민우영)

3. 사업의 목적

◦ 서울의 대표적인 대중교통 취약지역에 신교통수단 도입

◦ 서울 동북부지역의 교통체계 개선 및 지역균형발전 도모

◦ 경영효율성 제고를 위한 민간 창의성 도입 및 투자재원의 다변화

4. 사업시행지역의 위치 및 내용

◦ 위    치 : 강북구 우이동~정릉~성신여대입구~동대문구 신설동

◦ 사업규모 : 연장 11.4km, 정거장 13개소, 차량기지(종합사령실 포함) 1개소

◦ 총사업비 : 6,465억원(2006년 1월 1일 불변가격 기준)

5. 사업시행방법 : 민간투자사업(BTO방식 : Build-Transfer-Operate)

6. 실시계획변경 승인 내용

◦ 공사기간 변경 : 당초 60개월 → 변경 86.5개월 (26.5개월 연장)

- 당초 : 2009.9.15.~2014.9.14    - 변경 : 2009.9.15.~2016.11.30.

※ 주무관청과 사업시행자간 합의서(2014.9.12)에 따라 연장된 공사기간을 반영함

※ 운영기간 : 변경없음(운영개시일로 부터 30년간)

◦ 사업시행자 명칭 및 대표자 변경

-  당초 : 주식회사우이트랜스(권혁두)  변경 : 우이신설경전철주식회사(민우영)

◦ 사업시행자 주소변경

- 당초 : 서울특별시 동대문구 용두동788 한방천하포스빌 18층

- 변경 : 서울특별시 동대문구 신설동 101-2 경영빌딩 5층

7. 실시계획 관련 서류 열람장소 및 기간

◦ 열람장소 : 도시기반시설본부 도시철도사업부(☎ 02-772-7179)

우이신설경전철주식회사(☎ 02-924-9811)

◦ 열람기간 : 공사시행 기간내