실 정 검 토 내 용

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 중랑캠핑숲 내 청소년 체험의 숲 조성공사

나. 공사기간 : 2015년 4월 20일 ~ 2015년 11월 30일

다. 도 급 액 : 749,384,000원

라. 도 급 자 : 아이서비스(주) 김세민

마. 발 주 처 : 중부공원녹지사업소 시설과

2. 검토내용

가. 발주처 요청사항 : 시설과-7829(2015.10.28)호

구 분	현황 및 문제점	검 토 의 견	비 고
그물망 설치	▷외부전문가 안전성 자문의견에 따라 플라잉팍스3 구간에 체험자 추락 시 보호할 수 있는 안전망 설치필요	▶플라잉팍스3구간에 체험자 추락 시 보호할 수 있는 안전망 설치 ⁃ 안전망(20m×W2.4) : 0→1개소
개인장비 및 구조장비	▷청소년 체험의 숲 운영에 필요한 안전보호 및 구조장비가 부족하여 추가 공사반영 필요	▶청소년 체험의 숲의 원활한 운영을 위하여 안전장비 및 구조장비 추가 공사반영 ⁃ 헬멧(보호구) : 30→40EA ⁃ 하네스(전신일체형) : 30→40셋트 ⁃ 데이지체인 : 30→40EA ⁃ 캐러비너 : 60→80EA ⁃ 세이프롤러 : 30→40EA ⁃ 스마트세이프롤러 : 0→2EA ⁃ 사다리 : 0→2EA ⁃ 스테틱로프(6mm, 50m) : 0→1롤 ⁃ 안전매트(1200*2400*300) : 0→2EA ⁃ 소화기함(목재) : 0→1EA ⁃ 들것 (알루미늄접이식) : 0→2EA ⁃ 선반(H1800*L1100*W450): 0→3EA
대피소 추가설치	▷외부전문가 안전성 자문의견에 따라 카고네트 코스 구간에 포기자 대피장소 추가설치 검토 필요	▷별첨 ‘대피소 추가설치 검토의견서’ 참조

3. 공사비                                                     (단위 : 원)

구 분	도급공사비	1,2차 변동금액	금회 변동금액	총 변동금액
총공사비	835,142,080	105,659,490	34,497,000	140,156,490
도 급 비	749,384,000	110,177,000	34,497,000	144,674,000
이 전 비	15,000,000	7,742,000	0	7,742,000
관급자재비	70,758,080	-12,259,510	0	-12,259,510

끝.