실 정 검 토 내 용

1. 공 사 현 황

가. 공 사 명 : 중랑캠핑숲 내 청소년 체험의 숲 조성공사

나. 공사기간 : 2015년 4월 20일 ~ 2015년 10월 16일

다. 도 급 액 : 749,384,000원

라. 도 급 자 : 아이서비스(주) 김세민

2. 검토내용

가. 발주처 요청사항 : 시설과-5335(2015.7.27)호

구 분	현황 및 문제점	검 토 의 견	비 고
상징 안내판	▷청소년체험의 숲을 나타낼 수 있는 독특한 상징물 설치필요	▶상징물 설치(비교표 참조) ※발주처 결정안 반영
장비창고 및 운영자 대기실	▷운영자센터에서 체험의 숲까지 120m로 장비착용 후 이동이 곤란하여 체험의 숲내 장비창고 및 운영자 대기실 설치 필요	▶컨테이너하우스 설치(비교표 참조) ※발주처 결정안 반영
외곽휀스 및 출입문	▷체험의 숲 운영시간외 공원이용자들의 안전사고 방지를 위한 접근차단시설 설치 필요	▶외곽휀스 및 출입문 설치 ⁃ 외곽휀스(H1.5) :０→ 240m ⁃ 출입문(W3.0) :０→ 2개소 ※발주처 결정안 반영

나. 실정검토사항

구 분	현황 및 문제점	검 토 의 견	비 고
체험시설 위치조정	▷체험시설 설치가 생목 및 목재기둥에 설치토록 설계되었으나 시설의 하중 고려가 일부 미흡한 시설이 있어 시설물 위치 조정이 필요함.	▶하중이 많은 시설을 인공기둥에 설치 되도록 일부 체험 시설 위치를 변경하여 설치 ※시공사 및 설계사 의견 반영 ⁃ 정글지그재그 ↔ 플랭크패스 ⁃ 카고네트2 ↔ 스모부이2 ⁃ 버마스틱 ↔ 롱발란스빔 ⁃ 카고네트 → 스카이보드 ⁃ 스카이보드 → 버마빔브릿지 ⁃ 버마빔브릿지→ 카고네트
참나무 시들음병방제	▷체험시설을 설치하는 생목이 대부분 참나무류로 최근 참나무류에 피해를 주는 참나무시드름병 방제 필요 ※한강나무병원 문의(2015.8.25)	▶체험의 숲내 참나무류에 대한 참나무시들음병 방제 시행 ⁃ 참나무시들음병 방제(B40~50) : 0 → 40주

3. 공사비                                                      (단위 : 원)

구 분		금 액			비고
		당 초	변 경	증 감
총공사비		835,142,080	906,428,080	71,286,000
도급비	공급가액	681,258,182	746,063,637	64,805,455
	부가가치세	68,125,818	74,606,363	6,480,545
	소 계	749,384,000	820,670,000	71,286,000
이 전 비		15,000,000	15,000,000	0
관 급 자 재 비		70,758,080	70,758,080	0

끝.