업무연락전
지시번호	SMIH-14-32108	연번(문서번호)	SMIH-14-32108
지시일자		작성일자	2014-07-15
지 시 자	김상용	처리기한
제 목	실정보고(차수벽 위치변경) 회신
내 용
1. 도화(서남) 2014-225호(2014.07.10) 『실정보고(차수벽 위치변경)』과 관련입니다. 2. “서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업”의 차수벽 시공과 관련 이차침전지 후단의 차수벽 시공위치를 방류BOX 기준 남측방향에서 북측방향으로 위치변경하는 실정보고에 대하여는 현재 총인처리시설 기본 및 실시설계가 진행중이고, 그 외 소화조구간 가시설 공법변경 등 전반적인 변경이 필요하므로 우선 감리단에서 선시공 승인하고 최종 변경시 종합적으로 변경하시기 바랍니다. 끝.
붙임 :

행정중심복합도시건설청

서울특별시 도시기반시설본부