업무연락전
지시번호	SMIH-14-24270	연번(문서번호)	SMIH-14-24270
지시일자		작성일자	2014-04-25
지 시 자	정문수	처리기한
제 목	실정보고(폐기물 추가 발생) 승인(도림교 확장)
내 용
1. 도림(감) 제14-29호(2014. 4.23)와 관련입니다. 2. 위 대호와 관련하여 『도림교 확장공사』의 설계 누락 및 지장물에서 추가 발생된 건설폐기물에 대하여 실제 폐기물 처리 물량에 의거 설계변경에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. 가. 공 사 명 : 도림교 확장공사 나. 승인내용 : 건설폐기물 추가 발생 물량 처리 (V=149.8㎥)
붙임 :

행정중심복합도시건설청

서울특별시 도시기반시설본부