보 고 서
			담당	팀장
				전결 10/23
문서번호	공사감독1처-9742
보존기간	5년		협 조	선임주임
결재일자	2015.10.23.
공개여부	공개
제 목	실정보고(2차 작업지시 : 누수유도차단장치 및 방호벽 죠인트 설치 관련)

1		공사현황

가. 공 사 명 : 노들북고가외 3개소 보수공사-남부

나. 공사기간 : 2015. 6. 24 ~ 2015. 12. 20

다. 공 사 비 : 902,805,980원

(도급비:756,900,000원, 관급비:115,150,990원, 이전비 기타:30,754,990원)

라. 공사개요 : ⦁ 노들북고가

- 교면방수 및 포장 : 17a, 신축이음 후타재 보수 : 71.5m

⦁ 도림고가

- 방음벽 교체 : 132m

⦁ 봉림교

- 교면방수 및 포장 : 20a

⦁ 잠수교 남측 지하차도

- 캐노피  : 2개소, 방호울타리 : 81경간

마. 도 급 자 : 케이탑건설(주) 대표 김길선

바. 발 주 청 : 남부도로사업소(시설보수과)

2		보고내용

시설보수과-3844(2015.10.07)호 및 KT-제151019(2015.10.21)호 관련 2차 작업지시 『누수유도 차단장치 및 방호벽 차수 Joint』 설치에 대한 실정보고 임.

가. 현황 및 문제점

- 노들북고가의 신교와 구교 사이 공간(B=40cm)으로 우천시 빗물이 방호벽을 타고 교량하부로 유입, 하부구조물의 내구성저하에 영향을 미칠 우려가 있어, 누수 유도차단장치를 설치하라는 발주청 지시가 있음.

- 또한 교량 신축이음부 방호벽 난간에 기 설치된 방호벽 차수 죠인트가 노후되고 파손되는등 제기능을 하지못해 재설치 지시가 있음.

나. 개략 공사비 산출

1) 개략 공사비(직접공사비)

- 도급비 : 증) 36,657천원

- 관급자재비 : 변경 없음

※개략공사비 산출내역 따로붙임 첨부

다. 검토의견

- 검토결과 노들북고가의 안전성확보을 위하여 발주청 지시대로 신교,구교 사이의 누수부에 유도차단장치 및 방호벽 차수죠인트를 설치 시행함이 타당하다고 사료 됨.

3		행정사항

상기 검토결과를 발주청에 제출하고 그 결과에 따라 추후 설계변경 반영코자 함.

따로붙임 : 개략공사비 산출내역(도면) 1부.  끝.