□ 검토보고 의견 [공사감독2처-17841]

공사명 : 마천동 5~거마가압장간 송배수관 정비공사

제 목	시설관리공단보고내용	검 토 의 견
강관압입 추진공 일부 야간작업 시행	본 공사 추진구간 강관압입 시공중 풍화암 발생으로 일일 시공량이 설계시공량(2m/일,경질토사 적용)대비 약 1.4m로 지연 시공되고 있어 도로교통 소통대책협의사항(상수도관로공사 후 열배관공사실시)을 준수하기 위하여 11/20일 전까지 시공완료 되어야 하는 사항으로 공정관리상 주, 야간 추진작업이 필요한 실정임.	열배관공사가 상수도관부설 완료이후 공사를 하기위해 대기중이나, 강관압입 추진의 잔여물량에 대하여 설계대로 주간 작업으로만 시공시 약33일(46m/1.4m/일) 소요되어 공정이 지연되므로 야간공사를 병행시행하도록 하고 추후 설계변경시 야간작업수량을 정확히 산정하여 반영하기 바람.