□ 검토보고 의견 [공사감독2처-16549]

공사명 : 거마가압장~군부대간 송배수관 정비공사

제 목	시설관리공단보고내용	검 토 의 견
중간집하장 및 창고, 현장사무실 검토	실제 사용한 하남시 감일동 부지로 정산하고, 토사 및 폐기물 적재 면적을 반영하여 부지임대료를 설계변경시 반영하고자 함	설제 사용한 부지로 정산하여 설계변경시 반영
강관 보호공 검토	거여역 사거리에 위치하는 유관기관 시설물(지역난방,전력,하수도,통신)로 인하여 매설심도가 부족한 부분(L=8.8m)에 대하여 기성 콘크리트 블록을 설치하여 관보호	매설심도 부족한 부분에 보호공을 설치하여 상수도관 보호에 철저를 기하고 설계변경시 반영