「시민의숲 CPTED공원 조성공사」

실정보고(1차)에 따른 검토결과

실정보고 검토

공 종	검토 요청사항	검 토 내 용	검토결과
시설물	▶ 안내판 변경 -구역안내판 : 공원입구 기설치분 1개소는 물량에서 제외 -방향안내판 : 필요지역에 추가 설치	▶해당 공종 내역 반영 -구역안내판 : 3개소→2개소(감 1개소) -방향안내판 : 7개소→9개소(증 2개소)	승 인
식재	▶ 공원등 및 CCTV주변에 저촉되는 기존 교목 143주를 전정하도록 설계되어 있으나 저촉면 위주의 전정시 수형이 흐트러지고 개엽후에는 전정효과가 떨어지므로 전정을 제외하고 저촉이 심한수목 위주로 이식 시행	▶교목 전정제외후 수목이식 시행 -교목전정 : 143주→0주(감 143주) -교목이식(R16) : 0주→1주(증 1주) -교목이식(R21) : 0주→1주(증 1주) -교목이식(R22) : 0주→2주(증 2주) -교목이식(R26) : 0주→1주(증 1주) -교목이식(R27) : 0주→2주(증 2주) -교목이식(R28) : 0주→1주(증 1주)	승 인
철거 및 포장	▶화장실가벽 철거시 기초콘크리트부분의 철거와 폐기물처리 및 가벽부분의 포장재 재포장이 설계에서 누락됨	▶현장여건을 감안하여 해당공종 반영 -화장실가벽 기초콘크리트 철거 : 0개소→3개소(증 3개소) -보도블럭포장:0㎡→22.68㎡ (증 22.68㎡) -폐콘크리트처리 : 25.37ton→35.14ton(증 9.77ton) -폐기물운반 : 30.01ton→39.78ton(증 9.77ton)	승 인