보 고 서
			담당	팀장
문서번호	공사감독2처-7639
보존기간	3년		협 조	과장
결재일자	2017.07.28.
공개여부	공개
제 목	실정보고서(바닥콘크리트 보수물량 증가)

공 사 현 황

◯ 공 사 명 : 월계2,3지하차도 보수공사

◯ 공사기간 : 2017.04.19 ~ 2017.10.29

◯ 도 급 비 :	423,658,700원

◯ 공사개요 : 아스팔트포장 덧씌우기 98a, 콘크리트 바닥보수 100㎡

신축이음보수 315m 등

◯ 도 급 자 : 태원건설(주) 김성원, 한신호

◯ 발 주 청 : 북부도로사업소 시설보수과

보 고 내 용

시공사에서 월계2,3 지하차도 보수공사 중 바닥콘크리트 물량증가 실정보고가 있어 검토보고 하는 사항임.

※ 관련근거 : [태원 제 2017-066호], 2017.07.28

1. 현황 및 문제점

- 당초 설계에는 보수물량으로 MMA(t=5cm) 50㎡ , 초속경(t=20cm) 50㎡ 로 설계    되어 있으나,

-  아스팔트 절삭 후 지하차도 바닥콘크리트를 노출시킨 상태에서 기존구조물의 열화 및 손상 노후화 등 현장여건을 고려하여 실측한 결과 MMA(t=5cm) 18.5㎡, 초속경(t=20cm) 9㎡ 증가되었으며,

- 또한 증가된 바닥보수물량을 예산범위 내에서 보수하기 위하여 초속경(t=10cm) 50㎡    를 신규공종으로 산출해야하는 실정임.

2. 검토의견

- 아스팔트 평삭후 구조물을 노출 시킨상태에서 보수물량을 조사한 결과 당초 설계보다 보수물량이 많이 산정(증 78㎡)되어 예산범위내에서 시공물량을 확정하기 위해서는  신규공종(초속경 T=10cm)을 산출하는 것이 적정하다고 판단되며

- 구조물 내구성 향상을 위해 조사된 구조물 손상부위를 아래 변경수량과 같이 보수하는 것이 타당하다고 사료됨.

3. 개략공사비(바닥콘크리트 보수공) : 증 39,380,000(제잡비 포함)

- 당초 :  87,230,000

- 변경 : 126,610,000

※ 변경수량

공 종	규 격	단 위	수 량			비 고
			당초	변경	증 감
계		㎡	100	178	증) 78
바닥콘크리트 보수(레코MMA)	야간, T=5cm	㎡	50	68.5	증)18.5
바닥콘크리트 보수(초속경)	야간, T=20cm	㎡	50	59	증) 9
바닥콘크리트 보수(초속경)	야간, T=10cm	㎡	0	50.5	증)50.5	신규대가

조 치 사 항

- 상기 검토사항을 발주청에 제출하고 승인을 득한후 설계변경 시행코자 함.

붙임문서 : 1. 실정보고 내역서 1부.

2. 바닥콘크리트 보수도면 1부.  끝.