문서번호	시설보수과-1872
결재일자	2015.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설보수과장	성동도로사업소장

실정보고서 승인 검토

(옥수·금호터널 보도차단벽 설치공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 5

성동도로사업소

(시설보수과)

옥수·금호터널 보도차단벽 설치공사

실정보고서 승인 검토

『옥수·금호터널 보도차단벽 설치공사』 감독업무를 수행중인 서울시시설관리공단으로부터 공사 실정보고서가 접수되어 실정보고 승인에 대한 검토 보고임.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 옥수·금호터널 보도차단벽 설치공사

○ 공사기간 : 2014.12.12 ~ 2015.12.21(총차)

(1차: 2014.12.12 ~ 2015. 6.30)

○ 공사개요 : 보도차단벽 설치 960m

(옥수터널 : 320m, 금호터널 : 640m)

○ 도 급 액 : 449,318,250원(1차 - 257,000,000원)

○ 도 급 자 : (주)이유디자인 대표이사 박종근

□ 보고내용(공사 실정보고 및 승인요청 사항)

○ 관련근거 : 서울시시설관리공단 공사감독2처-6446(2015. 3.26.)호

⇒ 시공 중 현장조사 결과 보고

○ 현장여건과 설계도면의 철근길이 상이

- 설계도면 철근길이 T1=1.742m, T2=1.263m

- 현장여건 철근길이 T1=1.930m, T2=1.360m

☞ 현장여건에 맞게 T1, T2 철근길이를 변경 시공

○ 설계도면 상 기존철근 규격 상이

- 설계도면에는 기존 구조물 철근 규격을 D13mm로 가정하여 신규          구조물의 철근 D13mm와 커플러 연결토록 하였으나, 기존구조물의           철근규격이 D25mm로 신규구조물 철근 D13mm와 커플러 이음 불가

☞ 커플러 이음을 용접이음으로 변경 시공

○ 케미컬 앵커 수량 누락 및 앵커 간격 변경

- 케미컬 앵커 수량이 누락되었으며, 신구 콘크리트 접합을 위하여 앵커          간격을 2.0m에서 1.2m로 변경

☞ 앵커 간격을 2.0m에서 1.2m로 변경 시공

T1과 앵커 정착길이 확보 및 피복두께 확보를 위해 기존 구조물 바닥에           콘크리트 T=130mm 타설

○ 공사비 증가

- 철근(T1, T2, 앵커) 변경 및 바닥 레미콘 타설에 따른 공사비              14,530천원 증가

□ 조치의견

○ 감독기관인 서울시시설관리공단의 실정 보고사항을 검토한 결과, 타당하다고 판단되므로 실정보고를 승인하고 추후 설계변경시 반영 정산코자 합니다.

- 공사의 시급성을 감안하여 추가 소요되는 레미콘 31.1㎥, 철근 2.09톤은 사급으로 조치

붙임 : 시공사, 설계사, 공사감독 실정보고 관련 문서 각 1부.  끝.