□ 검토보고 의견 [공사감독2처-10890]

공 사 명 : 마천동200-99 외 6개소 배급수관 정비공사

제 목	시설관리공단 보고내용	검 토 의 견
1구간 터파기량 증가	하천 복개구조물이 상수도관 부설 위치에 인접하게 설치되어 있어 터파기시 복개구조물 주변의 토사 슬라이딩이 발생되는 실정이며 안전사고 발생방지를 위하여 슬라이딩 되는 토사를 제거 후 공사를 시행함이 옳을 것으로 판단됨	안전사고 방지를 위해 슬라이딩 되는 토사를 제거 후 공사를 시행하고 설계변경 시 반영
1, 2구간 폐기물 발생량 증가	2구간 굴착결과 일부구간의 콘크리트포장 및 아스팔트 덧씌우기 포장도로로 확인되어 폐기물 발생량 증가분에 대해 설계반영하고 1, 2구간의 터파기중 포장층 추락으로 인한 안전사고 발생 방지를 위하여 확폭한 아스팔트 포장깨기를 시행하고 증가된 아스팔트 포장깨기 및 폐기물 물량에 대하여 설계반영 하고자 함	2구간 일부구간의 폐기물 발생량 증가분과 1, 2구간 터파기중 확폭한 아스팔트 포장깨기 시행으로 증가된 아스팔트 포장깨기 및 폐기물 물량에 대하여 설계변경 시 반영