실정보고서

발  신 : 매일엔지니어링(주)   이계옥

수  신 : 공사감독2처장

제  목 : 작업 지시 건에 대한 공사시간 연기건.

공사명 : 2014년 강동구 관내 상수도시설물공사(장기계속단가계약)

1. 실정보고내용

당초 “2014강동구 관내 상수도시설물공사(장기계속단가계약)” 와 관련하여 작업 지시된 시설물보수-27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 과 관련하여 작업현장 근처 상가에서 10월 03일이후 공사요청으로 인해 작업지연 사유가 발생한바 이에 실정보고서를 제출하오니 검토 후 처리하여 주시기 바랍니다.

○시설물보수(총9건)

지시번호	주소	지시내용	실정보고내용	당초 완료일	연기 요청일	비고
시보 2014-27, 28, 29, 30	명일동 47-12, 341-5, 343-3. 345-8	철개교체	철개 교체공사로 인한 인근상가 주민들의 민원발생이 예상되어 민원협의로 기간이 소요되었으며, 10월03일 이후 공사요청됨	2014.10.01	2014.10.17	왕십리왕 곱창 02-481-7780
시보 2014-31, 32, 33, 34	명일동 47-2, 48, 322-2, 344-16	매몰된 철개인상 및 교체, 노후밸브 교체 (D=100~150mm)	철개 및 노후밸브 교체공사로 인한 인근상가 주민들의 민원발생이 예상되어 민원협의로 기간이 소요되었으며, 10월03일 이후 공사요청됨	2014.10.02	2014.10.17	등촌칼국수 02-442-6273
시보 2014-35	천호동 238-1	노후밸브 교체 (D=200mm)	야간공사 시행지역(2차로중 1차로 통제)으로 관할경찰서 도로공사신고사항 협의기간 소요 및 단수범위 협의로 작업기간 부족	2014.10.06	2014.10.17

- 연기사유

1) 작업대상위치에 상가의 민원(공사장 점용으로 인한 영업방해)으로

시민불편이 예상되어 완료일내 공사가 불가능하오니 공사기간

연기요청코자함

- 당초 공사기간 :  시보-27~30 = 2014. 09. 16 ~ 2014. 10. 01

시보-31~34 = 2014. 09. 17 ~ 2014. 10. 02

시보 - 35 = 2014. 09. 18 ~ 2014. 10. 06

- 연기 요청일   :  2014. 10. 17