문서번호	도로보수과-4372
결재일자	2016.5.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
협조

실정보고에 따른 검토보고

(구로세무서 앞 중앙버스정류소 이설공사)

2016. 5.

강서도로사업소

(도로보수과)

실정보고에 따른 검토보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 구로세무서 앞 중앙버스정류장 이설공사

○ 공사기간 : 2015.10.16 ~ 2016.05.20

○ 시 공 사 : ㈜자운이앤씨 대표 성하범

○ 도 급 비 : 285,450천원

□ 관련근거

○ 자운16-0506호(2016.5.9.) : 구로세무서 앞 중앙버스정류장 이설   공사에 대한 실정보고(공기연장) 건

□ 실정보고 내용

○ 구로세무서 앞 버스정류장 이설공사의 공기연장 필요

- 구로세무서앞 버스정류장 이설공사는 당초 2016년 5월 20일까지   준공기한으로 되어 있으며, 실질적인 공사착공은 2016년 3월 2일  시작하였음

- 2016년 5월 6일 현재 공사 공정율이 70%로 준공기한인 5월 20일  까지 완공을 위해서는 절대공기가 부족하여 공기연장이 불가피함

○ 공기연장 사유

- 본 공사의 특성상 전기·신호기 업체 및 버스쉩터·난간 업체와 연계   하여 공사를 진행한 후 단계별로 다음공정을 착수해야 하는 어려움  으로 인한 공기부족

- 당초 설계와 상이한 현장상황 발생으로 관련기관 협의 및 심의로   인한 공사지연(횡단보도 위치 조정 등)

- 신호기 설치 공정시 경찰청 협의 및 심의에 따른 공기소요로 공사지연

□ 검토결과

○ 구로세무서앞 중앙버스정류장 이설공사는 토목공사와 병행하여 전기 및 신호기 공사가 단계별로 진행되어야 하나, 신호기 설치를 위한 경찰청 규제심의가 지연됨에 따라 전체 공정이 지연되어 준공기한 연기가 불가피함

□ 조치계획

○ 구로세무서 앞 중앙버스정류소 이설공사의 준공기한 연기가 불가피함에 따라 전기 및 신호기 공사의 준공기한을 감안하여 공사기간을 6월 20일까지 연기하고자 함.

○ 공사기한 연기

- 구로세무서 앞 중앙버스정류장 이설공사

· 당초 : 2016.5.20.      · 변경 : 2016. 6. 20

- 중앙버스전용차로 흐름개선 건설폐기물처리용역

· 당초 : 2016.5.20.      · 변경 : 2016. 6. 20

붙임 : 실정보고서 1부. 끝.