문서번호	기반시설과-1497
결재일자	2015.11.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기반시설과장	시설부장		한강사업본부장
협 조
	총무과장
	생태공원과장

실정보고에 따른 처리계획 보고

《 2015년 반포 한강숲조성공사 》

2015. 10.

한강사업본부

(기반시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

실정보고에 따른 처리계획 보고

《2015년 한강숲 조성공사》

반포 한강숲 조성공사 추진 중 서울시시설관리공단으로부터 현장 여건 반영 등 실정보고가 있어 이에 따른 부족한 소요예산 확보계획 보고임

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 2015년 반포 한강숲 조성공사

공사내용 : 수목식재(느티나무 등 18종 11,389주),

숙근초화 식재(구절초 등 11종 15,900본)

시설물공(수목보호의자 17개), 유공관 등

공사기간 : 2015. 9. 1. ～ 2015. 12. 29.

도 급 자 : 주식회사 그린랜드건설(대표 : 이미정)

도 급 액 : 금408,766,900원

위탁감독 : 시설관리공단 공사감독 3처

Ⅱ		보 고 내 용

시설관리공단 실정 보고

- 공사감독3처-10068(2015.10.16.)

□ 불량 수목 제거 및 수목 벌근, 수목 이식의 물량 변경

- 불량 수목 제거 : 71주 → 99주(증 28주)

- 수목 벌근 : 10주 → 38주(증 28주)

- 수목 이식 : 3주 → 8주(증 28주)

《 불량수목 제거(당초, 추가)》

□ 잔디 이식 : 수목식재 공간 굴취한 잔디 재식

- 잔디 이식 : 0㎡ → 1,482(증 1,482㎡)

《 잔디 이식(굴취중, 이식 대상지)》

□ 보행 안전 도우미 배치 : 자전거 및 보행자의 안전사고 예방

- 도우미 배치 : 0인 → 20인(증 20인)

□ 관급자재 물량 변경 : 이식 수목 수량 변경으로 생명정 및 유공관 증가

- 생명정 : 17,860㎏ → 18,060㎏(증 200㎏, 10포)

- 유공관 : 744개 → 768개(증 24개)

□ 공사금액 변경

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
도급비	공급가액	371,606,274	389,812,729	18,206,455
	부 가 세	37,160,626	38,981,271	1,820,645
	계	408,766,900	428,794,000	20,027,100

□ 처리내용 : 실정보고 승인 통보(기반시설과 – 1402, 2015.10.23.)

- 승인 내용 : 실정보고 적정

공사감독(설계변경) 보고

□ 경관숲 조성 : 둔치에 단풍이 아름다운 대왕참나무를 빼곡이 모아 심어

아름다운 경관 연출

- 변경계획 : 대왕참나무 다간수를 독립수로 변경

《 대왕참나무 다간수 와 모아심기 비교 사진 》

□ 세빛섬 주차장 확장 지역 사업계획 변경

- 이팝나무 등 4종 618주(교목 18주, 관목 600주) 식재 취소

□ 수형 불량목 제거로 부족한 그늘목 추가 식재

- 느티나무, 능수느릅 : 49주 → 65주(증 16주)

□ 공분의 이팝나무 가로수 보식으로 명품 자전거길 조성

- 이팝나무 : 44주 → 78주(증 34주)

《 결주(缺株)되어 있는 이팝나무 가로수 현황사진 》

□ 사업계획(테마를 부여한 명품숲 조성)에 충족한 수목 추가 식재

- 꽃과 함께하는 달빛광장 조성 : 왕벚 및 이팝나무 추가 식재

- 능수느릅나무숲(＋형) 조성 : 능수느릅나무 추가 식재

Ⅲ		조 치 계 획

수간(樹幹)이 부패되어 풍수해시 위험성이 있는 수목믈 제거하고,

보행자와 자전거 통행에 안전사고를 예방하기 위한 보행안전도우미를

배치하는 등 현장여건 등을 감안한 실정보고사항으로 적정한 것으로

사료됨에 따라 서울시시설관리공단에 승인하였음.

변경 예상금액이 도급액을 초과하므로 낙찰차액을 활용하여 공사

감독 보고사항(경관숲 조성, 그늘목 추가 식재, 가로수 보식 등)을

반영한 설계 변경으로 설계변경자문위원회의 심의를 거쳐 사업을

마무리하고자 함.

□ 예산현황

사 업 명	예 산 액	시 행 액				낙찰차액
		계	도 금 액	관 급 비	이 전 비
2015년 반포 한강숲 조성공사	500,000,000	434,027,900	408,766,900	18,277,468	6,983,532	65,972,100

붙 임 : 현장실정 보고서 및 승인통보 각 1부.  끝.