□ 실정보고 검토의견

공사명 : 문정동 순환배관동사

제 목	시설관리공단보고내용	검 토 의 견
- PE free휀스 설치	- 계약내역서에 PE free휀스 설치 공종이 반영되어 있지 않으나, 야간 점용된 공사장과 주행차로의 안전확보를 위하여 필요한 실정임	- PE free휀스 설치하고 추후 설계변경시 반영
- 익일 재굴착부 포장 깨기	- 익일 재굴착부위 토사로 설계되어있으나, 야간공사로 당일 복구되어 아스팔트 포장절단 및 깨기 반영이 필요한 실정임	- 준공시 실제 현장여건에 따른 시공후 설계변경시 반영
- 원형변실설치후 모래 되메우기	- 원형변실 설치 완료후 발생토사 되메우기토록 설계되어있으나 침하우려가 있어 직관부와 동일하게 모래 되메우기 실시함이 타당할 것으로 판단됨	- 환토 실시하고 설계변경시 반영