실정보고 사항 승인 내용

① 지하차도내(內) 보행자통로 비상벨 추가 설치사항 발생

□ 변경내용

- 비상벨 설치내용 : 총19개소(아차산측 10개소, 구의야구장측 9개소)

- 변경사항

구분	변경전	변경후	증/감	비고
비상벨 설치공사	-원	9,792,000원	증)9,792,000원	순공사비

② 지하차도내(內) 보행자통로 조명등 점·소등 방법 변경 사항 발생

□ 변경내용

- 보행자통로 주간 자연채광 구간(주간 : 소등 / 야간 : 점등)

- 변경사항

구분	변경전	변경후	증/감	비고
통로박스 조명설비공사	32,806,000	38,881,000원	증)6,033,000원	순공사비

③ 공사중 교통처리계획에 의한 단계별 가로등 이설물량 변경 사항 발생

□ 변경내용

- 투광등 설치 구간 : 지하차도 구조물(파형강판구간 260m)

- 변경사항

구분	변경전	변경후	증/감	비고
부대공사	19,966,000	25,938,000원	증)5,972,000원	순공사비

④ 지하차도 변전실내(內) 핸드홀 설치 계약물량 누락 사항 발생

□ 변경내용

- 핸드홀 설치 : 3개 누락

- 변경사항

구분	변경전	변경후	증/감	비고
수배전공사	-원	3,515,000원	증)3,515,000원	순공사비