- 어린이대공원 놀이동산 재조성공사 -

실정보고 승인 내용

공 사 개 요

○ 위    치 : 동작구 신대방동 여의대방로20길 33

○ 공사기간 : 2013. 12. 23  ~ 2014. 6. 20

○ 공사금액 : 337,345,940원

○ 도 급 자 : ㈜대명토건 대표 유남숙

○ 공사내용 : 남문화장실 등 2개소 리모델링공사

실정보고 내용

(단위 : 천원)

공 종	현황 및 문제점	검 토 의 견	개략금액 (순공사비)	비고
건축	[놀이터화장실] ▷출입구 좌·우측 벽면(자동문) 적벽돌 치장쌓기 -자동문 점검구개폐 등 유지관리 어려움 -자동문과 출입문 문틀 설치가 간섭되어 출입구 폭을 좁혀야하는 문제점이 있음	▶마감재 변경 -기존마감과 조화되도록 목재 선택 적벽돌(190×90) ⇒ 방부사이딩(100×25) - 출입구 폭 확보를 위해 노출형 으로 변경	증) 450	승인
	▷주출입구 경사로 만들기 -좌,우측 기존대로 이용시 경계석 단차로 인하여 동선 단절 및 보행 불편 우려됨 ▷외부 도색 -내부완료후 외부마감 상태 불량 ▷출입구상단 처마 후레싱및선홈통 -노후로 인해 교체필요	▶화장실 전면 보도를 경사로와 구배를 맞춰 시공하여 보행 편의 제공 -소형고압블럭 재시공 물량 증가 (4㎡ ⇒ 55㎡) ▶외부 전체도색 ▶후레싱 및 선홈통교체	증) 3,000	승인
	[남문화장실] ▷주출입구(자동문) -화장실 사용빈도가 높아 주출입구에 자동문 설치하는 것이 오히려 사용자가 불편할 수 있음. -사용빈도가 높아 고장 등 유지관리에도 어려움이 예상됨	▶평면변경 -기존 화장실 평면과 같이 주출입구를 강화도아로 설치, 가족화장실 출입구는 외부에 설치 -평면변경으로 인한 출입구 벽면 마감은 목재(방부사이딩) -외부 처마 삭제	증) 1,500	승인

공 종	현황 및 문제점	검 토 의 견	개략금액 (순공사비)	비고
건축	▷남자화장실 변기수 부족-설계2개소	▶청소도구실을 여자화장실로 옮겨 남자화장실 변기수 1개 증설, 여자화장실 변기수 1개 감소(평면변경)	증) 1,000	승인
	▷화장지 등 소모품 보관 창고 부족 (유지관리 담당 요구사항)	▶파우더룸을 창고로 활용하고 화장대는 세면대에 설치 (세면기 1개 삭제)	증) 1,000	승인
	[동문화장실] ▷자동문 강화유리설치(FIX)	▶기존 벽체이용 가능, 자동문 강화유리 설치 불필요	감) 150	승인
	▷평면변경	▶평면변경에 따른 물량증감으로 내역조정	감) 7,083	승인
기계	[놀이터화장실 및 남문화장실] ▷남·여장애인화장실 대변기(CC-406P) -벽결이형으로 기존벽두께(200mm)로는 시공 불가능 - 벽결이형으로 유지관리 어려움 ▷남·여장애인화장실 대변기 비데 ) -위생 및 사후관리 문제점	▶현장여건상 벽걸이형 대변기(CC-406P)에서 후레쉬벨브식 대변기(CC-114H,자동 물내림센서 추가) 4개소 변경 필요 ▶비데시공 4개소 불필요	감) 480	승인
	[놀이터화장실] ▷설계도면과 내역수량 상이(대변기, CC-114H) -설계도면 10개, 설계내역 9개	▶대변기(CC-114H) 1개소 추가 반영	증) 90	승인
	[동문화장실] ▷감지식 센서 수전(DL-L0810)교체 -기존세면대는 감지식 센서 수전과 설치타입이 상이하므로 세면대와 같이 교체해야하는 문제	▶기존 수전이 정상적으로 작동하고 상태가 양호하므로 감지식 센서 수전 9개소 교체시공 불필요	감) 1,287	승인

※ 신규 적용단가에 대하여는 단가비교 및 수량산출서 철저히 작성할 것