□ 남산 회현자락 한양도성 유적전시관 조성공사 실정보고 승인내용(12회)

(단위:원)

공 종	변경전	변경후	공사금액		비 고
			변경전	변경후
건축	-	방공호 내부 폐자재정리 청소 및 소운반	-	1,938,270	증)15,001,430
		방공호 입구 사토정리 및 파손캐노피 복구	-	5,067,900
		방공호 주변 토질개선 및 석재굴취 및 석축복구	-	7,995,260
문화재	-	현장내 석축돌 선별·운반 및 쌓기	-	5,665,750	증)5,665,750
조경	-	나무이식 소나무 굴취·반출 38주 소나무 굴취·이식 11주 벚나무 굴취·이식 3주	-	36,593,960	증)36,593,960
	밀록 및 토종혼용	잔디품종 변경 (밀록중 일부를 토종잔디)	100,304,150	68,004,500	감)32,299,650
	-	분수대 방수 (유적 빗물 침투방지)	-	16,733,650	증)16,733,650
	-	유지보수용 잔디차도 (잡석다짐후 잔디식재)	-	1,810,480	증)1,810,480
	-	기존 등산로 파손계단 복구(계단, 핸드레일)	-	2,472,540	증)2,472,540
	-	우배수 시설 폭우대비 우배수로 추가 (집수정, 빗물받이, 유공관, 잔디수로, 경계석)	11,331,700	27,674,390	증)16,342,690
	배수로 스텐레스	배수로 재질변경 (스텐레스 → 콘크리트)	92,084,820	38,460,940	감)53,623,880
	-	도로변 조경석 해체 운반(276.5톤, 철거 상차, 운반)	-	5,103,760	증)5,103,760
	오수관로 1m	오수관로 내역수량 오류 정정 (당초 수량 1m → 63m)	16,810	1,059,210	증)1,042,400
합계 (직접공사비)			203,737,480	218,580,610	증)14,843,130