- 어린이대공원 놀이동산 재조성공사(조경) -

실정보고 승인사항(4차)

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 어린이대공원 놀이동산 재조성공사(조경)

공사기간 : 2012. 12. 20 ~ 2014. 4. 30

도 급 액 : 조경(시설) 72,133,423원, 조경(식재) 323,875,544원

도 급 자 : 케이디종합건설(주), SH조경건설(주)

Ⅱ		실정보고 검토내용

실정보고 : 조경감독3처-1980(2014.03.17.)

구 분	현황 및 문제점	검 토 의 견	검토 결과
야 외 스탠드	▶ 스탠드내 느티나무(R25,8주) 를 식재토록 되어 있으나 수목 생장에 따른 공간 협소 및 도로쪽 수목식재에 따른 차량 통행에 불편우려	▶ 스탠드내 플랜터는 3개소에서 1개소로 조정하고 차량통행을 고려하여 최상단은 녹지로 조성 후 식재. - 스탠드 1식 → 스탠드-1, 1식 - 수목보호판 5 → 0개소	승인
조경석 쌓기	▶ 상부 도로의 계획고 변경에 따라 사면 고저차가 3.5m이고 패밀리코스터가 녹지대로 후퇴함에 따라 당초 조경석 쌓기 (H1.2,L=23m)로 사면처리 곤란 ▶ 후룸라이드와 포장면의 높이차 발생 및 산책로 기존 옹벽 주변으로 토사유실 우려	▶ 급경사 구간(L98m)에 조경석 쌓기 및 높이 상향 조정 -조경석쌓기(H1.2)23m → (H1.5)98m ▶ 후룸라이드 주변 및 기존 옹벽 좌우측에 조경석 쌓기 반영 - 조경석쌓기 0 → (H0.9) 115m - 조경석쌓기 0 → (H0.6~1.2) 8m	승인
안전휀스	▶ 일부지역에 안전휀스가 없어 설치필요	▶ 안전이 우려되는 장소(스탠드, 옹벽, 진입부, 사면상단, 기차놀이 주변 등)에 안전휀스 설치 - 안전휀스 0 → 162경간	승인
산책로 조성	▶ 녹지복원지역에 이용자 동선 확보를 위한 산책로 개설 필요 ▶ 산책로 개설에 의한 외부 주택가와의 민원 발생 우려 ▶ 산책로와 사면부 사이 기존 옹벽이 있어 미관저해	▶ 하부에서 상부 녹지로 연계(2개소) 되는 산책로를 조성하고 주변지역을 이용자를 위한 공간마련 - 황토포장(W1.5) 0 → 160m - 목재계단 0 → 2개소 - 시설물 이설 0 → 1식 - 횡단배수로 0 → 10m(재검토) - 돌수로(W0.3) 0 → 120m(재검토) ▶ 외부 주택가로부터 차폐를 위해 산책로와 주택가사이에 마운딩 조성 - 마운딩 조성 0 → 1개소 ▶ 기존 옹벽전면에 목재마감처리 - 옹벽 목재마감 0 → 1개소	조건부 승인 (횡단배수로 및 돌수로는 사면 측구가 반영되어 있어 재검토)
옥상녹화	▶ 건물의 옥상이 노출되어 있어 녹화 필요 - 건물 A,B,C동 (270㎡) ▶ 옥상부 공조기가 노출되어 미관저해 우려	▶ 초본류 식재 생육을 위한 최소 토심 H150으로 기반조성 (자문서 참조) - 옥상녹화 기반층 0 → 1식 ▶ 공조기를 가릴 수 있는 목재가림막 설치 - 목재가림막 0 → 5개소	승인
계단	▶ 계단A는 영상관동의 출입문과 면하여 설치토록 되어 있으나 전면 포장이 협소하고 사방의 동선이 충돌하는 지역으로 이용자 불편 우려 ▶ 계단B는 하부 동선을 감안하여 조정이 필요.	▶ 보행동선을 감안하여 영상관동 우측부로 수평으로 위치 조정 - 계단 A : 위치 조정 ▶ 주 보행동선을 감안하여 녹지쪽으로 수평이동하고 사면거리 및 보행 편의성을 감안하여 계단참 설치 - 계단 B → B-1	승인
기타사항	▶ 옥상녹화를 위한 건물 안전성 검토 필요 (건물 A,B,C동) ▶ 현장 반입하는 조경석의 석면검출 여부 판단 필요	▶ 건물 3동에 대한 구조검토 시행 - 옥상녹화 구조 검토 0 → 1식 ▶ 조경석 품질 시험비 반영 - 조경석 품질 시험비 0 → 1식	승인

Ⅲ		승인내용

실정보고사항 검토결과 그 내용이 타당하므로 실정검토내용과 같이 시행하고 추후 설계변경하여 시행