『갈현 도시농업체험원 텃밭운영에 따른 보완공사』

실정사항 및 현안사항 검토내용

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Ⅰ		공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 갈현도시농업체험원 텃밭운영에 따른 보완공사

❍ 공사기간 : 2015년 04월 01일 ~ 2015년 06월 29일

❍ 주요시설 : 생태화장실, 퇴비장, 텃밭구획정지 등

❍ 도 급 액 : 금225,540,000원

❍ 도 급 자 : 홍익산업개발(주) 대표 정연용

❍ 감 독 청 : 서울특별시 시설관리공단 공사감독3처

Ⅱ		실정보고 검토내용

❍ 관련근거 :  서울시 시설관리공단 조경공사관리3처-4937호 (2015. 06. 05.)

❍ 실정사항 및 검토내용

구 분	실 정 사 항	검 토 내 용	비 고
시 설 및 포장공	▶ 산책로변 토사 유실발지를 위해 배수로 설치 필요	▶ 토사유실 방지를 위한 목재배수로 설치 반영 - 목재수로(W200) 0m →27m	승 인
	▶ 텃밭내 추가 계단 설치 요청(9개소)을 설치요청	▶ 현장연건에 맞추어 원주목 계단 추가 반영 - 원주목계단(W600) 0개소→6개소	승 인
	▶ 산책로 주변 녹지대 토사유실 우려로 사면 안정시설 설치 필요	▶ 사면 안정화를 위해 흙막이 및 배수시설 설치반영 - 흙막이(H100) 0m → 9m - PE빗물받이(410×510×600) 0개소→ 1개소 - PE이중벽관(Ø200) 0m → 2m	승 인
	▶ 진입로 정비를 위해 철거를 진행하였으나 맨홀 설치 계획된 부분의 매립통신선(75mm,2개소)으로 인해 설치 곤란	▶ 추후 통신선 이설 시 설치가 가능하므로 맨홀 및 우수관 설치 제외 반영 - 진입로 정비 1식 → 0식 - 진입로정비-1 0식 → 1식	승 인
식재공	▶ 관리사무소 뒤편 정비 방안 검토 요청	▶ 관리사무소 뒤편은 흙이 그대로 노출되어 토사 유실방지를 위한 잔디식재 반영 - 잔디(평떼 0.3×0.3×0.3) 0㎡ → 68.3㎡	승 인

Ⅲ		기타 현안사항

❍ 은평구 도시농업위원회 요청사항(공원녹지과-9682)중 반영 가능한 아래사항에 대하여 공사에 반영

- 퇴비장 3면 가림막 및 칸막이(4칸) 설치

- 습지내 수생식물(연꽃 등) 식재

- 습지내 물 유입이 가능하도록 논과 습지를 연결하는 수로 설치

❍ 현장 여건에 따른 추가 및 변경사항

- 계획된 마사토 포장구간 현재 상태가 양호하므로 마사토 포장 제외

- 계획된 방향표지판은 공원이 한눈에 확인되어 필요치 않으므로 텃밭이용과 관련한 게시판으로 변경

- 화장실 주변 차폐식재 (은평구청 요청사항)