교통영향분석․개선대책 심의결과

□ 사 업 명 : 서부간선지하도로 민간투자사업

□ 심의일시 :  2015. 11. 9(월) 15:00

□ 현장점검 일시 :  2015. 11. 10(화) 16:00

□ 심의내용 : 수정의결

구 분	심 의 내 용	비 고
	1. 시점부 ○ 시점부 진출입구 위치(방향)는 소위원회 5차안으로 하되 진출구는 성산대교와 최대한 이격할 것 ○ 시점부 진출구는 엇갈림(IC까지 3방향 분기), 병목(성산대교까지 4→3→2차로)구간에 대해서 안내체계 및 안전대책 마련할 것 2. 방재 ○ 운영의 실효성을 담보할 수 있는 방재 운영매뉴얼을 작성하여 서울시 소방재난본부의 확인을 득하고 도시교통본부에 결과를 제출 할 것 3. 영업소 ○ 영업소 변이구간 최대한 확보할 것 (60m) 4. 기타 ○ 사업노선 주변 도로(서부간선 지상부도로, 성산대교 남단, 안양천길 등) 일대의 전반적인 교통개선대책(TSM 사업 포함)을 수립·시행하고 준공 시점 전후로 모니터링실시 할 것 - 교통개선대책 및 모니터링 실시방안에 대해서 서울시 도시교통본부와 사전 협의할 것 - 사후 모니터링 후 터널에서 노들길(잠실방향) 램프의 진입제어 여부 검토 및 협의할 것(서울시 협의) ○ 월드컵대교 개선안은 검토1안으로 제시하되, 향후 본 사업 준공시까지 월드컵대교 진출램프 미설치 될 경우 교통개선대책 마련하여 실시할 것(서울시 협의) ○ 성산대교 혼잡시 터널 내 진출입 교통제어를 중심으로 하는 ITS를 도입한 교통관리계획 수립(서울시 협의) ○ 지하도로와 다분기 도로에 적합한 도로표지 문안 검토 자문회의를 사전실시 하여 표지체계(노면, 표지판 등)에 대해 추가 검토하여 보완할 것 ○ 영업소를 포함한 터널 내 속도관리계획 제시할 것 ○ 금천구 의견에 대해서 충분히 검토하여 제시할 것 - 상행구간 요금소를 성산대교 인근으로 분리하는 의견에 대해장단점을 비교 제시하고, 상행구간(금천→성산대교)의 정체 최소화방안 검토 - 서부간선도로 지하구간 교통수요 예측 시 반영된 지상부도로 조건을 기재할 것