	의안번호	제 2019 - 호		심의사항
	심 의 년월일	2019. 05.
	예산과목	(관)자본적지출 (항)유형자산 (목)선로설비
	사 업 명	지하철역 화장실 확충
	변 경 내 용	2019년 화장실 개량 대상인 5개역(을지로3가③역, 매봉역, 양재역, 도곡역, 동대문④역)에 대한 사업추진 중 예산부족으로 발주하지 못한 양재역 화장실 개량공사에 필요한 예산을 낙찰차액(248백만원)으로 사용하고자 함
	제 출 자	건축1사업소장
	제 출 일	2019. 05. 15.

심 의 요 구 서

1. 의결주문

○ 2019년 화장실 개량 대상인 5개역(을지로3가③역, 매봉역, 양재역, 도곡역, 동대문④역)에 대한 사업추진 중 예산부족으로 발주하지 못한 양재역 화장실 개량공사에 필요한 예산을 낙찰차액(248백만원)으로 사용하여 시행한다.

2. 제안사유

○ 양재역 화장실 개량공사에 대한 필요한 예산 확보

3. 예산전용(안)

(단위: 천원)

사업명	부서명	예산과목	예산액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (A-B)	증 감(C)		낙찰차액사용후 예산액 (A+C)
						증	감
지하철역 화장실 확충	건축1사업소	유형자산/선로설비 (낙찰차액)	2,150,000	1,852,343	297,657	248,444	-	2,398,444

○ 낙찰차액 사용 : 248,444,000원

4. 붙임서류(사업설명서, 관련근거 등) 1부.

2019년 05월 15일

제출자 : 건축1사업소

예산집행심의위원회위원장 귀하

#사업설명서(의안번호 2019-  )

양재역 화장실 개량공사

1. 사업목적

○ 이용승객 증가로 인한 화장실을 증설하고 관련법령에 의거하여 다목적화장실 남녀구분 설치 등 평면 재배치하여 고객만족도 향상하고자 함.

2. 사업근거

○ 공중화장실 등에 관한 법률 제7조(공중화장실등의설치기준)

- 여성화장실등의 대변기수를 남성화장실 대,소변기수의 합 이상이 되도록 설치하여야 한다.

○ 장애인,노인,임산부등의 편의증진보장에 관한 법률 시행령 별표2

- 장애인용대변기는 남자용 및 여자용 각 1개 이상을 설치하여야 한다.

○ 사장방침 제3974호(2007.07.03.)「여성이 살기 좋은 도시 프로젝트 관련 지하철역 화장실 개선 계획」

○ 사장방침 제375호(2008.04.10.)「지하철역 화장실 개선 계획(변경)」

○ 서울시 위생과-7806호(2009.05.04.)「여성이 행복한 프로젝트 여행 화장실 확대 추진계획」

3. 사업개요

○ 사업대상 : 양재역

○ 사업내용

- 남녀화장실 변기수 조정

- 다목적화장실 남녀 구분 설치

- 천장, 벽체, 바닥 마감재 교체

○ 소요예산 : 546,101,000원

합계	건축	전기	기계	통신	소방	숙박비 감독경비	이동통신 위탁비	예비비
546,101	170,000	140,000	110,000	21,000	12,000	5,000	5,000	83,374

4. 기대효과

○ 노후화된 화장실 개량으로 직원들의 근무환경 개선 및 이용승객들의 편의증진 및 만족도 향상.  끝.