설계(계약금액)변경 소위원회 심의요청서

요청부서

기전설비과

요 청 일

2014. 09. 29(월)

공 사 명

암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사(기계분야)

공사개요

공사규모

- 암사정수센터 시설현대화(시설용량 160만㎥/일)

- 고도정수처리시설(110만㎥/일)

- 청사 증개축 및 기타 부대시설 1식

공사기간

2009. 10. 01. ～ 2014. 10. 30

감 리 사

(주)범한엔지니어링외 1개사 (책임감리원 이동호)

시 공 사

고려개발(주) 대표이사 김종오

심의요청 사유

1) 30,000천원 (이상, 이하) 변경

※ 계약심사과-1370(‘09.7.17)호 : ‘09년 소규모 상수도공사 설계심사 조정시행

설계변경 사유(요약)

- 금회 시설현대화 사업으로 관리본관외 4개동의 환경이미지 개선공사와 관련하여 음수대 및   화장실 개선공사 공정삭제에 따른 공사물량 변동

- 활성탄흡착지 전기실에 설치될 냉방기가 도면과 내역서간 상호 상이하여 설계변경 필요

주   요   변   경   내   용

1. 관리본관외 4개동(송수펌프장, 탈수기동 등) 환경이미지 개선공정 삭제

2. 활성탄흡착지 전기실 냉방기 추가설치 1대

- 공사비 산출내역

(단위 : 천원)

품 명	당 초	변 경	증감
	금 액	금 액
직접공사비	23,296	5,448	-17,848
제경비	5,314	1,242	-4,072
부가가치세	2,861	669	-2,192
E/S 1차	1,045	244	-801
E/S 2차	1,050	246	-804
E/S 3차	1,037	243	-794
합 계	34,603	8,092	-26,511

별첨서류

1. 감리단 검토보고서 1부(별도송부)

2. 설계변경 심의 요약서 1부(별도송부)

3. 계약금액 조정심의자료 1부(별도송부)

설계변경 심의 요약서

○ 공 사 명 : 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사(기계분야)

○ 설계변경 사유

- 금회 시설현대화 사업으로 관리본관외 4개동의 환경이미지 개선공사와 관련하여   음수대 및 화장실 개선공사 공정삭제에 따른 공사물량 변동

- 활성탄흡착지 전기실에 설치될 냉방기가 도면과 내역서간 상호 상이하여 설계   변경 필요

○ 주요 변경내용

1. 관리본관외 4개동(송수펌프장, 탈수기동 등) 환경이미지 개선공정 삭제

2. 활성탄흡착지 전기실 냉방기 추가설치 1대

○ 소요예산 : 감)26,511천원

(단위 : 천원)

구분	당초	변경	증감액	비고
직접공사비	23,296	5,448	-17,848
제경비	5,314	1,242	-4,072
소계	28,610	3,690	-24,920
부가세	2,861	369	-2,492
계	31,471	4,059	-27,412
E/S(1차~3차)	3,132	733	-2,399
총계	34,603	8,092	-26,511

○ 조치의견 : 추후 설계변경(정산)시 반영하고자 함