설계변경 심의요청서

안건번호	제2014- 호
구 분	물품

사 업 명	호압사 펌프제어반 제작구매 설치

- 심의일시 : 2014. 12. 16(화)

- 심의장소 : 남부수도사업소 시설관리과

요 청 기 관 명	남부수도사업소(시설관리과)
제 출 년 월 일	2014년 12월16일

설계변경 심의 설명서

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 호압사 펌프제어반 제작구매 설치

나. 사업내용

-  인버터 모터펌프 제어반 2면 제작구매 설치

다. 사업기간 : 2014. 10. 31. ~ 2014. 12. 30.

라. 계 약 자 : (주)디스엔지니어링 대표 남병단

마. 설계변경금액

- 당   초 : 금48,125천원

- 변   경 : 금48,640천원(증515,000원)

2. 설계변경 사유

가. 신규공정 및 물량 증․감 발생

3. 설계변경 세부내용

가. 물량증 ․ 감 : ELB 외 5종

나. 신규공종 : 전자변(솔레노이드밸브) 1종

다. 단가적용

- 시공 물량증․감에 대한 적용단가 : 계약 당시 단가로 적용

- 신규공종에  대한 적용단가 : 설계변경 당시 설계단가에 낙찰율(86.651%)적용

4. 설계변경금액 내용

구분	당초 계약금액	변경 계약금액	증 ․ 감	비 고
공급가액	43,750,000	44,218,182	증468,182
부가가치세	4,375,000	4,421,818	증46,818
계	48,125,000	48,640,000	증515,000

5. 조치의견

위와 같이 시공물량 증․감 및 신규공종 등 설계변경요인이 발생하여 설계변경 심의           위원회 심의결과에 따라 설계변경을 시행코자 합니다.

첨부 1) 설계변경 내역서 1부.

2) 설계변경 사전심의 의결서 1부. 끝.

설계변경 사전심의 의결서

○ 공 사 명 : 호압사 펌프제어반 제작구매 설치

○ 상기 물품제작 중 현장여건 변화에 따른 물량 증․감 및 신규 공종이

발생하여 다음과 같이 설계변경코자 하오니 계약물량증감 및 적용단가의

적정성 여부를 심의하여 주시기 바랍니다.

□ 심의위원회 의결내용 : 본안 통과, 보류, 부결, 기타

구 분	직 위	의 견	확 인	비 고
위 원 장	시설관리과장
위 원	급수운영과 김기상
위 원	급수운영과 강동길
위 원	시설관리과 김태식
간 사	시설관리과 오준식

2014. 12.

입회자  업무담당자 : 시 설 관 리 과    최경호 (인)