공사 설계변경 심의요청서

안건번호	제2015-1호
구 분	토 목

공 사 명	노량진동 50-2 ~ 상도동 370-27번지외 3개소 세척갱생관 정비공사

- 심의일시 : 2015. 9. 16(수)

- 심의장소 : 남부수도사업소 시설관리과

요 청 기 관 명	남부수도사업소(시설관리과)
제 출 년 월 일	2015년 9월 15일

설계변경 심의 설명서

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 노량진동 50-2~상도동 370-27번지외 3개소 세척갱생관 정비공사

나. 공사내용

- 당초 : D=80~300㎜, L=1,492m

- 변경 : D=80~300㎜, L=1,408m

다. 공사기간 : 2015. 05. 06. ~ 2015. 11. 01.

라. 수 급 자 : 대세환경(주)  대표 장정미

마. 설계변경금액

- 당   초 : 금338,943,300원

- 변   경 : 금338,943,300원(금액변동 없음)

2. 설계변경 사유

가. 공사 시행중 현장여건 변동에 따라 물량 증․감 및 신규공종 발생에 따른

설계변경 시행

3. 설계변경 세부내용

가. 물량증 ․ 감 : 아스팔트 포장절단 등

나. 단가적용

- 시공 물량증․감에 대한 적용단가 : 계약 당시 단가로 적용

- 신규공종에  대한 적용단가 : 설계변경 당시 설계단가에 낙찰율 적용

4. 설계변경금액 내용

구 분	당초 계약금액	변경 계약금액	증 ․ 감	비 고
공급가액	308,130,273원	308,130,273원	-
부가가치세	30,813,027원	30,813,027원	-
계	338,943,300원	338,943,300원	-

5. 조치의견

위와 같이 시공물량 증․감 및 신규공종 등 설계변경요인이 발생하여 설계변경 심의위

원회 심의결과에 따라 설계변경을 시행코자 합니다.

첨부 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 사전심의 의결서 1부. 끝.

설계변경 사전심의 의결서

○ 공 사 명 : 노량진동 50-2~상도동 370-27번지외 3개소 세척갱생관 정비공사

○ 상기 공사시행 중 현장여건 변화에 따른 물량증․감이 발생하여 설계변경코자 하오니 계약물량증감 및 적용단가의 적정성 여부를 심의하여 주시기 바랍니다.

□ 심의위원회 의결내용 : 본안 통과, 보류, 부결, 기타

구 분	직 위	의 견	확 인	비 고
위 원 장	시설관리과장
위 원	급수운영과 이경희
위 원	급수운영과 강동철
위 원	급수운영과 강동길
간 사	시설관리과 고신석

○ 설계변경에 대한 수급자 의견 :

2015. 09. 16.

입회자  업무담당자 : 시 설 관 리 과    한규수 (인)

수  급  인 : 대세환경(주)  대표  장정미(인)