심 의 의 결 서

일 시	2015. 8. 18.(화) 09:00
장 소	노원소방서 예방과장실
의 안	소방시설 종합정밀점검 보완기간 연장 건
의결내용	◯ 상림아파트 시정보완명령 기간연장 신청 건 - 연기기간 : 9월 24일 - 연기사유 1. 당초 8월 24일까지 였으나 지적사항 많고 휴가 및 입찰기간 등으로 기간 내 수리 보완이 어려워 30일 연장 신청함
심의위원 및 간사
연번	구 분		성 명			서 명		비고
1	위 원 장		김 진 웅
2	위 원		최 범 영
3	위 원		임 채 엽
4	위 원		유 용 석
5	위 원		유 인 식
6	간 사		정 재 환
7	서 기		김 덕 영