단 수 작 업 계 획 서

(쌍문동707-13~631-2 외 1개소 세척갱생관 정비공사)

2014. 07.

서울특별시시설관리공단

(상수도공사관리처)

단 수 작 업 계 획

도봉구관내  쌍문동 707-13번지일대 노후된 관로 교체작업 및 단수구역 축소를

위한 공사로서 단수로 인한 시민불편을  최소화하고 공사를 차질없이

시행하기 위하여 단수 계획을 수립 시행하고자 함.

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 쌍문동 707-13~631-2 외 1개소 세척갱생관 정비공사

○ 공사개요 : D=20~300mm  L=1087m

○ 시공회사 : (주)진보컨스트텍  대표이사  박  권  신

□ 지역별 단수계획

지시번호	단 수 위 치	단수예정일	단수시간	단수세대	작업 일수	비고
1	도봉로	2014.07.16~ 2014.07.18	22:00~05:00	약 40	6

□ 일일작업 계획

- 1구간 단수관련

20:00 ~ 21:30 공사착수 준비 - 일시급수 연결작업 , 안전시설 설치

22:00 ~ 04:00 터파기작업

22:00 ~ 05:00 단수, 단수구역외불출수 세대 확인, 통수, 통수후 불출수확인

05:00 ~ 06:00 포장작업 및 마무리 - 안전시설 철거 및 청소상태 확인

□ 홍보계획

○ 단수안내 보도요청 및 홍보협조요청 (북부수도사업소)

○ 단수안내문 배포 및 부착((주)진보컨스트텍 현장대리인)

- 단수지역에 안내문을 제작하여 공사2일전 1가구 1매씩 배포

- 벽보용 안내문을 통행이 많은 단수지역 골목입구 및 골목내에 부착

○ 홈페이지 단수안내 게재(북부수도사업소)

- 상수도사업본부 홈페이지 단수안내

○ 다량 급수처 단수안내((주)진보컨스트텍 현장대리인)

- 병원, 학교, 주요기관 등은 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 저수조 만수위 확보독려 및 절수 홍보(쌍문동 성원하이츠,샤르망아파트)

○ 민원발생이 많은 영업집 단수안내((주)진보컨스트텍 현장대리인)

- 음식점, 다방 등 수돗물을 많이 사용하는 영업집은 직접방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 사용할 수돗물을 단수전에 미리 용기 등에 충분히 받아 사용토록 안내(아파트 상가)

○ 급수차지원(북부수도사업소)

- 단수지역 주민이 급수차 지원 요청시 북부수도사업소 보유 급수차로 수돗물 공급

- 단수지역 주민에게 공급할 수 있도록 수돗물 PET병 확보

□ 시공회사 및 감독 연락처

구 분	성 명	연 락 처
시 공 회 사	(주)진보컨스트텍	02-576-0871
현장대리인(현장소장)	이 길 중	*************
감 독 자	이 병 진	02-2290-6041 *************
발주청 담당	윤 승 구	02-3146-3343

단수안내문

안녕하세요 북부수도사업소 급수운영과에서 알려드립니다

도봉로 길 상수도관으로 급수불편사항이 발생되고 있어 금회 노후된 상수도관

교체공사를 시행하게 되었습니다.

공사기간 내 단수 및 소음 , 차량주차 등 불편사항이 발생될 수 있어 사전에 공사

시행을 알려드리며 불편사항이 최소화 되도록 최선을 다하겠습니다.

주민여러분께서도 많은 이해와 협조를 부탁드립니다.

단수시간 : 2014. 07. 16~2014. 07. 18  (22:00 ~ 익일 05:00)

단수지역 : 쌍문동 715-1번지 일대

시공회사 : (주)진보컨스트텍

현장소장 : 이길중 (*************)

공사감독 : 이병진 (*************)

북부수도사업소장