아리수토탈서비스 특화 사업

〈기관명 : 남부수도사업소〉

□ 사 업 명 : 빅테이터를 활용한 소출수민원 선제적 대응

□ 추진배경

○ 소출수 민원 선제적 대응으로 시민 행복지수 증대

○ 급수인구 변동 현황을 사전파악 급수환경 개선

□ 추진개요

○ 빅테이터를 활용하여 거주인구 변동에 따른 적절한 공급량 조정

○ 가압급수 지역에 대한 펌프 양정 및 용량을 다시 산정하여 적용

○ 소출수 예상지역에 대한 급수구역을 선제적으로 조정하여 대응

□ 추진계획

○ 급수구역별 적정인구 산정  ----------  2015. 2~3월

- Geocoding에 의한 정확한 인구산정(빅테이터 활용)

○ 펌프용량 재산정 --------------------  2015. 4~5월

- 종전 수전수에 의한 산정 방식에서 거주인구 반영 재산정

○ 급수구역 조정 ----------------------  2015. 6~10월

□ 기대효과

○ 소출수 지역에 대한 선제적 대응으로 대시민 신뢰도 제고

○ 적정 공급량 조정을 통한 안정적 급수로 유수율 향상