업무연락전
작 성 자	조양연	작성일자	2014-11-13	문서번호	도시기반시설본부-14-44424
대상현장	[구리암사대교 건설공사](주)도화엔지니어링
제 목	아천IC 구조물 추가공사비 검토보고
내 용
1. 암사감리2014-763호(2014.11.3.)와 관련입니다. 2. 위 대호로 검토복하신 추가공사비 반영 실정보고에 대하여 아래 사항을 보완하여 보고하시기 바랍니다. 가. 연장작업 및 휴일작업 할증을 얼마까지 반영하였는지에 대한 검토가 없고 나. 구조물공사 거푸집 전용횟수 조정의 적정성 검토의견 및 공사비 당초 변경 비교 내역 보완요 다. 위 사항과 추가공사비 적용에 대한 설계자 검토의견 및 비상주감리의 검토의견을 첨부하여 검토 보고하시기 바랍니다. 끝.
붙임 :

서울특별시