안전 감리원 투입계획 보고

2015.10.

서빙고고가교 감리단

1. 용역명

서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사외 1건 통합전면책임감리용역

2. 용역 개요

1) 위 치

① 서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사 : 용산구 보광동~주성동

② 왕산로 중앙버스 전용차로 설치공사 : 종로구 흥인지문~동대문구 청량리역

③ 공항로 등 3개소 중앙버스전용차로 기능개선공사: 강서구 김포공항입구 외3개소

2) 규 모

① 서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사

- 기존 고가철거 B=16.0, L=753m,

- 고가설치 : B=6.4~10.4m, L=115~290m,

- 기존고가 보수․보강 : B=16.0m, L=140m

② 왕산로 중앙버스 전용차로 설치공사

- 중앙차로 설치 : 3.4㎞, 중앙승강장 : 11개소 (보도육교 철거 1개소)

③ 공항로 등 3개소 중앙버스전용차로 기능개선공사

- 중앙차로 설치 : 0.9㎞, 중앙승강장 : 4개소

3) 공사기간

① 서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사	: 2011.01.06.~2015.12.31

② 왕산로 중앙버스 전용차로 설치공사	: 2010.12.31.~2012.02.29

③ 공항로 등 3개소 중앙버스전용차로 기능개선공사	: 2012.04.30.~2012.12.14

4) 용역기간

- 2010.12.31.~ 2016.01.31.(49개월)

5) 감리사

- (주)한국종합기술(60%), (주)선진엔지니어링 종합건축사사무소(40%)

6) 용역비

- 2,035,400,000원(낙찰율 : 78.86%)

3. 용역 현황

1) 계약현황

구 분		계약일자	계약기간	계약금액(천원)	비 고
전체	최초	‘10.12.29	‘10.12.31 ~ ’14.02.28	1,510,300	서빙고+왕산로 통합
	1회	‘12.06.04	‘10.12.31 ~ ’14.02.28	1,612,300	E/S, 공항로 추가
	2회	‘12.11.21	‘10.12.31 ~ ’14.02.28	1,612,300	감리원 배치변경
	3회	‘14.01.14	‘10.12.31 ~ ’15.02.28	1,612,300	준공기한 연장
	4회	‘14.05.02	‘10.12.31 ~ ’15.02.28	1,638,300	보조(안전)감리원 투입
	5회	‘15.01.13	‘10.12.31 ~ ’16.02.28	2,035,400	준공기한 연장
	6회	‘15.06.22	‘10.12.31 ~ ’16.01.31	2,003,800	보조(안전)감리원 투입
5차 (금차)	최초	‘15.01.15	‘15.01.15 ~ ’16.01.31	481,100
	1회	‘15.06.22	‘15.01.15 ~ ’16.01.31	549,100	보조(안전)감리원 투입

2) 5차분 감리원 투입 현황

(단위: 개월, 2015.09.30.기준)

구 분		계약	투입	잔여	비고
책임감리원(토목)		12	8.09	3.91
보조 감리원	토 목1	12	8.09	3.91
	토 목2	1.55	0	1.55
	전 기	3.0	0	3.0
	조 경	1.0	0	1.0
	강 교	8.0	2.32	5.68	완료
	안 전	6.73	5.77	0.96
	소 계	32.28	16.18	16.10

4. 보조(안전)감리원 투입 변경 계획

1) 현황

① 현재 감리원 3인(책임감리원1인, 보조감리원 2인)이 근무하고 있으며,

② 배치된 안전분야 전담 보조감리원은 배치기간 종료(2015.04.01.~10.31.)로, 10말 본선 개통 후 감리원 2인이 근무하게 됨

③ 본선 개통 후 주요 잔여 공종은 임시가설 교량 철거 및 강변북로 및 서빙고로 복구 작업만 남은 상태임

2) 문제점 및 대책

① 임시가교 철거 구간중 경원선 횡단구간의 경우는 철거작업이 야간(작업시간 01:00~04:30)에 이루어짐에 따라 감리원 2인(책임감리원1인, 보조감리원 1인)으로 현장 및 안전관리에 문제점이 있음

② 또한, 임시 가설 교량은 중량물로 크레인을 이용하여 철거함에 따라 철저한 안전관리가 요구됨.

② 임시가설교량 철거 초기시 현장 안전관리 지도 및 확립이 필요함에 따라, 현재 배치된 안전분야 보조감리원의 배치기간을 1개월 연장 배치하여 현장안전관리에 만전을 기하고자 함.

3) 투입 계획 및 감리비

① 투입계획은 당초 6.73개월(2015.04.01.~2015.10.31.) → 변경 7.73개월
(2015.04.01.~2015.11.31.) : 1개월 추가

② 보조(전기)감리원의 투입계획을 조정하여 감리비 증감 없음.

5. 항후 추진계획

1) 2015년 10월말 서빙고고가교 본선 개통후 임시가설교량 철거에 따른 안전관리 문제점이 발생함에 따라,

2) 안전분야 보조감리원을 금회(5차)분 설계변경(감리원 배치계획 변경하여 추가 감리비 없이 1개월 추가투입)실시하여 임시가설교량 철거시 안전관리에 만전을 기하겠음.

2015.10.

책임감리원  김  용  선