3월 안전점검 대상공사장

연번	공사명(공구명)	공사개요	총공사비 (억원)	착공일	준공 예정일	공정(%)	비고
계	도시기반시설본부	70개 공사장	토목부27, 건축부13, 방재시설부15 도시철도 사업부5, 토목부9, 설비부1
소계	시 설 국	55개 공사장	토목부27, 건축부13, 방재시설부15
	토 목 부	27개 공사장
1	강남순환도시고속도로(4공구)	L=2.48km, B=4~6차로	1,826	2001-12-29	2019-11-30	77.9
2	강남순환도시고속도로(8공구)	L=7.96km, B=4~10차로	2,351	2002-07-03	2019-11-30	55.3
3	동부간선도로 확장공사(1공구)	도로확포장 : L=1.4km(지하차도 1개소 등)	244	2007-10-17	2019-12-31	23.1
4	동부간선도로 확장공사(2공구)	도로확포장 : L=3.2km(지하차도 2개소, 옹벽)	2,853	2008-12-30	2019-12-31	52.8
5	동부간선도로 확장공사(3공구)	도로확포장 : L=2,2km(지하차도 2개소 등)	809	2008-02-15	2020-12-31	63.1
6	월드컵대교 건설공사	L=1,980m, B=6차로	2,403	2010-03-22	2020-08-31	38.0
7	율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사	L=800m, B=4→6차로(지하차도 300m)	532	2010-10-11	2019-12-31	53.2	해빙기점검
8	천호대로(광나루역) 확장공사	도로확장 L=900m, B=10차로(지하차도,옹벽)	775	2010-10-11	2018-06-30	82.3
9	신림~봉천터널 도로건설공사(1공구)	L=3.1km (터널 1,714m BOX 756m U-Type 130m, 토공 500m)	2,123	2010-10-05	2023-12-30	6.7
10	신림~봉천터널 도로건설공사(2공구)	L=2.48km(폭원 왕복 4차로)	1,866	2010-10-08	2023-12-31	38.0
11	서부간선지하도로 민간투자사업(1공구)	도로연장 : 5.194km,(설계속도 : 80km/h) (터널 : 4.094km(병렬터널), 개착 : 1.1km)	3,358	2016-03-01	2021-02-28	19.2
12	서부간선지하도로 민간투자사업(2공구)	연장 L=5.136km (터널:3.808km, 개착박스 0.430km, U타입 0.160km)	2,561	2016-03-01	2021-02-28	10.0
13	올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사	램프신설 : L=1,383m, 램프이설 : L=1,309m 올림픽대로 이설 : 하남방향(1.21㎞), 김포방향(1.46㎞)	264	2016-04-01	2020-03-30	28.5	해빙기점검
14	광복교~안양교 도로확장공사	도로확장 B=24.5m~31.9m, 6차로, L=1,110m 광복교 보도설치, 안양교 철거 및 신설	432	2016-04-01	2019-09-12	29.5
15	남부순환로(개봉1동사거리 주변) 평탄화공사	도로개선 : 폭 30.0m(6차로), 연장 1.1㎞ 교량개축 : 폭 22.0m → 31.4m, 연장 38.0m	154	2016-04-25	2019-03-24	20.6
16	중랑천 초안산앞 보행교량 설치공사	보행교량 신설(B=4.5m, L=191m)	52	2016-04-29	2018-04-28	76.8
17	여의교 확장공사	확장(폭 8차로→9차로, 연장 240m) 및 교차로 개선, 보행교량 신설(폭 4m, 연장240m)	44	2016-11-30	2018-05-29	63.6
18	장지지하차도~동부간선도로간 연결도로설치공사	진입신설 Ramp-A L=638m , 1차로(B=6.0m) 진출신설 Ramp-B L=455m , 1차로(B=6.0m)	364	2017-06-13	2019-09-30	43.3
19	퇴계로 외 1개소 도로공간재편공사	퇴계로 B=5.5m→6.0~14.0m,L=850m 만리재로 B=4.0m→6.0~10.0m, L=1,170m	28	2017-01-04	2018-04-30	90.0
20	올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사	램프신설:L=712.6m(교량 235.0m, B=6.4m, 옹벽=477.6m), 이설 : 김포방향 1차로	94	2016-11-30	2018-11-29	37.3	해빙기점검
21	성산대교 북단 성능개선공사	접속교(B=27m, L=212m) 램프 2개소 - 구조물 보수보강, 슬래브 교체, 가교설치	168	2017-03-23	2018-04-22	37.4
22	밤고개로 확장공사	도로확장 6 → 7~8차로(총연장 1.845km)	92	2017-05-18	2018-12-30	15.1	해빙기점검
23	종로 중앙버스전용차로 설치공사	연장 L=3.8km, 정류소 15개소 설치(고정식 2개소, 이동식 13개소)	21	2017-08-29	2018-12-30	90.0
24	노들섬 특화공간 조성공사(토목)	옹벽보수공사 (10,137㎡), 보도육교(폭3.5m, 연장 139m)설치	47	2017-11-15	2018-12-31	19.2
25	동작대로(연장) 중앙버스전용차로 설치공사	연장 2.8km, 버스정류장 4개소	24	2017-12-22	2018-06-30	27.7
26	한남2고가 철거 및 중앙버스전용차로 설치공사	고가차도 철거(폭15m, 연장 341m)중앙버스용차로 설치 (연장 2km, 버스정류소 3개소	50	2017-12-26	2018-06-30	0.9
27	성산대교 남단 성능개선공사	접속교 슬래브 철거․신설 램프교 구조물 보수․보강	50	2017-12-26	2018-06-30	0
	건 축 부	13개 공사장
28	서울기록원 건립공사	규모 : 지하2층, 지상5층 연면적15,004.0㎡ 구조 : 철근콘크리트조	142	2016-04-20	2018-10-17	44.8
29	서울 소방행정타운 건립공사	대지:48,950.10㎡, 건축:6,648.06㎡,연면적:25,174.81㎡, 건물구조:철골철근콘크리트, 지하2층 지상15층	312	2016-05-18	2018-05-17	84.1
30	세종대로일대 역사문화 특화공간 조성공사	지하3층/지상1층, 연면적 2,899.89㎡ 문화및집회시설(전시장)	82	2016-10-26	2018-04-25	48.8
31	북한산성 대성문 해체보수공사	대성문 육축 및 문루 전면 해체 보수	12	2017-02-28	2018-08-27	65.2
32	노들섬 특화공간 조성공사(건축)	지상3층 4개동 연면적 9,385.17㎡	148	2017-10-26	2019-02-25	12.5
33	시민생활사 박물관 리모델링(증축) 공사	리모델링(증축)공사 3개동, 지하1층/지상5층, 연면적 6,919㎡)	71	2017-10-20	2019-02-19	8.4	해빙기점검
34	남부도로사업소 청사 신축공사	지하1층 지상5층 연면적 5,360㎡	65	2017-11-20	2019-05-19	2.2	해빙기점검
35	홍릉바이오의료 R&D앵커조성공사(2단계)	신관동(리모델링)지하1층/지상5층,연면적 3,216㎡, 별관동 (증축공사)지하2층/	80	2017-11-15	2019-04-14	8.2
36	시립노원청소년직업체험센터 신축공사	지하1층/지상3층 연면적 3299.76㎡ 청소년수련시설	34	2017-11-17	2019-03-16	12.0	해빙기점검
37	시립중랑노인전문요양원 증축공사(장기1차)	지하1/지상5층, 증축 2,280.35, 증축	23	2017-12-20	2019-06-19	2.3
38	창동역고가하부 문화예술공방 조성공사	대지면적1,175㎡,연면적450㎡ 7개동(지상1층)	10	2017-12-26	2020-06-25	18.4
39	돈화문 민요박물관 건립공사	지하2층, 지상1층, 연면적 1,384㎡	48	2018-01-01	2019-06-30	0.0	해빙기점검
40	스페이스 살림 조성공사	지하2층/지상7층 연면적: 17,621 ㎡	172	2017-12-26	2020-06-25	0.0	해빙기점검
	방재시설부	15개 공사장
41	제물포터널 민간투자사업(1공구)건설공사	총연장 : 4.28km, 지하차도:660m / 2개소 터널:7,640m/2개소, 기타 부대시설	2,304	2015-10-16	2020-10-15	19.6
42	제물포터널 민간투자사업(2공구)건설공사	총연장 : 3.25km, 지하차도:694m / 2개소 터널:5,846m/2개소, 기타 부대시설	3,016	2015-10-16	2020-10-15	31.6
43	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업	고도처리 115만톤/일(시설현대화 36만톤/일)	3,125	2009-11-09	2018-12-31	72.3
44	잠원2빗물펌프장 신설공사	잠원2빗물펌프장 :펌프장 신설 1,400㎥/분, 집수조 V=15,500㎥	135	2013-01-03	2018-05-30	94.2
45	신월빗물저류 배수시설등 방재시설 확충공사	수직구:6개소(저지2,고지1,환기1,유출1,유지관리1) - 저류:L=3.629km,D=10.0m 유도:L=1.097km,D=5.5m	1,083	2013-05-27	2019-06-30	70.9	해빙기점검
46	서초역~방배로간 도로개설공사	도로개설 폭40m(6~8차로), 연장 1.28km(터널 355m포함)	539	2015-10-20	2019-01-31	68.7	해빙기점검
47	양평1유수지CSOs저류조 설치공사	CSOs저류조 설치 46,000㎥	80	2016-12-05	2019-08-30	19.3	해빙기점검
48	경춘선 폐선부지 공원조성공사(3단계)	길이(1.1㎞) 면적(53,860㎡)	35	2017-01-02	2018-06-30	69.2
49	난지물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업	3차(총인)처리시설 설치 Q=439,200㎥/일	163	2017-08-30	2019-02-27	0
50	남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장)	공원(16,373㎡) 주차장(16,992㎡) 조성 곤돌라 신설(888m)	205	2017-08-30	2019-02-27	6.4
51	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업	3차(총인)처리시설 설치	163	2017-08-30	2019-02-27	5.6
52	탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업	3차(총인)처리시설 설치 2개소(45만톤/일)	120	2017-09-13	2019-11-12	9.5	해빙기점검
53	서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업	3차(총인)처리시설 Q=737,000㎥(토목, 건축, 조경공사)	265	2017-08-30	2019-02-27	5.7
54	남부도로사업소 제설전진기지 조성사업	A=6,142㎡, 직원대기실 및 창고	21	2017-09-13	2018-04-30	68.8
55	디지털3단지~두산길간 지하차도건설공사(장기1차)	도로신설 L=452m B=8.0m(왕복2차로)~10.4m(왕복2차로+편측보도)	502	2017-12-26	2021-04-08	1.4
	도시철도국	15개 공사장	도시철도사업부5, 도시철도토목부9 도시철도설비부1
	도시철도사업부	5개 공사장
56	신림선 도시철도 1공구 건설공사	L=2,287m(정거장 4개소, 환기구 1개소)	1,250	2017-02-01	2022-01-30	5.2	해빙기점검
57	신림선 도시철도 2공구 건설공사	L=3,002m(정거장 4개소, 환기구 3개소, 차량기지 1개소)	2,053	2017-02-01	2022-01-30	8.5	해빙기점검
58	신림선 도시철도 3공구 건설공사	L=2,471m(정거장 3개소, 환기구 1개소)	1,071	2017-02-01	2022-01-30	6.1
59	별내선(8호선연장) 건설공사(1공구)	L=1,184m, 정거장 1개소(서울 1개소, 경기 5개소)	802	2017-08-23	2023-08-21	0.7
60	별내선(8호선연장) 건설공사(2공구)	연장 2,536m [NATM 1.21km, 쉴드TBM 1.28km (단선병렬), 환기구 2개소]	1,338	2017-09-30	2023-09-28	0.5
	도시철도토목부	9개 공사장
61	하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사	L=628m(정거장 1개소)	746	2015-03-17	2019-03-28	47.8
62	하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사	L=471m(환기구1개소)	405	2015-03-30	2018-07-10	68.9
63	하남선(5호선연장) 궤도공사(1공구)	궤도부설 : 11.857km(단선) 분기기부설 : 13틀	58	2017-09-01	2018-12-31	6.9
64	지하철9호선 918공구	L=1.291km(정거장 1개소)	1,419	2010-02-19	2018-05-30	97.5
65	지하철9호선 919공구	L=1.2km(정거장 2개소)	2,041	2009-12-31	2018-05-30	94.3
66	지하철9호선 920공구	L=1.39km(정거장 1개소)	1,532	2009-12-31	2018-05-30	94.1
67	지하철9호선 921공구	L=1.74km((정거장 2개소)	1,773	2009-12-31	2018-05-30	92.6
68	지하철9호선 922공구	L=1.47km(정거장 1개소)	1,329	2010-09-16	2018-05-30	94.6
69	지하철9호선 923공구	L=1.7km(정거장 1개소)	1,026	2010-09-20	2018-05-30	93.7
	도시철도설비부	1개 공사장
70	지하철9호선 3단계 신호보안설비 공사	9호선 신호보안설비	57	2016-01-08	2018-12-22	93.2

(2018년)