5월 안전점검 대상공사장

연번	공사명(공구명)	공사개요	총공사비 (억원)	착공일	준공 예정일	공정(%)	비고
계	도시기반시설본부	72개 공사장	토목부26, 건축부16, 방재시설부15 도시철도 사업부5, 토목부9, 설비부1				풍수해점검
소계	시 설 국	57개 공사장	토목부26, 건축부16, 방재시설부15				42개 현장
	토 목 부	26개 공사장
1	강남순환도시고속도로(4공구)	L=2.48km, B=4~6차로	1,826	2001-12-29	2019-11-30	78.7	풍수해 점검
2	강남순환도시고속도로(8공구)	L=7.96km, B=4~10차로	2,351	2002-07-03	2019-11-30	55.9	풍수해 점검
3	동부간선도로 확장공사(1공구)	도로확포장 : L=1.4km(지하차도 1개소 등)	244	2007-10-17	2019-12-31	23.1
4	동부간선도로 확장공사(2공구)	도로확포장 : L=3.2km(지하차도 2개소, 옹벽)	2,853	2008-12-30	2019-12-31	53.3	풍수해 점검
5	동부간선도로 확장공사(3공구)	도로확포장 : L=2,2km(지하차도 2개소 등)	809	2008-02-15	2020-12-31	64.8	풍수해 점검
6	월드컵대교 건설공사	L=1,980m, B=6차로	2,357	2010-03-22	2020-08-31	38.6	풍수해 점검
7	율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사	L=800m, B=4→6차로(지하차도 300m)	532	2010-10-11	2019-12-31	55.3	풍수해 점검
8	천호대로(광나루역) 확장공사	도로확장 L=900m, B=10차로(지하차도,옹벽)	775	2010-10-11	2018-06-30	83.7
9	신림~봉천터널 도로건설공사(1공구)	L=3.1km (터널 1,714m BOX 756m U-Type 130m, 토공 500m)	2,164	2010-10-05	2023-12-30	7.0
10	신림~봉천터널 도로건설공사(2공구)	L=2.48km(폭원 왕복 4차로)	1,866	2010-10-08	2023-12-31	39.4
11	서부간선지하도로 민간투자사업(1공구)	도로연장 : 5.194km,(설계속도 : 80km/h) (터널 : 4.094km(병렬터널), 개착 : 1.1km)	3,358	2016-03-01	2021-02-28	21.5	풍수해 점검
12	서부간선지하도로 민간투자사업(2공구)	연장 L=5.136km (터널:3.808km, 개착박스 0.430km, U타입 0.160km)	2,621	2016-03-01	2021-02-28	12.8	풍수해 점검
13	올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사	램프신설 : L=1,383m, 램프이설 : L=1,309m 올림픽대로 이설 : 하남방향(1.21㎞), 김포방향(1.46㎞)	264	2016-04-01	2020-03-30	30.2	풍수해 점검
14	광복교~안양교 도로확장공사	도로확장 B=24.5m~31.9m, 6차로, L=1,110m 광복교 보도설치, 안양교 철거 및 신설	432	2016-04-01	2019-09-12	30.2	풍수해 점검
15	남부순환로(개봉1동사거리 주변) 평탄화공사	도로개선 : 폭 30.0m(6차로), 연장 1.1㎞ 교량개축 : 폭 22.0m → 31.4m, 연장 38.0m	154	2016-04-25	2019-03-24	21.1	풍수해 점검
16	중랑천 초안산앞 보행교량 설치공사	보행교량 신설(B=4.5m, L=191m)	52	2016-04-29	2018-11-30	90.7	풍수해 점검
17	여의교 확장공사	확장(폭 8차로→9차로, 연장 240m) 및 교차로 개선, 보행교량 신설(폭 4m, 연장240m)	44	2016-11-30	2018-05-29	60.9
18	장지지하차도~동부간선도로간 연결도로설치공사	진입신설 Ramp-A L=638m , 1차로(B=6.0m) 진출신설 Ramp-B L=455m , 1차로(B=6.0m)	364	2017-06-13	2019-09-30	53.7	풍수해 점검
19	올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사	램프신설:L=712.6m(교량 235.0m, B=6.4m, 옹벽=477.6m), 이설 : 김포방향 1차로	94	2016-11-30	2018-11-29	48.4	풍수해 점검
20	성산대교 북단 성능개선공사	접속교(B=27m, L=212m) 램프 2개소 - 구조물 보수보강, 슬래브 교체, 가교설치	210	2017-03-23	2018-12-22	38.0	풍수해 점검
21	밤고개로 확장공사	도로확장 6 → 7~8차로(총연장 1.845km)	92	2017-05-18	2018-12-30	18.3
22	종로 중앙버스전용차로 설치공사	연장 L=3.8km, 정류소 15개소 설치(고정식 2개소, 이동식 13개소)	21	2017-08-29	2018-12-30	95.2
23	노들섬 특화공간 조성공사(토목)	옹벽보수공사 (10,137㎡), 보도육교(폭3.5m, 연장 139m)설치	47	2017-11-15	2018-12-31	26.4
24	동작대로(연장) 중앙버스전용차로 설치공사	연장 2.8km, 버스정류장 4개소	24	2017-12-22	2018-06-30	2.6
25	한남2고가 철거 및 중앙버스전용차로 설치공사	고가차도 철거(폭15m, 연장 341m)중앙버스용차로 설치 (연장 2km, 버스정류소 3개소	50	2017-12-26	2018-06-30	0.9
26	성산대교 남단 성능개선공사	접속교 슬래브 철거․신설 램프교 구조물 보수․보강	163	2017-12-26	2019-04-30	4.0	풍수해 점검
	건 축 부	16개 공사장
27	서울기록원 건립공사	규모 : 지하2층, 지상5층 연면적15,004.0㎡ 구조 : 철근콘크리트조	142	2016-04-20	2018-10-17	51.6
28	서울 소방행정타운 건립공사	대지:48,950.10㎡, 건축:6,648.06㎡,연면적:25,174.81㎡, 건물구조:철골철근콘크리트, 지하2층 지상15층	312	2016-05-18	2018-05-17	88.4
29	세종대로일대 역사문화 특화공간 조성공사	지하3층/지상1층, 연면적 2,899.89㎡ 문화및집회시설(전시장)	121	2016-10-26	2018-10-30	51.0
30	북한산성 대성문 해체보수공사	대성문 육축 및 문루 전면 해체 보수	12	2017-02-28	2018-08-27	64.4
31	노들섬 특화공간 조성공사(건축)	지상3층 4개동 연면적 9,385.17㎡	148	2017-10-26	2019-02-25	16.1	풍수해 점검
32	시민생활사 박물관 리모델링(증축) 공사	리모델링(증축)공사 3개동, 지하1층/지상5층, 연면적 6,919㎡)	71	2017-10-20	2019-02-19	16.6	풍수해 점검
33	남부도로사업소 청사 신축공사	지하1층 지상5층 연면적 5,360㎡	65	2017-11-20	2019-05-19	5.9	풍수해 점검
34	홍릉바이오의료 R&D앵커조성공사(2단계)	신관동(리모델링)지하1층/지상5층,연면적 3,216㎡, 별관동 (증축공사)지하2층/	81	2017-11-15	2019-04-14	11.0	풍수해 점검
35	시립노원청소년직업체험센터 신축공사	지하1층/지상3층 연면적 3299.76㎡ 청소년수련시설	34	2017-11-17	2019-03-16	17.2	풍수해 점검
36	G밸리 근로자 문화 복지센터 건립공사	지하2층, 지상10층 연면적 6,017㎡	65	2018-03-02	2020-03-01	1.4
37	시립중랑노인전문요양원 증축공사(장기1차)	지하1/지상5층, 증축 2,280.35, 증축	23	2017-12-20	2019-06-19	8.7	풍수해 점검
38	창동역고가하부 문화예술공방 조성공사	대지면적1,175㎡,연면적450㎡ 7개동(지상1층)	7	2017-12-26	2020-06-25	36.8
39	돈화문 민요박물관 건립공사	지하2층, 지상1층, 연면적 1,384㎡	48	2018-01-01	2019-06-30	7.7	풍수해 점검
40	스페이스 살림 조성공사	지하2층/지상7층 연면적: 17,621 ㎡	172	2017-12-26	2020-06-25	6.1	풍수해 점검
41	전태일 노동복합시설 리모델링공사	대지 : 553.1㎡, 연면적 : 1924.33㎡, 건축면적 : 426.84㎡, 건폐율 : 77.17	25	2018-02-21	2018-12-20	5.2
42	구 북부법조단지 환경개선공사	지하1층 증축, 총 연면적 8,254㎡ ※ 보행로 3,500㎡, 조경 1,554㎡, 차로 3,200㎡	36	2018-03-21	2019-04-20	0
	방재시설부	15개 공사장
43	제물포터널 민간투자사업(1공구)건설공사	총연장 : 4.28km, 지하차도:660m / 2개소 터널:7,640m/2개소, 기타 부대시설	2,304	2015-10-16	2020-10-15	23.2	풍수해 점검
44	제물포터널 민간투자사업(2공구)건설공사	총연장 : 3.25km, 지하차도:694m / 2개소 터널:5,846m/2개소, 기타 부대시설	3,016	2015-10-16	2020-10-15	34.4	풍수해 점검
45	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업	고도처리 115만톤/일(시설현대화 36만톤/일)	3,125	2009-11-09	2018-12-31	72.5	풍수해 점검
46	잠원2빗물펌프장 신설공사	잠원2빗물펌프장 :펌프장 신설 1,400㎥/분, 집수조 V=15,500㎥	135	2013-01-03	2018-05-30	94.2
47	신월빗물저류 배수시설등 방재시설 확충공사	수직구:6개소(저지2,고지1,환기1,유출1,유지관리1) - 저류:L=3.629km,D=10.0m 유도:L=1.097km,D=5.5m	1,380	2013-05-27	2019-06-30	71.5	풍수해 점검
48	서초역~방배로간 도로개설공사	도로개설 폭40m(6~8차로), 연장 1.28km(터널 355m포함)	539	2015-10-20	2019-01-31	73.7	풍수해 점검
49	양평1유수지CSOs저류조 설치공사	CSOs저류조 설치 46,000㎥	80	2016-12-05	2019-08-30	36.4	풍수해 점검
50	경춘선 폐선부지 공원조성공사(3단계)	길이(1.1㎞) 면적(53,860㎡)	35	2017-01-02	2018-06-30	76.9
51	난지물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업	3차(총인)처리시설 설치 Q=439,200㎥/일	163	2017-08-30	2019-02-27	0
52	남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장)	공원(16,373㎡) 주차장(16,992㎡) 조성 곤돌라 신설(888m)	205	2017-08-30	2019-02-27	6.6	풍수해 점검
53	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업	3차(총인)처리시설 설치	200	2017-08-30	2019-02-27	0.8	풍수해 점검
54	탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업	3차(총인)처리시설 설치 2개소(45만톤/일)	120	2017-09-13	2019-11-12	11.6	풍수해 점검
55	서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업	3차(총인)처리시설 Q=737,000㎥(토목, 건축, 조경공사)	265	2017-08-30	2019-02-27	9.5	풍수해 점검
56	남부도로사업소 제설전진기지 조성사업	A=6,142㎡, 직원대기실 및 창고	21	2017-09-13	2018-05-31	76.7
57	디지털3단지~두산길간 지하차도건설공사(장기1차)	도로신설 L=452m B=8.0m(왕복2차로)~10.4m(왕복2차로+편측보도)	146	2017-12-26	2021-04-08	2.9	풍수해 점검
	도시철도국	15개 공사장	도시철도사업부5, 도시철도토목부9 도시철도설비부1
	도시철도사업부	5개 공사장
58	신림선 도시철도 1공구 건설공사	L=2,287m(정거장 4개소, 환기구 1개소)	1,250	2017-02-01	2022-01-30	5.2	풍수해 점검
59	신림선 도시철도 2공구 건설공사	L=3,002m(정거장 4개소, 환기구 3개소, 차량기지 1개소)	2,053	2017-02-01	2022-01-30	10.0	풍수해 점검
60	신림선 도시철도 3공구 건설공사	L=2,471m(정거장 3개소, 환기구 1개소)	1,071	2017-02-01	2022-01-30	7.1	풍수해 점검
61	별내선(8호선연장) 건설공사(1공구)	L=1,184m, 정거장 1개소(서울 1개소, 경기 5개소)	802	2017-08-23	2023-08-21	1.2	풍수해 점검
62	별내선(8호선연장) 건설공사(2공구)	연장 2,536m [NATM 1.21km, 쉴드TBM 1.28km (단선병렬), 환기구 2개소]	1,338	2017-09-30	2023-09-28	0.4	풍수해 점검
	도시철도토목부	9개 공사장
63	하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사	L=628m(정거장 1개소)	746	2015-03-17	2019-03-28	50.8	풍수해 점검
64	하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사	L=471m(환기구1개소)	405	2015-03-30	2018-07-26	71.6	풍수해 점검
65	하남선(5호선연장) 궤도공사(1공구)	궤도부설 : 11.857km(단선) 분기기부설 : 13틀	58	2017-09-01	2018-12-31	14.7
66	지하철9호선 918공구	L=1.291km(정거장 1개소)	1,419	2010-02-19	2018-12-31	97.9
67	지하철9호선 919공구	L=1.2km(정거장 2개소)	2,041	2009-12-31	2018-12-31	95.9
68	지하철9호선 920공구	L=1.39km(정거장 1개소)	1,532	2009-12-31	2018-12-31	95.0
69	지하철9호선 921공구	L=1.74km((정거장 2개소)	1,784	2009-12-31	2018-12-31	95.3
70	지하철9호선 922공구	L=1.47km(정거장 1개소)	1,329	2010-09-16	2018-12-31	95.1
71	지하철9호선 923공구	L=1.7km(정거장 1개소)	1,026	2010-09-20	2018-12-31	96.0
	도시철도설비부	1개 공사장
72	지하철9호선 3단계 신호보안설비 공사	9호선 신호보안설비	57	2016-01-08	2018-12-22	94.7

(2018년)