연번	공사명(공구명)	공사개요	도급비 (억원)	착공일	준공 예정일	현재 공사추진사항	공정(%)
계	도시기반 시설본부	60개 공사장				토목부29, 건축부8,설비부1,방재시설부10,도시철도토목부8,도시철도사업부4
소계	시 설 국	48개 공사장
	토 목 부	29개 공사장
1	강남순환도시고속도로(4공구)	L=2.48km, B=4~6차로	1,673	2001-12-29	2016-05-19	* 구조물 1. 본선교 MBR2 상부 슬래브 철근 조립 2. 본선교 MBR3 상부 슬래브 거푸집 조립 3. 본선교 P11 기초 가시설 설치 및 암청소 4. DRA BR3 상부 슬래브 철근 조립 5. DRB-P2 교좌받침 거푸집 조립 6. DRB-P3 코핑 거푸집 볼트 해체 7. 기아천교 기초 가시설 설치	53
2	강남순환도시고속도로(5공구)	L=5.1km, B=6~8차로	4,029	2007-11-20	2016-05-19	토목공사 - 수서 방향 주행선 타일 - 환기소 탑 슬라브, 거더, 마감벽 철근 설치 - 3차선 빈배합층 골재포설, 다짐(성산) 건축공사 - 영업소 지하층, 1층 비드 설치 및 초벌 미장 전기 및 기계,소방공사 - 성산, 수서방향 전등분기함 사춤, 트레이 조인트 연결작업 - 영업소 위생/소화 배관 설치, 슬라브 매입배관	65
3	강남순환도시고속도로(6-1공구)	L=1.13km, B=3~4차로	1,442	2009-05-20	2016-05-19	◆ 토공 ◎ 시점부 - RAMP-C 보강토 굴착 및 Nail 천공, 그라우팅 주입 - 갱구부 사면녹화 시공 ◆ 터널공 ◎ 시점부 - Ramp-D종점 갱문 라이닝 거푸집 설치 ◎ 종점부 - 성산 3차로 비주대 라이닝 폼 셋팅 및 집진기실 새들 폼 조립 - 차량갱 철근 조립 및 라이닝 폼 수정 ◆ 구조물공 ◎ 시점부 - TRcM~통합집수정 상부 되메우기 - TRcM 2구간 E/A 및 띠장 해체 - RAMP-D 1BLOCK 기초 철근 조립 - RAMP-D 종점 갱문 라이닝 거푸집 설치 및 철근 조립 ◎ 종점부 - 성산 3span 시스템 동바리 설치 - 5span 벽체 거푸집 및 비계 해체 - 6span 내부,외부 비계 설치 - 성산 8span 상부 슬래브 철근 조립 및 내부 비계 설치 - 수서 7span 바닥 정리 ◆ 전기공 - 성산, 수서 공동구 케이블 트레이 설치 ◆ 기계,건축공 - 신림1터널 성산 소화배관 제작 및 소화전 내 상부 배관 설치 - 신림1터널 수서 소화메인 배관 및 내부배관 보온작업	67
4	강남순환도시고속도로(6-2공구)	L=2.4km, B=8차로	1,151	2009-04-01	2016-05-19	시점부 (터널공) - 성산 바닥정리 - 갱문유도등 케이블 입선 - 물분무 배관 (지하차도공) - 성산,수서 B/K - 성산 토류벽 보수 - 수서 버팀보 브레이싱 볼트체결, 중앙파일 찬넬 볼트 체결, 토류벽 띠장 설치 (부대공) - 성산 토류벽 비계 해체, 락볼트 지압판 체결, 토류벽 철근가공, 현장정리 종점부 (터널공) - 수서 선택층 골재 포설, 다짐, 살수 (구조물공) - 성토, 강재 거푸집 코팅, 구조물 측량 및 용지 측량	78
5	강남순환도시고속도로(7-1공구)	L=1.04km, B=6차로	685	2010-06-01	2016-05-19	터널공 1. 서초터널 비상주차대 라이닝 철근조립 2. 서초터널 대인용 횡갱 공동구 기초 콘크리트 타설 구조물공 1. 사당IC교 A2(수서) 벽체1단 거푸집조립 2. 사당IC교 A2(성산) 벽체1단 거푸집해체 3. Ramp-A지하차도 유입부 접속슬라브 터파기 전기 1. 서초터널 상부 트레이 설치용 앙카링 작업	76
6	강남순환도시고속도로(7-2공구)	L=2.7km, B=6차로	1,861	2008-04-01	2016-05-19	1. 서초터널 - 라이닝(차량갱): 거푸집조립 - 라이닝(비주대): 강재거푸집조립 - 터널내부타일붙임(성산방향) - 개착부 방수시트설치 2. 선암교 - 성산T1 강교소부재 도장작업 - 성산T4 강교소부재거치 - 수서T7 슬래브 동바리 및 거푸집설치 - 수서T9 슬래브 철근가공조립 3. 토공외 공사 1) 전기 : 배관, 케이블 트레이 및 덕트 설치 2) 기계 : 소화배관설치 3) 건축 : 작업준비 및 현장정리	79
7	강남순환도시고속도로(8공구)	L=7.96km, B=4~10차로 (교량 2개소, 지하차도 3개소)	2,215	2002-07-03	2018-07-30	- 화물지하차도 STA.1+230~280 주형보 받침 및 주형보 설치 - 주암교 수서방향 P2 벽체2단 거푸집 해체 및 되메우기 - 본선고가교 P3,4 노상 정리 및 현장 정비	25
8	겸재교 건설 및 연결도로 확장공사	교량 : L=395m, 15~20m, 도로 : L=750m, 20→30m,	294	2008-10-23	2015-12-31	■ 접속도로구간 - 시점 접속도로 방음벽 자재정리 - 시점제방로 하단 측구벽체 거푸집설치 ■ 램프구간 - 램프A,B 옹벽구간(좌) 천단 철근조립 - 램프A 교량구간 벽체거푸집설치(A2) - 램프B 옹벽구간 플륨관설치 - 현장정리	75
9	남부순환로-오정대로간 도로개설공사	강서구 발산동~부천시계 (남부순환로~부천시 오정대로 삼거리) - 도로개설 : B=40m L=1.23㎞ (폭 40m, 교량1개소)	98	2010-09-29	2015-12-30	1.비탈면 안정공 ○소일네일링 천공 및 네일조립 (STA.NO 0+880~0+930) 2.구조물공 ○가족길교 가시설 토류판 설치 (STA.NO 0+940~0+960) ○P/F빔 I거더 이음 용접 (STA.NO 0+800~0+880)	53
10	남부순환로(개봉역앞) 구조개선 공사	연결도로 2.3km, 지하차도 736m	459	2007-09-10	2015-06-30	- 옹벽공 ·두산경계 옹벽구조물 기초 철근가공조립 및 거푸집조립 - 토공, 도로 및 포장공 ·종점부 보도신설구간 도로 및 띠녹지경계석 설치 - 배수공 ·종점부 보도신설구간 측구 및 원형맨홀 설치 - 조경공 ·삼환~상우 아파트 앞 북측 띠녹지 조경수 식재 - 기타 ·보도공사구간 안전시설 설치, 보행안전도우미 배치 ·공사 안전시설 점검.정비, 현장정리 및 청소	95
11	동부간선도로 확장공사(2공구)	도로확포장 : L=3.2km (지하차도 2개소, 옹벽)	1,705	2008-12-30	2015-12-31	◎ 도봉5단계 BOX 육상구간(Sta.3+080~3+460) - 연결로 5 SPAN 2단벽체 철근조립 - 연결로 6 SPAN 상부슬래브 철근조립 - 본선 3 SPAN 3단찬넬 및 자재 인양 - 본선 4 SPAN 동바리 설치 - 본선 Arch-2 하부슬래브 콘크리트 타설 - 대피계단#2 3 SPAN 하부슬래브 계단거푸집 조립 ◎ 도봉6단계 BOX 육상구간(Sta.2+680~3+080) - Sta.3+030~080 피스브라켓,주형보,X브레이싱설치 - Sta.3+100 배수암거 줄파기 ◎ 도봉6단계 하천구간(Sta.3+855~4+105) - 4 SPAN 2단벽체 및 상부슬래브 방수 - 구조물 측벽 및 노체 되메우기, 가시설 해체	55
12	동부간선도로 확장공사(3공구)	도로확포장 : L=2,2km (지하차도 2개소, 고가차도, 보도육교)	558	2008-02-15	2015-12-31	- 장암지하차도 슬라브 철근가공,조립 및 거푸집설치 - 진입램프 어스앙카 시공, 띠장 시공 - 진입램프 옹벽가시설 띠장 시공 - 신설교각구간 호안블록 철거	52
13	방화대교 남단 접속도로 건설공사	L=1.046km, B=40m	660	2005-10-05	2015-10-31	현장주변 정리 및 안전시설물 보수 강교(Ramp-A/C/D) 지조립	90
14	서남권 돔야구장주변 보행자도로 및 고척교확장	- 보행광장 : B=30m, L=150m - 고척교 : B=37.5m→57.3m, L=203m	250	2013-04-08	2015-02-28	* 보행광장 - 5~5SPAN 슬라브 거푸집 해체 및 자재정리 - 6~7SPAN 낙하물방지공 해체 - 4SPAN 슬라브, 벽체 철근 및 거푸집 조립 - 1~3SPAN 추락방지망 설치 - 2~3SPAN 강재동바리 설치 * 고척교 - 북측G1,G3 하도도장 - 남측G6 복합소재바닥판 설치 - 축도 사토반출 * 경사로 - #1 A1~P3 교좌장치 설치 및 거푸집 조립 - #1 거더 지조립 및 용접 - #4 거더 용접 및 하도도장	80
15	서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사	- 고가철거 및 신설 L=753m (고가설치, 옹벽설치, 기존고가 보수보강)	171	2011-01-06	2015-12-31	1.시점부 보강토옹벽 다짐 및 블럭설치 2.교대A1~ 교각P6 교좌장치 무수축몰탈 타설 3.강교 소부재 조립 및 현장정리	64
16	선사로~고덕지구간 도로확장공사	B=8m→25m, L=3.72km	354	2009-01-06	2015-12-31	1. STA.1+400~700 노상정리 2. STA.1+700~800 우수관로 되메우기 3. STA.1+100 우수관로 되메우기 및 연결부 사춤 4. 암파쇄 방호시설(STA.1+560~690) X브레이싱 설치 5. STA.1+100~200 우수관로 흄관매설 및 되메우기 6. 가재골진입로 차선우회개통 관련 포장구간 물청소 및 현장정리 7. STA.2+060,2+120 도수로 거푸집 설치 8. 녹생토 GM 취부 작업 - 동상방지층포설(설계:64,131) 실적 / 누계 : 0 / 23,771 - 보도포장 실적 / 누계 : 0 / 5,000 - 자전거도로 포장 실적 / 누계 : 0 / 793 5) 부대공 - PE방호벽(설계:1,325) 실적 / 누계 : 0 / 1,482 - 가림막휀스(설계:2,348) 실적/누계 : 0 / 1,545 - 암파쇄 방호시설(설계:1,400) 실적/누계 : 0 / 180	63
17	신사사거리~고양시계간 도로개설공사	L=867m, B=4차로(터널 2개소)	240	2012-12-27	2015-12-26	● 터널공사 1. 개착터널(고양시방향) 1)시점(고양시) - 개착 라이닝 철근가공 및 조립 2)종점(서울시) - 개착 라이닝 거푸집조립 ● 토 공 1. 종점부(서울측) - 발파암 천공 및 발파 - 사면절취 및 바닥정리 - 발파암 운반	70
18	용비교~행당중간 도로개설공사	도로개설 L=718m, B=5~6차로	263	2007-03-22	2015-12-31	○부대공 - 교통안전시설물 순찰 및 정비	83
19	월드컵대교 건설공사	L=1,980m, B=6차로	1,760	2010-03-22	2015-08-22	■ 육상구간(북단IC) -R-C 복합말뚝 A구간 : 슬라브 콘크리트 양생 -R-C A-2 BOX : 벽체 및 슬라브 콘크리트 양생 -R-D P6 : 기초 철근 조립 -R-E P1 : 기초 철근 조립 -본선부 : 토공 작업 -북단접속교 A1 : 뒷채움 성토 및 다짐 -C구간 : 매립 폐기물 선별 및 반출 -분류하수관 보호공 PC-GIRDER 공장제작	22
20	율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사	L=800m, B=4→6차로(지하차도 300m)	253	2010-10-11	2015-06-30	1. 구조물 BOX 외부 벽체 중성화방지코팅 작업 2. STA.0+300-0+340 토공정리 3. 전기실 H-pile 천공 및 항타 4. 현장자재정리	47
21	응봉교 확장 및 성능개선 공사	중로아치교 225m, 접속교량 407m (기존교량 철거)	456	2008-10-20	2015-12-31	○구조물공 - 교각(P6) 기둥 철근 가공 및 조립 - 1구간 방음터널 기초 거푸집 조립 - 광희중학교 담장 벽돌쌓기 - P7,10 교각 면보수 ○부대공 - 교통안전시설물 순찰 및 정비	84
22	천호대로(광나루역) 확장공사	도로확장 L=900m, B=10차로(지하차도,옹벽)	399	2010-10-11	2015-12-31	-STA.0+300~6620(중앙부) 암파쇄방호시설 앵글 설치 -STA.0+455.5~474(좌) 지하차도 6SP 하부거더 거푸집 해체 -STA.0+511~529.5(좌) 지하차도 9SP 기초 철근 조립 -STA.0+529.5~585(좌) 지하차도 10,11,12SP 브라켓 거푸집 조립 -루프연결로 옥내변전실 벽체 및 슬라브 거푸집 해체	53
23	성암로 병목구간 개선공사	도로확장 및 개선 폭2→4차로, 연장 450m	23	2014-02-23	2015-05-23	-	78
24	잠실역 버스환승센터 조성사업	버스환승센터(A=19,797㎡, 지하1층) 환승정류장(8면), 버스주차장(23면)	828	2014-05-28	2016-09-27	1.교통처리 3단계 2단 가시설 설치 / 터파기 및 토사반출 2.교통처리 9단계 기존 아스콘 깨기 및 반출 3.교통처리 9단계 지장물 줄파기 4.교통처리 9단계 파일 천공 및 항타	12
25	도시고속도로연결램프(정릉길) 설치공사	신설램프 120m, 본선확장 82m	122	2013-12-01	2016-12-31	o P1, P2 순성토 반입 및 기초 되메우기 o H-PILE 자재반출 o 현장정리작업	6
26	구리암사대교 건설공사	L=1.1km, B=4~6차로(IC 2개소)	1,888	2006-04-05	2015-06-30	⊙ 주, 접속교량 - 교량 균열보수(MP9, MP12) ⊙ 암사IC ○ 도시계획도로 - 천호 3수문 벽체인상 철근 배근 ○ 가설 사무실 - 가설 사무실 내부 판넬 해체 및 현장정리 ○ 자전거 도로 - 보강토 옹벽 블록쌓기, 그리드 포설 및 토공작업 ○ Ramp-B, E - 교량 균열보수 ○ Ramp-F - 법면정리(STA.0+500~700) - V형측구 터파기(STA.0+600~740) - V형측구 벽체 거푸집 설치(STA.0+235~325) - 도수로 벽체 거푸집 해체(STA.0+650,680) ⊙ 아천IC ○ 한강시민공원 진입로 - 초기우수 처리시설 되메우기 - 법면정리(STA.0+660~0+760) - 보조기층 골재 포설 및 다짐(STA.0+660~0+760) ○ 강변북로 - 보조기층 토공정리 - 아스콘 포장 ○ Ramp-A - 느티나무 반입 및 식재 - 50mm 상수도관 부설 ○ Ramp-I - U형측구 벽체 거푸집 설치(STA.0+177~0+262)	97
27	구리암사대교연결도로 건설공사	L=1.44Km, B=31.5m	181	2012-08-02	2015-06-30	본선1구간(STA 1+300~2+180) 수림대 토공정리 및 자전거도로 맨홀인상(RAMP-B STA 0+080~290) U형측구 터파기 및 설치 (본선1구간 STA 1+300~2+180) 사면보강-계단식옹벽 콘크리트 타설(본선1구간 STA 1+580~620) 도수로 벽체 콘크리트 타설(본선1구간 STA 1+300~2+180) 녹지대 및 보도부 토공정리 (본선1구간 STA 1+300~2+180) 본선2구간(STA 2+340~2+738) 경계석 설치 (본선2구간 STA 2+340~2+738) 유공관, 투수시트, 투수골재 시공(본선2구간 STA 2+340~2+738)	67
28	신림~봉천터널 도로건설공사(2공구)	L=2.48km	1,690	2010-10-08	2017-12-31	□ 터널 - 구로방향 대인갱 신림1터널 접속부 라이닝 철근조립 □ 연직갱 부지 조성 공사 - 산마루측구 거푸집 설치 - 부지 정지	21
29	장안교(구교) 성능개선공사	교량성능개선 (폭17m 연장218m)	150	2014-12-10	2016-12-15	유관기관 협의 중(하천점용허가)
	건 축 부	8개 공사장				2
30	서남권야구장 건립공사	관람석 : 22,258석(연면적 80,451㎡)	1,243	2009-02-05	2015-06-30	1.돔구장(시설개선)설계변경 도면 작성 중 2.토목공사(B/H 10 1대,08 1대, 06 2대,03 1대, D/T 2대, V/R 1대) - 광장부 암거맨홀 및 우수관로 설치, 산벽 및 산벽구간 성토 및 다짐 3.지붕공사(크레인:220T1대,SKY 45 2대,28 1대) - 지붕 마감 후레싱,AL SHEET 하지 및 판넬 설치 4.조경공사 -체육시설 식재 5.AL창호공사 - CW10 복합판넬, 1층 매표소 하지틀,유공판넬 6.유리공사 - AW6 유리설치,AW37,32~35 유리시공/코킹 7.수장공사 - 지하1층 경량벽/지하1층,1층,3층,4층경량천장 - 외부데크천장,3층 스탠드 금속 8.석공사 - 외부계단 통석, 외야 철계단 석재 9.방수공사 - 지하차도 벽체 방수 10.잡공사 - 4층 보미터리 그릴창,외야차량출구 트렌치, 그라운드 E/J 마감판 11.도장공사 -2층 데크/외벽 수성,3층 바닥 면갈이	86
31	IT COMPLEX 건립공사	지하7층, 지상21층(연면적 81,956㎡)	1,834	2009-04-03	2015-10-06	1.건축 -지하2층 컨벤션홀 흡음벽체 설치, 대민동 홀벽체 타일 시공 -대민동 방화셔터 타공, 스카이로비 비계철거 -전문동15~18층, 대민동 2층 공조실 조적벽체 마감 -대민동 14층 E-sprots 난간보수, 무대스크린 벽체 수정 -지하층 카펫타일 하역 -전문동 14층 악세스 취부 작업, 전문동 12층 FM4 스튜디오 객석합판 취부 -지하2층 컨벤션 및 동시통역실, 대민동 1층홀 천정틀 설치 및 석고 취부 -지하1,2층 벽체 새김 및 도장, 전문동18,19층 항온항습실 퍼티 및 도장 -지하1층, 대민동 1층, 17층 홀 벽체 및 천정 도장 -전문동 1~3층 천정마이톤 시공, 19층 SMC천정 계딴 옥탑 천정 취부 2.설비 -대민동10층, 전문동 4층 SP 및 배관설치, 대민동 1~14층 수압테스트 -지하2,7층, 대민동 10층 전문동 7,17층 배관공사 -전문동18~19층 덕트공사, 지하7층, 전문동21층 보온 3.전기 -대민동7층 엑셀라인 설치, 소방감지기 입선 -전문동 스튜디오 분전반 커버 설치 -지하5층 분전반 취부	82
32	돈화문 국악예술당 신축공사	지하3층 / 지상1층, 연면적 1,800㎡	54	2013-12-17	2015-06-16	1. 현장정리정돈 2. 지수판 설치 및 합벽앙카 설치 3. 공조실, 화물용 엘리베이터 부위 철근 가공 및 조립	51
33	서울과학관건립공사	지하1층, 지상3층(연면적 12,330㎡)	99	2014-01-13	2016-01-12	1.철근콘크리트공사 - 기획전시실 브릿지, 상설전시실#2구간 보 및 슬라브 설치 - 계단실#3 거푸집 조립, 에스컬레이터구간 거푸집 설치 - 강당홀, 어린이전시실 철근 보강 및 수정 2. 시스템 - 로비홀, 중앙홀 경사로구간 시스템 설치 3. 직영 - 야외계단#2, 에스컬레이터구간 안전난간설치	20
34	양천주민편익시설 리모델링 및 증축공사	지하3층, 지상1층(연면적 5841㎡)	126	2014-12-01	2016-06-30	현장정리 및 안전시설물 설치 철골공사 - 시공계획서 발표회 (kick-off meeting) 지정공사 - 시공계획서 보완 수정 정기 안전점검(구조) - 보고서 작성	9
35	재사용플라자건립공사	지하2층,지상5층(연면적16,529㎡)	444	2015-01-15	2017-01-14	○ 도면검토 현장 및 현장주변 정리 ○ SCW시공 계획서 작성 및 시공상세도 작성 ○ 가이드빔 제작	4
36	서울시어린이 병원 건립공사	지하2층,지상5층(연면적11,950㎡)	235	2013-01-02	2017-04-30	철거 잔재 및 폐기물 정리작업	6
37	북한산성 4단계 1차보수정비공사	성곽 및 여장, 보수정비(380m)	14	2014-12-12	2015-12-06	1.기존석재 채집 작업	1
	설 비 부	1개 공사장
38	서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업	분뇨처리용량 : 4,000㎥/일	635	2012-11-15	2015-11-09	◆ 토목공사 -. 지하2층 SEC1 시스템동바리 해체 / 자재정리 및 인양 -. 지하2층 SEC1 외부 거푸집 해체작업 -. 지하2층 SEC1 외부 내측 모체침투방수작업 -. 지하1층 SEC1 지하1층 내부 벽체 및 기둥 철근조립 -. 지하2층 SEC2,2-1 슬래브 Con`c양생 -. 지하2층 SEC2,2-1 외,내부벽체 거푸집 자재정리 -. 지하1층 SEC2,2-1 내부 벽체 철근조립 및 비계설치 ◆ 전기공사 -. HI-PVC 벤딩가공작업 -. 지하1층 SEC1,2 벽체매입배관 ◆ 기계설비공사 -. 지하2층 SEC1,2 소화전 매립배관설치	46
	방재시설부	10개 공사장
39	신월빗물저류 배수시설등 방재시설 확충공사		954	2013-05-27	2016-05-25	- 저류배수터널 : STA.176+3.3~176+5.3 구간 장약 및 발파(주간) : 버력반출, 숏크리트 타설, 락볼트 천공 및 설치 : STA.176+1.3~176+3.3 천공(야간) - 유지관리수직구 : 9단 굴착 및 토류판 설치 - 환기수직구 : 9단 링빔설치 및 홈메우기 - 저지수직구1 : 9단 굴착 및 토류판 설치 - 저지수직구2 : 11단 토류판 및 보걸이 설치	12
40	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업	고도처리 115만톤/일(시설현대화 36만톤/일)	2,786	2009-11-09	2015-08-09	1) 토목 □ 시설현대화 - 소화조 2-2구간 암 파쇄 및 터파기 - 초기우수저류조 4-2,3,4구간 남측 기둥 및 2단벽체 거푸집 설치작업 - 생물반응조 5-1,3구간 터파기 및 토사 현장 내 운반작업 - 생물반응조 5-2구간 남측 중간슬래브 벽체 거푸집 해체작업 - 생물반응조 5-2구간 북측 중간슬래브 철근조립 및 거푸집 설치작업 - 이차침전지 6-4구간 중간슬래브 거푸집 설치작업 - 이차침전지 6-4구간 공동구 호퍼부 벽체 철근조립 및 거푸집 설치작업 □ 부대공 - 현장 주변 정리 및 청소/ 안전시설물 설치/ 양수기 관리작업	37
41	중랑물재생센터 고도처리시설 및 시설현대화	- 고도처리시설 개량 88만톤/일 - 시설현대화사업 25만톤/일	3,059	2009-02-13	2015-02-28	[토목공사] - 초기우수 역세수로 내부 프라이머 도포 - 생물여과R 질산화조 상부 공동구 면정리 - 생물여과R 질산화조 되메우기 - 총인처리시설L 2단 벽체 철근/거푸집 조립, 슬라브 거푸집 조립 - 총인처리시설R 방류수조 1단 벽체 거푸집 조립 - 총인처리시설R 방류수조 외부 비계 설치 - 총인처리시설 600A 슬리브 설치 - 시설현대화 유입관로 추진기지(#1) D2200 굴진기 설치 - 시설현대화 유입관로 도달기지(#2) 가시설 설치(3단)	69
42	탄천물재생센터 복개공원(4단계)공사	복개: A=33,978㎡, 공원화: A=36,920㎡	261	2013-10-01	2016-09-29	거더 접합부 마감공사 현장 정리정돈 ① PC제작 기둥(계획 - / 누계 1332)설치(계획 - / 누계 1069) 보 (계획 - / 누계 2433)설치(계획 - / 누계 1698) 슬라브 제작 (계획 - / 누계 21696 ㎡ ) 설치 (계획 - / 누계 3060 EA) ② Pedestal 설치 (계획 - / 누계 1353)PC 부재(보)반입 및 설치 ① PC제작 기둥(계획 3 / 누계 1271)설치(계획 - / 누계 1055) 보 (계획 10 / 누계 2275)설치(계획 17/ 누계 1607) 슬라브 제작 (계획 500 / 누계 19318 ㎡ ) 설치 (계획 - / 누계 2608 EA) ② Pedestal 설치 (계획 - / 누계 1327)	45
43	경의선숲길 공원조성공사	공원조성L=3.48km, A=84,268㎡	118	2013-09-30	2016-04-30	연남동 -B-C교차로 포장구간 토공정리 및 사고석 포장 -폰드C 마감 작업 -스틸엣지 설치 염리동 -폰드, 마을이야기, 캔들분수 마감 작업 -교차로(사고석), 인조화강석 포장 새창고개 -보령석쌓기 기초 설치 작업 -램프계단 화강석판석 마감 -콘크리트포장구간 골재포설,다짐 및 거푸집 설치 -잔디 식재	59
44	위례신도시 차집관로 증설공사	차집관로 : D=700~1100mm, L=4.4km	86	2013-11-22	2015-6-30	* 기존관 철거 (동부간선도로~광평교) * 식재작업(갈대) (탄천교~탄천1교) * 보도블럭복구 (시점부) * 폐기물 반출(폐콘크리트, 임목폐기물) * 공사가도 살수 (비산먼지제거) * 안전휀스및 울타리설치	89
45	공릉2빗물펌프장 신설및 면목4동배수관로		52	2013-01-08	2016-07-07	안전점검 지적사항 조치	48
46	경춘선 폐선부지 공원조성공사	공원조성L=1.90km, A=48,170㎡	61	2013-10-10	2015-05-15	-#2,3구간 교목/관목식재 및 지피/초화 식재작업 -#2,3구간 대합실의자 및 침목앉음벽 설치작업 -#1,2,3구간 화랑대로 안전휀스정비작업-#1구간 관목반입(1,350주)식재 및 식재면정리작업 -#1구간 계단,진입로 마감몰탈작업 -#2,3구간 경계석터파기/엘브엣지작업 및 식재면정리작업 -#2구간 계단철근배근 및 새터언덕 U형측구 정비작업(직영)	74
47	용두3 및 신이문 빗물펌프장 신, 증설공사	용두3 : 배수량 240㎥/min 신이문 : 배수량 875㎥/min	30	2013-01-03	2015-02-28	ㅇ전기실 -천정텍스 ㅇ펌프장, 계단실 -벽체 미장예산배정율 저조로 인해 공사중단	47
48	합정외 1 빗물펌프장 증설공사	합정펌프장 증설 : 218→378㎥/min 중동펌프장 증설 : 330→540㎥/min	47	2013-01-04	2016-04-30	1. 중동 현장 - 토출관 지중화 설계 검토 / 준비 - 정산 내역서 작성 및 보완 검토 - 준공 도면 작성 2. 합정 현장 - 지장가옥 수용 지연 (가옥주 미 퇴거) - 지장물 이설 협의 外	50
	도시철도국	12개 공사장
	도시철도토목부	8개 공사장
49	916공구	L=1,1km(정거장 2개소)	1,526	2008-06-02	2015-03-31	928정거장 - 배수턱 거푸집 해체, 환기덕트 청소, 오천주유소 앞 보도정비 929정거장 - 가로등 설치 928 S1 - 코엑스 앞 횡단보도 앞 판석시공 코엑스몰 - 토류판 자재정리, C,l,P 철근절단, 상부 자재정리 및 탄천 야적장운반, 폐기물 반출	99
50	918공구	L=1.291km(정거장 1개소)	1,377	2010-02-19	2016-02-17	▶ 터널1구간 - 터널 방수자재 하역 및 ECB방수쉬트 설치 ▶ 터널2구간 - 개착1구간 토공굴착 및 버력운반 - 터널 기초 물받이 골재채움 ▶ 개착2구간 - 상부 가드레일 보수 - 12span 벽체1단 철근조립 - 13span 벽체 거푸집 설치 준비 - 15~19span 되메우기 및 정리/다짐 / 강재 토류판 고정핀 해체 ▶ 931정거장 - 2span 지하1층 상부슬라브, 벽체3단철근조립 - 8span 지하1층 상부슬라브시스템동바리해체 - 14span 지하2층 사각기둥 콘크리트 타설, 중간슬라브 합판거푸집 및 헌치폼설치, 벽체2단방수 - 정화조지하3층 벽체 거푸집해체 - 외부E/V#1 PIT 콘크리트타설 - 8,9span 지하1층개구부마감 ▶ 개착3구간 - 22span 되메우기 및 정리 - 30span 기초슬라브 콘크리트 타설 - 32span 기초슬라브 철근 하역 및 현장 가공 ▶ 지중(동공)점검 - 공사구간 순찰, 육안점검	59
51	919공구	L=1.2km(정거장 2개소)	2,041	2009-12-31	2015-12-29	- 집수정 펌프 가동 상태점검 ▣ 931S1 환기구 - 1단 벽체 철근조립 및 거푸집 설치 - 918공구 경계구간 피스브라켓 설치 ▣ 932정거장 - 시점(931S2E2) 복공턱 포장 - 지하 1층 ㄷ-형강 해체(5Span) - 상부슬래브 방수 몰탈 타설(6, 7, 8Span) - 상부슬래브 동바리 해체, 측벽 되메우기(7Span) - 지하 1층 ㄷ-형강 해체(10Span) - 상수도(D2200) 복구공 비계해체 및 복구공 거푸집 해체(12Span) - #1, 2 출입구 파일이어내리기, 도시가스관 보호공 설치 - #3, 4 출입구 ㄷ-형강 설치 ▣ 933정거장 - 지하 1층 1단 벽체 채움 거푸집 설치(5Span) - 지하 1층 1단 벽체 거푸집 설치(6Span) - 지하 1층 2단 벽체, 2단 마감벽 동바리, 거푸집 설치(7Span) - 지하 1층 기둥 철근조립, 지하 2층 구조물 면정리(7Span) - 지하 1층 2단 벽체, 2단 마감벽, 슬래브 철근조립(9Span) - #1, 2 출입구 토공굴착, 버팀보, 띠장 설치 - #5, 6 출입구 주형보 설치, 기존 구조물 깨기, 토공굴착 ▣ 쉴드터널 - 쉴드 TBM 굴진 및 세그먼트 조립(502링) - 932정거장 터널2구간 상선 도달부 바닥철판 용접 및 설치	41
52	920공구	L=1.39km(정거장 1개소)	1,532	2009-12-31	2015-12-29	[쉴드 TBM 구간-BOX1] -1구간 상행선 레일 해체 및 반출 -쉴드TBM 유턴 -문형크레인 해체 및 반출 [4환기구] -B/K 작업 및 토사반출 -연경암 천공 및 할암 작업 -어스앙카 보걸이 및 띠장 설치 -UPRS(웅산빌딩)구간 버팀보 제작 및 설치 -UPRS(웅산빌딩)구간 ㄷ형강 및 보강앵글 설치 -UPRS(웅산빌딩)구간 3단 내부굴착 및 지보재 설치 -UPRS(웅산빌딩)구간 토류벽 거푸집 조립 [934정거장~BOX2구간] -정거장 동바리 및 거푸집해체(4,12span) -정거장 상부 슬라브 방수 준비(2,3span) -3환기구 기초철근 이동 및 조립(2span) -BOX2 B/K 작업 및 집토작업 -BOX2 연경암 천공 및 할암작업	55
53	921공구	L=1.74km((정거장 2개소)	1,707	2009-12-31	2015-12-29	(935 정거장) ■ 본선 및 정거장 공사 - 상부슬라브 슬라브 설치작업(10스판) - 상부슬라브 철근 조립작업(10스판) - 상부슬라브 동바리 해체작업 (3스판) - 강관버팀보 해체 작업(5스판) - 토공굴착 및 가시설 작업(환기구) - 측벽 되메우기 작업(7~8스판) (936 정거장) ■ 본체구조물 - 지하2층 동바리 설치 작업(5스판) - 지하2층 슬라브 철근 조립 작업 - 바닥 방수 작업(역무실) - 지하2층 측벽되메우기 작업(8스판) ■ 환승통로 - NTR 선도관 강관압입 ■ NATM터널 - 상행선 인버트 철근조립 - 하행선 ECB방수 시트작업 (쉴드터널) ■ 쉴드발진부(본선) - 롤러커터 교체 - 터널 하선부 레일 및 침목 정비 - 터널 상선부 인버터 거푸집 해체 및 정리	48
54	922공구	L=1.47km(정거장 1개소)	1,317	2010-09-16	2016-03-17	■ 937정거장 - 1SPAN 기초철근 조립 - 3SPAN 중간 슬라브 동바리 설치 - 4SPAN 중간슬라브 콘크리트 양생 - 5SPAN 방수면정리 및 프라이머 도포 - 7SPAN 채움 거푸집 설치 - 8SPAN 중간슬라브 철근조립 - 8SPAN 중간슬라브 거푸집 설치 ■ 936S2E2 - 작업사항없음 ■ 본선 집수정 - 작업사항없음 ■ 본선 1터널 1.상선 - 콘크리트 배관설치 작업 2.하선 - 인버트 철근 조립(17~20span) ■ 본선 2터널 1.상선 - 현장정리 2.하선 - 라이닝 철근 조립 및 운반(15span) - 라이닝 콘크리트 타설(10span) ■ 본선 3터널 1.상선 - 횡갱부 철근 가공 및 조립 - 횡갱부 작업발판 동바리 설치작업	59
55	923공구	L=1.7km(정거장 1개소)	982	2010-09-20	2016-03-21	□ 본선터널 1.1. 현장 □ 본선1구간(937S2) 1. 1span 1단벽체 방수작업 2. 15~16span 상부슬라브 되메우기 / 3. 18span 4단띠장 해체 및 인양 4. 21span 상부슬라브 거푸집 해체 / 5. 22span 동바리보강 및 상부슬라브 철근 조립 6. 24span 1단벽체 방수작업 / 7. 구조물 중앙파일 하단부 정리 □ 938 정거장(937E2, 938E1) 1. 정화조 1단벽체 방수작업 / 2. 30span 중간슬라브 2단거푸집 해체 3. 31~32span 좌측 측벽 되메우기, 우측 채움 콘크리트 타설 4. 33span 중간슬라브 철근 조립 및 동바리 보강 / 40span 1단버팀보 해체 인양 5. 36span 동바리,합판,거푸집 설치 및 2단벽체 철근 조립 / 지하2층 중앙기둥 콘크리트 타설 6. 37span 지하2층 2단벽체 방수작업 / 7. 39span 지하1층 1단벽체 콘크리트 타설 □ 본선2구간(938S1) 1. 복구#2(41k 060~100) 좌측 복공판 및 주형보 해체, 노상성토 및 골재포설 2. 종점연장구간 우측 측벽 파일부 줄파기	57
56	우이~신설 궤도공사	L=23.4km(정거장 1개소)	198	2009-09-15	2016-11-30	[1공구 차량기지~L03정거장종점] - 0km145.3~1k763.0 L=1km908.3 - * 유치선#1,#4,#6 현장 콘크리트타설구간 양생 및 해체 * 유치선#3,#5 분기기3틀(109,112,113) 차회타설계획 (4/30,목) 가설재 배열 [2공구 L03정거장종점~L07정거장종점] - 1km763.0~4km995.8 L=3km232.8 - * 작업없음 [3공구 구간 L07정거장종점~L10정거장종점] - 4km995.8~8km167.5 L=3km171.7 - * 작업없음 [4공구 구간 L10정거장종점~과업종점] - 8km167.5~11km262.23 L=3km094.73 - * 콘크리트 타설구간 양생 및 해체 * L10~L12정거장 하선 궤광조립 및 자재 배열 * 상선 9k600~10k200 L=600m 차회 타설계획(4/29,수)콘크리트 타설계획구간 체결구 조립,2차 선형 정정,횡단 및 측면배수로 설치,현장콘크리트 타설전 검측	20
	도시철도사업부	4개 공사장
57	우이신설 1공구	L=1.9km(정거장 3개소)	1,070	2009-09-15	2016-11-30	[토목] ○차량기지[우이동유원지입구~견인차보관소] - 18~19SP 좌측벽체 동바리 보강 및 물청소 - 원형광장 자재정리 ○L01정거장[견인차보관소] - 1SP 기능실 A동 시스템동바리 및 내벽거푸집 설치 - 1SP 상부 슬래브 철근조립 ○본선2구간[서울효요양병원~하나은행] - 방학선 슬래브 철근조립 및 거푸집 설치 ○L02정거장[GS주유소앞] - 2SP 슬래브 철근조립 - 2SP 환기구 거푸집 설치 - A동 복공판 및 주형보 해체 ○L03정거장[연탄굴뚝앞] - 2SP 기능실 2단 벽체 및 슬래브 거푸집 설치 - 3SP 기능실 2단 버팀보 해체 - 3SP 2단 수직수평 앵글해체	68
58	우이신설 2공구	L=3.2km(정거장 4개소)	1,157	2009-09-15	2016-11-30	○4정거장[파리바게트 앞] &lt;토목&gt; - 환기구 동바리 설치 ○본선4구간[송암교회 앞] - 슬래브 철근 조립(#2) - 슬래브 거푸집 설치(#3) ○5정거장[화계사 사거리 앞] - 벽체 철근 조립(#1) - 보조파일 설치(#2) ○본선5구간[삼미건재상회 앞] - 슬래브 거푸집 설치(#1) - 벽체 되메우기(#2) ○6정거장[삼성래미안아파트앞] - 승강장 거푸집 해체 - 보조파일 설치 - 외부#1 E/S 벽체 철근 조립 ○7정거장[솔샘동물병원앞] - L06S2(급기) 및 비상탈출통로 벽체 철근 조립	73
59	우이신설 3공구	L=3.1km(정거장 3개소)	967	2009-09-15	2016-11-30	○ L07E환기구(옥이슈퍼앞) 본선1터널 - 라이닝 폼 이동 및 철근조립 L07E환기구 - 기초철근조립 ○ L08E환기구(풍림아파트앞) 본선3터널 - 현장자재정리 본선4터널 - 중앙기둥 거푸집 해체, L08E-접속부 거푸지 설치, 비상계단 해체 ○ L09E환기구(미래전자앞) 본선5터널 - 대피통로 기둥 거푸집 설치/L09E 방수철판용접 본선6터널 - 라이닝 철근조립, 배수확인구 청소, 폼제작 ○ L08정거장(미양초등학교앞) 2Span 지하2층 슬라브 콘크리트 양생 4Span 지하1층 동바리 설치 및 상부 슬라브 거푸집 설치 비상탈출계단 철근조립, 지하2,3층 자재정리 ○ L09정거장(청수교회앞) 1Span 1단벽체 철근조립 및 기둥 거푸집 설치, 동바리 설치 외부E/V 벽체 철근조립 ○ L10정거장(아리랑고개앞) 1,2Span 강재 정리 및 인양 2Span 채움 콘크리트 양생 집수정 덕트 거푸집 설치, 외부출입구 채움 거푸집 해체 3Span 지하2층 가시설 해체 외부출입구 방수철판 용접 및 벽체 철근조립	65
60	우이신설 4공구	L=3.1km(정거장 3개소)	1,006	2009-09-15	2016-11-30	○ L12E 환기구 - 환기덕트 줄파기 ○ L11 정거장 - 지하2층 슬라브 동바리 설치 - 환승통로 굴착 ○ L12 정거장 - 연결통로 굴착 ○ L13 정거장 - 지장물복구공구간 되메우기	69

5월 기동불시(정기) 안전점검 대상공사장